Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

18 октября 2017 года Дело № А50-24725/2017  

по делу по иску муниципального казенного учреждения "Пермблагоустройство"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику – открытому акционерному обществу "Пермдорстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании ответчика выполнить работы по устранению дефектов на гарантийном  объекте ул. Героев Хасана от ПНИТИ до ул. Хлебозаводская,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, - общество с ограниченной ответственностью "Передвижная  механизированная колонна - 214" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать открытое акционерное общество "Пермдорстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) выполнить в срок до 31.12.2017 работы по  устранению дефектов на гарантийном объекте ул. Героев Хасана от ПНИТИ до  

ул. Хлебозаводская: 

- устранить трещины в покрытии тротуара с шириной раскрытия до 2 см на  ПК 2+30-ПК 2+80 справа путем замены покрытия тротуара 50 м2;  

- устранить разрушение рабочего стыка покрытий проезжей части и съезда  на съезде вправо на ПК 5+00 (к ТЭЦ-6) путем замены покрытия 22 м2;  

- устранить трещины в покрытии тротуара с шириной раскрытия до 2 см по  ПК 6+00-ПК 6+28 справа (за остановкой «ЖБК-1») путем замены покрытия  тротуара 28 м2;  

- устранить трещины в покрытии тротуара с шириной раскрытия до 3 см по  ПК 7+22 справа (у пешеходного перехода) путем замены покрытия тротуара 16 м2;  

- устранить трещины с раскрытием до 2 см, протяженностью 5 м на правом  тротуаре, в створе пешеходного перехода на ПК 7+20 путем замены покрытия  тротуара 5 м2;  

- устранить выкрашивание материала покрытия на съезде справа на ПК  8+55 (к таможне) путем замены покрытия площадью 13 м;  

- устранить подвижку крышки и корпуса люка, расположенного по краю  газона, рядом с проезжей частью рядом с закруглением съезда вправо на Пк 8+55  (к таможне) путем переустановки люка колодца;  

- устранить просадку люка колодца по оси на ПК 15+32 путем  регулирования высотного положения люка колодца с восстановлением асфальто- бетонного покрытия 1 м2;  

- устранить разрушение тротуарной плитки на площади перед зданием ул.  Героев Хасана, 105 путем замены разрушенной тротуарной плитки в количестве 26  шт.;  

- устранить разрушение плиточного покрытия вокруг люков 2 шт. на  площади перед зданием ул. Героев Хасана, 105 пешеходный переход на  пересечении с ул. Иренской путем замены плиточного покрытия тротуара  площадью 2 м2;  

- устранить нарушение ровности плиточного покрытия тротуара на площади  перед зданием ул. Героев Хасана, 105 путем переукладки плиточного покрытия  тротуара площадью 7 м2;  

 - устранить перекрытие слоем покрытия люка колодца на пересечении  ул.Иренская и Краснополянская путем регулирования высотного положения люка  колодца с восстановлением асфальто-бетонного покрытия 1 м2;  

- устранить отверстие 0,25x0,25м в покрытии тротуара, воздушная полость  под покрытием на посадочной площадке ОАО «Велта» (у здания  ул.Краснополянская, 3) путем разборки покрытия, устройства щебеночного  основания, устройства нового покрытия - толщины по проекту, площадь 2 м2;  

- устранить не заделанные отверстия от отбора кернов на проезжей части ПК  12+00 справа путем ямочного ремонта 1 м2;  

- устранить раскрытие продольного рабочего шва 42 п.м. в асфальто- бетонном покрытии тротуара, просадки покрытия на ПК 11+05 - ПК 11+47 слева  путем замены покрытия тротуара на площади 15х2=30м2 (42-15)х1=27м2 (всего 57  м2);  

- устранить частые трещины с раскрытием до 2 см напротив магазина в доме  ул. Героев Хасана, 97 путем замены покрытия тротуара на площади 30 м2;  

- устранить отверстие в покрытии тротуара, воздушная полость под  покрытием на тротуаре слева на ПК 9+90 путем разборки покрытия, устройство  щебеночного основания, устройство нового покрытия - толщины по проекту,  площадь 2 м2;  

- устранить трещины с раскрытием до 5 см на тротуаре ПК 7+60 - ПК 7+83  слева (напротив школы № 94) путем замены покрытия тротуара 23 м2;  

- устранить просадку люка колодца с разрушением асфальто-бетонного  покрытия вокруг на тротуаре на ПК 7+22 слева у пешеходного перехода путем  переустановки люка колодца с восстановлением асфальто-бетонного покрытия 1  м2;  

- устранить отсутствие корпуса люка колодца у стойки светофора слева  после пересечения с ул. Усольская (ПК 3+55) путем установки нового корпуса с  крышкой.  

Взыскать с открытого акционерного общества "Пермдорстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  "Пермблагоустройство" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп.  

В случае неисполнения судебного акта до 31.12.2017 взыскать с открытого  акционерного общества "Пермдорстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу муниципального казенного учреждения "Пермблагоустройство" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме 189 462 руб. 00 коп.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения арбитражного  суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной  жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного  апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

 Судья Ю.Т. Султанова