АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045,  г.Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 207-55-15, факс (846) 226-55-26

http://www.samara.arbitr.ru

===================================================================

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А55-3152/2017

08 июня 2017 года

г. Самара

Резолютивная часть решения объявлена 05 июня 2017 года

В полном объеме решение изготовлено 08 июня 2017 года 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Ястремского Л.Л.,          

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании  05 июня 2017 года дело 

по иску департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара 

к обществу с ограниченной ответственностью "СамараПромТорг" 

о взыскании 361 430,54 руб. 

при участии в заседании

от истца – ФИО2, доверенность от 30.12.2016,

от ответчика – не явился,

установил:

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СамараПромТорг" о взыскании 361 430,54 руб. неустойки по муниципальному контракту №64/16 от 03.07.2014.

Определением суда от 17.02.2017 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 10.04.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, оценив доводы сторон, арбитражный суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Департаментом благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара и обществом с ограниченной ответственностью «СамараПромТорг» 03 июля 2014 года заключен муниципальный контракт № 64/14 на выполнение работ по ремонту и благоустройству парка Победы в Советском районе и благоустройству аллеи Трудовой Славы в Кировском районе городского округа Самара в рамках муниципальной программы городского округа Самара "Ветераны Самары" на 2012 - 2016 годы (далее -Контракт) на сумму 1 110 999,58 (один миллион сто десять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 58 копеек.

В соответствии с частью 2 статьи 94 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

Пунктом 7.1 статьи 7 контракта предусмотрено, что течение срока выполнения работ согласно контракту начинается с момента заключения контракта до 31.07.2014.

Пунктом 9.1 статьи 9 контракта установлено, что контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

По состоянию на 31.07.2014 согласно актам о приемке выполненных работ от 31.10.2014 №№ 1,2 и справке о стоимости выполненных работ № ФЗ-1 от 31.07.2014 подрядчиком передана заказчику и последним оплачена часть результата, предусмотренного контрактом, на сумму 449 929,84 рублей.

Частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 6.3 статьи 6 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

Требование о взыскании 250 330,58 руб. пени по состоянию на 31.12.2014 является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Контрактом предусмотрено выполнение работ по благоустройству парка Победы в Советском районе г.о. Самара и Благоустройство аллеи Трудовой Славы в Кировском районе г.о. Самара, в том числе работы по ремонту покрытия на тротуаре в объеме 5,3612 кв.м. и 5,3612 кв.м. соответственно.

Работы по восстановлению покрытия из асфальтобетонной смеси тип Д марки III с применением асфальтоукладчиков толщиной 5 см. без применения асфальтоукладчиков в объеме 1072,24 кв.м. фактически выполнены подрядчиком, но заказчиком не приняты и не оплачены, поскольку образцы асфальтобетона не прошли испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 9128-2009, что подтверждается протоколом № 263 испытания образцов асфальтобетона из дорожного покрытия от 29.07.2014 (столбцы 6, 12, 15 протокола).

Таким образом, подрядчиком ООО «СамараПромТорг» ненадлежаще исполнены обязательства по контракту, в связи с чем, в соответствии с пунктом 6.3.2. статьи 6 контракта, подрядчику был начислен штраф в размере 111 099,96 руб.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удоалетворению.

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь ст.  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СамараПромТорг" в пользу департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара 361 430,54 руб. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СамараПромТорг" в доход федерального бюджета 10 229 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

 Судья      Л.Л. Ястремский