17/2024-17001(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10648/2023

г. Петрозаводск

13 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Контраст ЛТД"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Фонда капитального  ремонта Республики Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  1 499 261 руб. 78 коп. - неустойки за нарушение срока выполнения работ по  договору от 10.08.2022 № 59/2022-р за период с 31.12.2022 по 01.08.2023, а  также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 023 руб.  

3. В остальной части иска отказать. 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Контраст ЛТД"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 4905 рублей.  

5. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Погосян А.А.