АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А15-999/2023

05 февраля 2025 года

г.Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Магомедовой А.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» (ИНН 

<

***>) к ООО «Пон» (ИНН 

<

***>)  

об обязании выполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 13.04.2020 № 832/АД-2020, а именно:  

- устранить образовавшиеся неровности (просадки) основания и уклонов поверхности на футбольном поле;  

- устранить образовавшиеся неровности основания и уклонов поверхности (просадки) на беговой дорожке;  

- устранить образовавшиеся неровности основания и уклонов поверхности (просадки) брусчатки;  

- устранить образовавшиеся трещины и просадки желоба для отвода воды за трибунами;  

- устранить образовавшуюся ржавчину на конструкциях металлического ограждения объекта и провести работы по их окраске;  

- устранить в административном здании в местах примыкания гипсокартонных потолков к стенам и самих стенах трещины;  

- устранить образовавшиеся трещины на фасаде, в местах примыкания блоков административного здания;  

- провести работы по гидроизоляции стены административного здания по оси «В», и восстановить обсыпающуюся часть штукатурки;  

- устранить образовавшиеся просадки асфальтного покрытия перед административным зданием;  

- провести работы на фасаде трибуны по восстановлению обсыпающейся части штукатурки;  

- провести работы по гидроизоляции потолков и стен санузлов, которые находятся под трибунами, и восстановить обсыпающуюся часть штукатурки;  

- устранить образовавшиеся просадки грунта вокруг локальных очистных сооружений; - провести работы по реконструкции поребриков вокруг беговой дорожки и футбольного поля;  

- устранить образовавшиеся смещения подпорных стен в местах деформационных швов, провести комплекс работ по усилению указанных подпорных стен;  

- провести работы по восстановлению креплений наружных кабелей (с учетом уточнений),  

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.  

 Обязать ООО «Пон» (ИНН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные недостатки выполненных работ по государственному контракту от 13.04.2020 № 832/АД-2020, а именно:  

- устранить образовавшиеся неровности (просадки) основания и уклонов поверхности на футбольном поле;  

- устранить образовавшиеся неровности основания и уклонов поверхности (просадки) на беговой дорожке;  

- устранить образовавшиеся неровности основания и уклонов поверхности (просадки) брусчатки;  

- устранить образовавшиеся трещины и просадки желоба для отвода воды за трибунами;  

- устранить образовавшуюся ржавчину на конструкциях металлического ограждения объекта и провести работы по их окраске;  

- устранить в административном здании в местах примыкания гипсокартонных потолков к стенам и самих стенах трещины;  

- устранить образовавшиеся трещины на фасаде, в местах примыкания блоков административного здания;  

- провести работы по гидроизоляции стены административного здания по оси «В», и восстановить обсыпающуюся часть штукатурки;  

- устранить образовавшиеся просадки асфальтного покрытия перед административным зданием;  

- провести работы на фасаде трибуны по восстановлению обсыпающейся части штукатурки;  

- провести работы по гидроизоляции потолков и стен санузлов, которые находятся под трибунами, и восстановить обсыпающуюся часть штукатурки;  

- устранить образовавшиеся просадки грунта вокруг локальных очистных сооружений; - провести работы по реконструкции поребриков вокруг беговой дорожки и футбольного поля;  

- устранить образовавшиеся смещения подпорных стен в местах деформационных швов, провести комплекс работ по усилению указанных подпорных стен;  

- провести работы по восстановлению креплений наружных кабелей. 

 Взыскать с ООО «Пон» (ИНН 

<

***>) в пользу ГКУ РД «Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта» (ИНН 

<

***>) 6000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.  

 Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Х.В. Оруджев