15/2023-26537(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А39-2591/2023

город Саранск

12 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2023 года.  Решение в полном объеме изготовлено 12 мая 2023 года.  

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог  Республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ДорМостПроект" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени в сумме 866 796 руб. 34 коп. и судебных расходов,  при участии в заседании:  

от истца: ФИО2 – представителя по доверенности № 138 от  01.12.2022,  

от ответчика: ФИО3 – представителя по доверенности от 06.05.2020,  

у с т а н о в и л:

Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных  дорог Республики Мордовия" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд  Республики Мордовия с иском к Обществу с ограниченной ответственностью  "ДорМостПроект" (далее – ответчик) о взыскании пени.  

Заявление мотивировано тем, что на основании контракта ответчик  выполнял работы по актуализации автоматизированного банка дорожных  данных. Работы выполнены несвоевременно. За нарушение сроков по  контракту ответчику начислены пени в сумме 866 796 руб. 34 коп. Указанную  сумму просит взыскать с ответчика.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования  поддержал.  

Представитель ответчика иск не признал. Факт нарушения сроков по  контракту не отрицал.  

Из материалов дела следует, что 30.08.2021 между сторонами заключен  государственный контракт № 0809500000321001496 на выполнение ответчиком  работ по актуализации автоматизированного банка дорожных данных «Титул2005» по управлению состоянием автомобильных дорог по результатам  комплексного специального обследования автомобильных дорог регионального  или межмуниципального значения Республики Мордовия.  

Календарные сроки выполнения работ в 2022 году определены сторонами  с 11.05.2022 по 15.08.2022 (пункт 5.2).  

Цена контракта с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2022  составила 112 424 111 руб. 81 коп.  

Работы выполнены ответчиком в полном объеме. Срок выполнения работ  в 2022 году ответчиком нарушен, что подтверждается Актом сдачи-приемки  выполненных работ № 19 от 23.12.2022 (работы по разработке проектов  организации дорожного движения выполнены 24.11.2022).  

Данные обстоятельства ответчиком не оспариваются.  

Пунктами 7.2, 7.3 контракта предусмотрено, что в случае просрочки  исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также  в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю  требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за  каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства,  предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается  в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного  этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную  объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим  отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных  подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской  Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

На основании указанных пунктов контракта ответчику начислена  неустойка за период с 16.08.2022 по 24.11.2022 в сумме 866 796 руб. 34 коп.  

Претензия истца о выплате неустойки оставлена ответчиком без  удовлетворения, что послужило основанием истцу для обращения в  арбитражный суд с настоящим иском.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что исковые  требования истца удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.  

Сложившиеся правоотношения сторон регламентируются нормами главы  37 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими нормами об  обязательствах и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд".  

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации,  подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские  работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных  или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или  муниципального контракта на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд. По государственному или  муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для  государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или  муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные,  

проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или  муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить  их или обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской  Федерации государственный или муниципальный контракт должен содержать  условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее  начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ,  способах обеспечения исполнения обязательств сторон.  

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть  предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми  актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за  нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы. Срок выполнения работ является существенным условием  договора подряда.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таковых условий и требований – в соответствии с обычаями  делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий, в силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской  Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой,  залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской  гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

В пункте 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации  указано, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом  или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Истцом представлен расчет пени на сумму 866 796 руб. 34 коп.,  правильность которого судом проверена. Период начисления пени истцом  определен правильно.  

Согласно части 9 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд" сторона освобождается от уплаты  неустойки только в том случае, если докажет, что неисполнение или  

ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие  непреодолимой силы или по вине другой стороны договора.  

Ответчик бесспорных доказательств тому, что ненадлежащее исполнение  обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине истца,  суду не представил.  

Таким образом, истцом обоснованно начислена ответчику неустойка за  нарушение срока выполнения работ по контракту.  

Довод ответчика о неправомерности начисления неустойки в период  действия моратория несостоятелен.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022   № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям,  подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации  сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и  граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.  

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  24.12.2020 № 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1  Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности  (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими  денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени  за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 НК РФ), а также иные  финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения  моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3  статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В  частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в  общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица  финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на  которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об  освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац  десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не  подавалось заявление о его банкротстве.  

Правила о моратории, установленные Постановлением № 497,  распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых  отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей,  юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного  постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов  недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов),  независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или)  недостаточности имущества либо нет.  

Учитывая изложенное, в период действия моратория (с 01.04.2022 до  01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые  санкции не начисляются.  

В настоящем случае, обязательства по выполнению работ возникли после  введения моратория, неустойка за нарушение сроков выполнения работ  относится к текущей задолженности ответчика, следовательно, в спорный  

период подлежит начислению неустойка в общем порядке, а предусмотренный  Постановлением № 497 мораторий на начисление неустойки неприменим.  

Однако, как предусмотрено частью 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ,  начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные  заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств,  предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке,  которые установлены Правительством Российской Федерации.  

В случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской  Федерации, в 2021 - 2023 годах положения пункта 8 части 1 статьи 95  настоящего Федерального закона также применяются к контрактам, которые  заключены на срок менее одного года и предметом которых является  выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,  сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению  объектов культурного наследия (часть 70 статьи 112).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №  783 (далее – Постановление № 783) утверждены Правила осуществления  заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом (далее - Правила).  

В соответствии с пунктом 2 указанного Постановления № 783 списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется  по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за  исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о  сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы  товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг,  предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи  с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя)  обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме  в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные  ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком  (подрядчиком, исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине  возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта  обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения  условий, в связи с введением политических или экономических санкций  иностранными государствами, совершающими недружественные действия в  отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или  российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением  иностранными государствами, государственными объединениями и (или)  

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями  иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер  ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Постановления № 783, если общая  сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5  процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая,  предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта.  

Как предусмотрено подпунктом «в» пункта 3 Постановления № 783,  списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется заказчиком, если неуплаченные неустойки (штрафы, пени)  начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не  зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек  (штрафов, пеней).  

Согласно пункту 5 Правил, при наличии документа о подтвержденных  сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек  (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и  неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является:  

а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3 настоящих  Правил, - исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств  (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в  2015, 2016 или 2020 году, подтвержденное актом приемки или иным  документом;  

б) в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3 настоящих  Правил, в дополнение к документам, указанным в подпункте "а" настоящего  пункта, - информация администратора доходов бюджета (бюджета  государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) о зачислении  уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм неустоек  (штрафов, пеней) в бюджет (бюджет государственного внебюджетного фонда  Российской Федерации) (если начисленная и неуплаченная сумма неустоек  (штрафов, пеней) возникла перед государственным (муниципальным)  заказчиком) или информация о зачислении средств, уплаченных поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) на счет заказчика, автономного учреждения или  юридического лица (если начисленная и неуплаченная сумма неустоек  (штрафов, пеней) возникла перед бюджетным учреждением, государственным,  муниципальным унитарным предприятием, а также автономным учреждением в  случаях осуществления им закупок в соответствии с частью 4 или  юридического лица в случаях осуществления им закупок в соответствии с  частями 4(1) и 5 статьи 15 Федерального закона "О контрактной системе в  сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд");  

в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3 настоящих  Правил, - исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств по контракту в 2020 году, подтвержденное актом  приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств, повлекших  невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции, представленное поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) заказчику в письменной форме с приложением  подтверждающих документов (при их наличии).  

Согласно пункту 4 Постановления № 783, списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании  учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик  в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов,  пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов,  пеней).  

В соответствии с пунктом 7 Постановления № 783, в случае если  поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и  неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее  списании не допускается.  

Таким образом, действующее законодательство устанавливает  следующие критерии, необходимые для списания неустойки по Контракту:  обязательства поставщика исполнены в полном объеме; сумма неустойки не  превышает 5% от цены Контракта; поставщик признает наличие неустойки.  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  государственному (муниципальному) контракту суд вправе самостоятельно  устанавливать наличие оснований для применения мер государственной  поддержки (Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 № 305-ЭС17- 23242).  

В настоящем случае обязательства по контракту ответчиком исполнены,  сумма неустойки не превышает 5% от цены контракта, ответчик признает  наличие неустойки. Следовательно, имеются достаточные основания для  применения вышеуказанных положений Постановления № 783 и отказа во  взыскании неустойки с ответчика.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично,  судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально  размеру удовлетворенных исковых требований.  

При подаче иска истцом была оплачена госпошлина в сумме 20 336 руб.,  размер которой соответствует требованиям статьи 333.21 Налогового кодекса  Российской Федерации. Поскольку требования истца оставлены без  удовлетворения, расходы истца по оплате госпошлины возмещению  ответчиком не подлежат.  

На основании изложенного, и, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный  суд  

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения  "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" оставить без  удовлетворения.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 8:43:00

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна