1189/2022-280363(2) 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 28 сентября 2022 года 

по делу А33-8764/2019 Красноярск

28 сентября 2022 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Сибагропромстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу закрытого акционерного общества  «Красноярское Монтажное Управление «Гидромонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) 9 871 138 руб. 86 коп. основного долга, а также 78 356 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить закрытому акционерному обществу «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального  бюджета 62 905 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной  по платежному поручению от 21.02.2019 № 237.  

 Встречный иск удовлетворить частично. 

Обязать закрытое акционерное общество «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» в срок 60 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного  акта, выполнить работы (в соответствии с условиями договора, утвержденного технического  задания, графических схем, а также «Архитектурного решения») в части установки ворот  подъемно - секционных фирмы «DoorHan» серии ISD01 на объектах склад № 7/2, Склад № 7/4  «Розничный центр «Агро Терминал», расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский  район между ул. Гайдашовка и Транссибирской железнодорожной магистралью».  

Обязать закрытое акционерное общество «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» в срок 30 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного  акта, выполнить работы, отражённые в приложении № 6 к экспертному заключению, а  именно:  

устранить недостатки по монтажу стеновых сэндвич панелей; устранить недостатки по изготовлению и монтажу металлоконструкций козырька; устранить недостатки по монтажу водосточной системы; 

устранить недостатки по монтажу металлоконструкций склада № 7.2 и № 7.4  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу  акционерного общества «Сибагропромстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.  Красноярск) 2 255 485 руб. неустойки, а также 36 346 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины, в доход федерального бюджета 23 060 руб. государственной  пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет встречных требований. 

В результате зачета Взыскать с акционерного общества «Сибагропромстрой» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу закрытого акционерного  

общества «Красноярское Монтажное Управление «Гидромонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) 7 657 663 руб. 86 коп. денежных средств.  

Обязать закрытое акционерное общество «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» в срок 60 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного  акта, выполнить работы (в соответствии с условиями договора, утвержденного технического  задания, графических схем, а также «Архитектурного решения») в части установки ворот  подъемно - секционных фирмы «DoorHan» серии ISD01 на объектах склад № 7/2, Склад № 7/4  «Розничный центр «Агро Терминал», расположенном по адресу: г. Красноярск, Советский  район между ул. Гайдашовка и Транссибирской железнодорожной магистралью».  

Обязать закрытое акционерное общество «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» в срок 30 календарных дней со дня вступления в законную силу судебного  акта, выполнить работы, отражённые в приложении № 6 к экспертному заключению, а  именно:  

устранить недостатки по монтажу стеновых сэндвич панелей; устранить недостатки по изготовлению и монтажу металлоконструкций козырька; устранить недостатки по монтажу водосточной системы; 

устранить недостатки по монтажу металлоконструкций склада № 7.2 и № 7.4  

Возвратить закрытому акционерному обществу «Красноярское Монтажное Управление  «Гидромонтаж» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального  бюджета 39 845 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной  по платежному поручению от 21.02.2019 № 237.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская