АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 

 тел. (4922) 47-23-41, факс (4922) 47-23-98 

Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru  Именем Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________________________________________  

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А11-13173/2022

11 июля 2023 года

г. Владимир

 

Резолютивная часть решения объявлена 04.07.2023.  Полный текст решения изготовлен 11.07.2023.  

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи 

Щавлёвой А.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело № А11-13173/2022 по исковому заявлению Управления  городского хозяйства администрации 

<

...>, г. Ковров, Владимирская область, 601900; ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) к Государственному унитарному предприятию  Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3»  (Судогодское шоссе, д. 5, 

<

...>; ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>) о взыскании 161 404 руб. 39 коп.,  при участии представителей сторон:  

от истца – ФИО2 по доверенности от 29.12.2022 № 07-30/6743 сроком  действия по 31.12.2023;  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 29.12.2022 сроком  действия по 31.12.2023 № 300, копия диплома,  

установил:

Управление городского хозяйства администрации города Коврова  (далее – Управление, истец) обратилось в арбитражный суд с исковым  заявлением к государственному унитарному предприятию Владимирской  области «Дорожно-строительное управление № 3» (далее – ГУП «ДСУ-3»,  ответчик) о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение контракта  от 15.03.2021 № 0128200000121000455_52323 в сумме 161 404 руб. 39 коп.  

Ответчик в отзыве на исковое заявление от 20.12.2022 исх. № 3467-Ю и  в дополнениях к возражениям на исковое заявление от 28.06.2023 с исковыми  требованиями не согласился.  

В судебном заседании 27.06.2023 в порядке статьи 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до  04.07.2023 до 10 час. 40 мин.  

После перерыва стороны в судебное заседание не явились. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей лиц,  участвующих в деле, по имеющимся в материалах дела доказательствам.  

Оценив, представленные в материалы дела доказательства, заслушав  позиции лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к выводу об  отказе в удовлетворении исковых требований, исходя из следующего.  

Из материалов дела следует, что 15.03.2021 между истцом (заказчик) и  ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт  

 № 0128200000121000455_52323 (далее – контракт), в соответствии с пунктом  1.1 которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту  автомобильной дороги до микрорайона Заря, согласно приложению № 1 к  контракту (ведомости объемов работ), приложению № 2 (локальные сметы).  приложению № 3 (график выполнения работ), приложению № 4 (протокол  согласования контрактной цены), приложению № 5 (акт приема передачи по  результатам работ) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.  

Согласно пункту 1.3 контракта место выполнения работ: автомобильная  дорога до микрорайона Заря.  

Дата начала работ - с момента заключения контракта, дата окончания  работ – 01.07.2021. Работы должны быть выполнены в соответствии с  графиком выполнения работ (приложением № 3 к настоящему контракту).  Подрядчик по согласованию с заказчиком имеет право досрочно выполнить  работы и сдать их заказчику. При этом срок окончания работ определяется  моментом подписания заказчиком и подрядчиком акта о приемке  выполненных работ по форме № КС-2 (пункт 1.4 контракта).  

Объем работ, предусмотренный контрактом, может быть изменен по  предложению заказчика не более чем на 10 % путем заключения  дополнительного соглашения (пункт 1.5 контракта).  

В силу пункта 2.1 контракта гарантии качества распространяются на все  конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по  настоящему контракту. Объем предоставления гарантий качества работ  объекта – 100%.  

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ – 4 года с  даты подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма   № КС-2) на асфальтобетонное покрытие; в течение 3 (трех) месяцев с даты  подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2  при нанесении дорожной разметки эмалью, в течение 1 (одного) года с даты  подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2  при нанесении дорожной разметки термопластиком. Указывать гарантийные  сроки конструктивных элементов автомобильных дорог и технических  средств организации дорожного движения, которые присутствуют в «Акте о  приемке выполненных работ (форма № КС-2), в соответствии с отраслевым  дорожным методическим документом 218.6.029-2017 (ОДМ 218.6.029- 2017) «Рекомендациями по установлению гарантийных сроков  конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств  организации дорожного движения», разработанными дорожным агентством  Министерства транспорта Российской Федерации и рекомендованными к  применению распоряжением Росавтодора от 15.12.2017 № 4000-р. Так же в  «Гарантийном паспорте» прописать гарантийные сроки выполненных  работ по всем автомобильных дорог отдельно, занесенным в  

соответствующий «Акт о приемке выпо; работ» (форма № КС-2) (пункт 2.2  контракта).  

Срок предоставления гарантий качества на материалы и оборудование:  соответствии со сроками, установленными их производителями. Гарантийное  обслуживание в пределах срока гарантии. Подрядчик обязан предоставить  заказчику вместе с материалами документ, подтверждающий обязательства  подрядчика по гарантии качества на материалы. Гарантийные обязательства  на материалы оформляются в виде гарантийных паспортов. В период  гарантийного срока все необходимые ремонтные работы, устранение  дефектов замена деталей должны осуществляться бесплатно для заказчика  (пункт 2.3 контракта).  

Согласно пункту 2.4 контракта если в период гарантийной эксплуатации  объекта обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан их устранить за свой  счет и в согласованные с заказчиком и организацией, осуществляющей  технический надзор (строительный контроль), сроки. Для участия В  составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их  устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3  дней со дня получения письменного извещения заказчика. Работы по  устранению дефектов в гарантийные сроки оформляются аналогично акту  выполненных работ формы № КС-2 для определения собственных затрат  подрядчика на данные работы. Если гарантийные обязательства не  выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь для  выполнения этих работ другого подрядчика с последующим взысканием  расходов с подрядчика в установленном действующим законодательством  порядке.  

В соответствии с пунктом 2.5 контракта при отказе подрядчика от  составления или подписания акта обнаруженных дефектов, заказчик  составляет односторонний акт, либо акт с привлечением экспертов, все  расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляется ему  в полном объеме.  

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов  объекта в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент  объекта устанавливается вновь с момента (даты) завершения работ по  устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом (пункт 2.6  контракта).  

В случае несоответствия материалов требованиям подрядчик обязуется в  течение 10 дней с момента предъявления претензии произвести замену таких  материалов на качественные или произвести допоставку материалов своими  силами и за свой счет. Некачественные материалы считаются не  поставленными. При невозможности замены материалов в установленный  срок заказчик вправе отказаться от исполнения условий контракта (пункт 2.7  контракта).  

В силу пункта 3.1 контракта цена контракта составляет 42 825 999 руб.  60 коп. и включает НДС (20%) в сумме 7 137 666 руб. 60 коп.  

Пунктом 3.3 контракта предусмотрено, что заказчик обязуется оплатить  выполненную работу в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания  документов о приемки выполненной работы.  

Пунктом 7.1 контракта оговорено, что приемка объекта (выполненных  работ) осуществляется заказчиком и организацией, осуществляющей  технический (строительный контроль) в соответствии с действующим  законодательством, действующими нормативно-техническими документами,  

определяющими правила приемки в эксплуатацию законченных устройством  объектов.  

За 3 (три) рабочих дня до полного завершения работ подрядчик в  письменной форме уведомляет заказчика о необходимости приемки  выполненных работ (пункт 7.2 контракта).  

Заказчик в течение трех (трех) рабочих дней со дня получения актов  формы КС-2 (подписанных, организацией осуществляющей технический  надзор (строительный контроль), справок КС-3 и подтверждающих  документов к ним (п. 4.28 не менее чем в 4 экземплярах на  бумажном носителе) обязан проверить их на соответствие выполненным  работам и подписать или направить подрядчику мотивированный отказ от  приемки выполненных работ (пункт 7.4 контракта).  

В соответствии с пунктом 8.1 контракта в случае просрочки исполнения  подрядчиком обязательств по контракту, заказчик направляет подрядчику  требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на  дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом  исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком. Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства.  

Согласно пункту 8.2 контракт за каждый факт неисполнения или  ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных  контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате штрафа.  Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена  контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;  

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта  (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта  (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена  контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей  (включительно);  

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена  контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей  (включительно);  

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена  контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей  (включительно);  

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае если цена  контракта (этапа от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);  

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае если цена контракта  (этапа) со от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно):  

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена  контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.  

Как усматривается из пункта 8.3 контракта за каждый факт  неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем  закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных  Федеральным законом 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за  право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения  подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование  об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную  (максимальную) цену контракта:  

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена  контракта не превышает 3 млн. рублей;  

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена  контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена  контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);  

б) в случае, если цена контракта превышает начальную  (максимальную) цену контракта:  

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.  рублей:  

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.  рублей до 50 млн. рублей (включительно);  

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.  рублей до 100 млн. рублей (включительно).  

Пунктом 8.4 стороны согласовали, что за каждый факт неисполнения  или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, которое не  имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких  обязательств), за исключением просрочки исполнения подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате штрафа.  

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до  50 млн. рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей  до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.  

Согласно пункту 8.5 контракта в случае если законодательством  Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем  

порядок, предусмотренный Правилами, утвержденными постановлением  Правительства российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого  штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в  соответствии с законодательством Российской Федерации.  

За неисполнение подрядчиком условия о привлечении к исполнению  контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства,  социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается  штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного  контрактом (пункт 8.6 контракта).  

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее  исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта (пункт  8.7 контракта).  

В силу пункта 8.7 контракта за каждый факт неисполнения заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки  исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе  потребовать уплаты штрафа.  

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:  

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей  (включительно);  

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до  50 млн. рублей (включительно);  

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей  до 100 млн. рублей (включительно);  

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать  цену контракта (пункт 8.9 контракта).  

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств подрядчик  вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей  на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34  Федерального закона 44-ФЗ) (пункт 8.10 контракта).  

Дополнительным соглашением от 20.07.2021 № 1 к контракту стороны  согласовали, что цена в связи с уменьшением предусмотренного контрактом  объема выполняемых работ ценой контракта считать сумму равную  41 923 218 руб., включая НДС (20 %) в сумме 6 987 203 руб.  

Во исполнение условий контракта ответчик выполнил оговоренные в  контракте работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ  от 22.07.2021 № 1.  

В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств,  предусмотренных контрактом (нарушение сроков выполнения работ по  контракту) истцом в адрес ответчика направлено требование от 05.08.2021  

исх. № 07-31/3707 об уплате неустойки в сумме 161 404 руб. 39 коп. в  течение 10-ти дней с момента получения требования. Требование осталось  без ответа и удовлетворения.  

Вышеперечисленные обстоятельства послужили основанием для  обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.  

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ) договор является основанием возникновения  гражданских прав и обязанностей.  

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными  обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).  

Возникшие между сторонами спора отношения, направленные на  обеспечение государственных и муниципальных нужд, регулируются также  положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и  оплатить его (статья 702 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между  сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения  отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено  законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного,  так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов,  заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика  досрочно.  

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором  подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу  (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих  результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику (пункт 1 статьи 720 ГК РФ).  

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и  изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе  государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных  

работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 ГК  РФ).  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее -  государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется  выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и  ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера  работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а  государственный или муниципальный заказчик обязуется принять  выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2  статьи 763 ГК РФ).  

В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость,  допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

В силу пункта 1.4 контракта дата начала работ – с момента заключения  контракта, дата окончания работ – 01.07.2021.  

Из материалов дела следует, что ответчик выполнил оговоренные в  контракте работы 22.07.2021 с нарушением установленного контрактом  срока, что подтверждается актом о приемке выполненных работ № 1.  

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами  обязательств по договору поставки предусмотрены статьями Гражданского  кодекса Российской Федерации, регулирующими общие положения об  обязательствах, а также специальными нормами.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника,  поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным  платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1  статьи 330 ГК РФ).  

В силу пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности  заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

На основании частей 5, 7, 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан  установить в контракте размер пени в случае просрочки исполнения  заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер пени,  

определенный в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств по контракту, а также размер штрафа в виде  фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение  сторонами своих обязательств по контракту.  

Пунктом 8.1 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения  подрядчиком обязательств по контракту, заказчик направляет подрядчику  требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на  дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,  предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом  исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком. Пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком  обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства.  

Ссылаясь на нарушение условий контракта истец на основании пункта  8.1 контракта начислил ответчику пени в размере 161 404 руб. 39 коп.  

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Закон № 44-ФЗ начисленные  поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы  неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим  исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных  контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены  Правительством Российской Федерации.  

Случаи списания неустойки в соответствии с частью 42.1 статьи 112  Закона № 44-ФЗ установлены Постановлением Правительства Российской  Федерации от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении заказчиком списания  сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику,  исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств,  предусмотренных контрактом».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2022  № 439 скорректированы Правила № 783. 

В соответствии с пунктом 2 утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 Правил осуществления заказчиком  списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику  (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с  неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах  обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила) (в редакции  Постановления Правительства РФ от 26.04.2020 № 591), списание  начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)  осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в  полном объеме, за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о  сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы  товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг,  предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в  связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика,  исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения  контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном  объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на  строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (пп. «в» в ред. Постановления  Правительства РФ от 23.03.2022 № 439).  

Исходя из содержания указанного документа следует, что условие,  предусмотренное пунктом 2 Правил, распространяется на обязательства,  возникшие в 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 годах вне зависимости от его  наличия в проекте контракта.  

Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил № 783, если общая сумма  начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5  процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

Пункт 11 Правил списания от 04.07.2018 № 783 обязательств,  предусмотренных контрактом устанавливает, что списание начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3  настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность  поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее  возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о  списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней),  указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня  принятия такого решения.  

Применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней)  является обязанностью заказчика.  

При этом необходимость обращения подрядчика (поставщика,  исполнителя) к заказчику с соответствующим заявлением о списании  неустойки вышеприведенными нормативными правовыми актами не  установлена.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений,  несет риск наступления последствий совершения или несовершения им  процессуальных действий (статьи 9, 65 АПК РФ).  

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по  контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для  

применения мер государственной поддержки (определение Верховного Суда  Российской Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242).  

Судом установлено, что сумма начисленного штрафа (161 404 руб. 

39 коп.) не превысила 5 процентов от суммы контракта (41 923 218 руб.), при  этом предусмотренные контрактом обязательства на данный момент  выполнены ответчиком в полном объеме.  

Кроме того, данные Правила подготовлены во исполнение плана  первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития  экономики и социальной стабильности, а предоставление отсрочки уплаты  неустойки и (или) осуществление ее списания являлось антикризисной  мерой, направленной на снижение финансовой нагрузки на поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов.  

По смыслу названного правового акта списание, отсрочка уплаты  начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек  (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного  (муниципального) контракта при соблюдении указанных в них условий,  является именно обязанностью государственного (муниципального)  заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер  поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.  В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика  (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить  соблюдение истцом требований приведенного законодательства.  

С учетом тенденции развития действующих норм правового  регулирования в области списания начисленных и неуплаченных сумм  неустоек, принимая во внимание, что постановление Правительства от  04.07.2018 № 783 направленно на обеспечение устойчивого развития  экономики и социальной стабильности путем финансовой поддержки  поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при этом предоставление  отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществления списания начисленных  сумм неустоек является одной из мер поддержки, к спорным  правоотношениям применимы положения Правил № 783  

(в ред. постановлений Правительства от 10.03.2022 № 340, от 23.03.2022   № 439).  

Следовательно, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований  для списания пени по спорному контракту.  

С учетом изложенного, арбитражный суд, оценив представленные в  материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, проанализировав условия  контракта, констатировав исполнение поставщиком обязательств по  контракту в 2021 году, отметив, что размер штрафа, начисленного истцом, не  превысил предельного размера пени, указанного в подпункте «а» пункта 3  Правил № 783, а также учитывая возложенную на заказчика Правилами  

 № 783 обязанность по списанию неустоек (штрафов) в связи с ненадлежащим  исполнением обязательств по контракту, признав недоказанным наличие  обстоятельств, исключающих списание пени, суд первой инстанции пришел  к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.  

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению  между сторонами с учетом положений части 1 статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 121, 123, 156, 167-170, 176,  180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок,  не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.Л. Щавлёва