АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

05.10.2018Дело № А62-4180/2018

Резолютивная часть решения объявлена  28.09.2018

Полный текст решения изготовлен  05.10.2018

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи         Яковенковой В. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи       Павловой О.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;                                        ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарантСервис»                      (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о взыскании штрафа,

при участии:

от истца – ФИО1, представителя по доверенности от 09.01.2018                       № 11, ФИО2, представителя по доверенности от 09.01.2018 № 4,

от ответчика – ФИО3, директора, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт, ФИО4, представителя по доверенности от 01.09.2018 № 01, 

У С Т А Н О В И Л:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»  (далее по тексту – истец) обратилась в арбитражный суд   с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарантСервис»  (далее по тексту – ответчик)   о  взыскании 204 309, 07  рубля, из них:  штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору от 29.06.2017 № 127/ЭА48а-2017/3 в  размере  82 668, 68  рубля,  штрафа за расторжение указанного договора в размере 121 640, 39 рубля, а также  судебных расходов  в виде уплаченной государственной пошлины.  

Как следует из материалов дела,  между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен договор об оказании услуг от 29.06.2017 № 127/ЭА48а-2017/3 , по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома (далее – МКД), расположенного по адресу: 

<

...>,  в установленные в договоре сроки в соответствии с техническим заданием и сметной документацией, а заказчик  -  принять и оплатить выполненные работы.

Согласно пункту 1.2 договора цена договора (капитальный ремонт внутридомовых сетей электроснабжения) составляет 1 216 403, 92 рубля, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

В пункте 1.3 договора определены сроки выполнения работ:  начало - с 05.07.2017, окончание – не позднее 53 календарных дней с даты начала выполнения работ (то есть не позднее 26 августа 2017 года).

В соответствии с пунктами 3.1, 4.2 договора выполнение работ подтверждается подписанием актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3)  и акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом элементов жилого дома.

Согласно пунктам 8.2, 8.4 договора подрядчик обязан уведомить представителя заказчика о завершении работ по договору не позднее,  чем за 10 календарных дней до их завершения,  и не позднее, чем за 5 календарных дней до приемки выполненных работ, представить рабочей комиссии определенный перечень документов, в том числе: копию настоящего договора об оказании услуг; проектную (сметную) документацию; исполнительную и другую техническую документацию (сертификаты, паспорта и т.п.); журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); акт о приемке выполненных работ по форме КС-2; справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; акт испытаний внутренних электросетей и др. 

По состоянию на 18.12.2017 работы по договору в полном объеме подрядчиком не выполнены, уведомление о приемке работ заказчику не направлено, проектная (сметная), исполнительная документация, акты приемки выполненных работ  и иные документы заказчику не переданы. 

В соответствии с пунктом 10.2 договора за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору  (несоблюдение  указанных в графике  сроков выполнения работ) заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по договору, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до дня его фактического исполнения, в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Так, по состоянию на 18.12.2017 штраф за несоблюдение указанных в графике сроков выполнения работ составил 82 668, 68  рубля (1 216 403, 92 рубля (сумма по договору) х 7,75 % (ставка рефинансирования ЦБ РФ по состоянию на 18.12.2017) х 1/130 х 114 дней (количество дней просрочки исполнения обязательства по договору с 27.08.2017 по 18.12.2017)). 

Кроме того, исполнение обязательств подрядчика обеспечивалось Банковской гарантией № 5821-2/2-2017 от 27.06.2017, выданной Коммерческим банком «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью). Срок действия банковской гарантии был установлен по 31.10.2017. 

Заказчиком 21.11.2017 в адрес подрядчика было направлено требование о продлении срока обеспечения исполнения обязательств по договору и установлен срок - не позднее 30.11.2017,  предоставления сведений о продлении срока обеспечения исполнения обязательств по договору.   Требование получено директором ООО «СтройГарантСервис»         ФИО3 лично, однако документов, подтверждающих продление срока обеспечения исполнения обязательств по договору, заказчику не представлено.

Пунктом 13 договора предусмотрен порядок расторжения договора об оказании услуг.

Расторжение договора  допускается по инициативе заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения договора об оказании услуг (подпункт «б» пункта  13.1 договора).

Согласно   подпункту   «е»   пункта   13.2   договора   заказчик   вправе расторгнуть   договор   об   оказании   услуг   в   одностороннем   порядке с взысканием    причиненных    убытков    в    случае    нарушения    подрядчиком   сроков   выполнения   работ   продолжительностью   более   15  календарных дней по любому из многоквартирных домов.

В пункте 13.4 договора указано, что в  случае расторжения договора об оказании услуг в одностороннем  порядке по  основаниям,  указанным в  пункте   13.2  договора,  подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора,    помимо    средств,    которые   подрядчик   будет   обязан  возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

Подрядчик нарушил сроки выполнения работ более чем на 15 календарных дней. Сведениями о причинах нарушения сроков выполнения работ заказчик не располагает. 

Вышеуказанные обстоятельства явились основанием для принятия заказчиком  решения о расторжении договора в одностороннем порядке и направления заказчиком подрядчику уведомления от 18.12.2017 № 5153 о расторжении договора в одностороннем порядке с требованием оплатить штрафы за нарушение сроков выполнения работ по договору и расторжение договора в одностороннем порядке в срок до 19.01.2018.

Указанное уведомление вручено директору ООО «СтройГарантСервис» лично 19.12.2017, а также направлено заказчиком подрядчику 20.12.2017 заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу ООО «СтройГарантСервис», однако не получено ответчиком и возвращено 22.01.2018 отделением почтовой связи обратно отправителю.

Следовательно, договор считается расторгнутым с 19.01.2018.   

Неисполнение ответчиком требования об уплате штрафов явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.  

Ответчик   отзыв на исковое заявление не представил; в судебном заседании представители ответчика пояснили, что они не оспаривают те обстоятельства, что сроки выполнения работ по договору были нарушены и по состоянию на 18.12.2017 работы по договору не выполнены, заказчику не сданы; исполнительная и другая техническая документация (сертификаты, паспорта и т.п.), журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ заказчику не переданы;  расчет штрафов произведен истцом арифметически верно. 

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного  процессуального кодекса Российской  Федерации все имеющиеся в   материалах дела документы, заслушав доводы участвующих в деле лиц, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно части 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

В соответствии со статьей  708 ГК РФ  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

В соответствии со статьей 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу положений статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне. Предусмотренное настоящим Кодексом, другим законом, иным правовым актом или договором право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной суммы другой стороне обязательства (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ  предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Разделом 8 договора определен порядок сдачи и приемки объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту  8.3 договора подрядчик обязан письменно уведомить представителя заказчика о завершении работ по настоящему договору не позднее, чем за 10 календарных дней до даты их завершения. Заказчик в течение 5 календарных дней после получения уведомления подрядчика формирует рабочую комиссию. 

Пунктом 8.4 договора предусмотрено, что не позднее,  чем за 5  календарных дней до приемки выполненных работ подрядчик обязан представить рабочей комиссии следующую документацию: копию настоящего договора; проектную (сметную) документацию; исполнительную и другую техническую документации (сертификаты, паспорта и т.п.); журнал производства работ; акты освидетельствования скрытых работ (при наличии); акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; акты испытаний внутренних систем и наружных сетей холодного и горячего водоснабжения канализации, отопления; акт испытаний внутренних электросетей; протокол проверки функционирования лифта и устройств безопасности лифта; акт технического освидетельствования лифта; протокол проверок, испытаний и измерений при проведении полного технического освидетельствования лифта; декларацию о соответствии. Акты испытаний и протоколы проверок представляются подрядчиком в случае выполнения таких работ в рамках настоящего договора.

Пунктами 6.1.11, 6.1.12, 6.1.20 договора предусмотрены обязанности подрядчика: еженедельно представлять заказчику фото и/или видео отчеты по   всем выполненным в отчетном периоде работам; по требованию заказчика представлять  необходимую информацию  о ходе ремонтных работ; не позднее, чем за 5 рабочих дней до приемки выполненных работ представить рабочей комиссии пакет документов, предусмотренный пунктом 8.4 настоящего договора.  

В соответствии с пунктом 10.2 договора за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору  (несоблюдение  указанных в графике сроков выполнения работ) заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по договору, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до дня его фактического исполнения, в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Согласно пункту  13.4 договора в  случае расторжения договора об оказании услуг в одностороннем  порядке по  основаниям,  указанным в  пункте   13.2  договора,  подрядчик  уплачивает заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора,    помимо    средств,    которые   подрядчик   будет   обязан  возместить заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиком, что по состоянию на дату принятия заказчиком  решения о расторжении договора в одностороннем порядке и направления заказчиком подрядчику уведомления от 18.12.2017 № 5153 о расторжении договора в одностороннем порядке с требованием оплатить штрафы за нарушение сроков выполнения работ по договору и расторжение договора в одностороннем порядке в срок до 19.01.2018,   работы по договору подрядчиком не выполнены, заказчику не сданы; исполнительная и другая техническая документация (сертификаты, паспорта и т.п.), журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ заказчику не переданы. 

В нарушение пунктов 8.3, 8.4, 6.1.20 договора ответчиком доказательств иного суду не представлено. 

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что   требования истца о взыскании  штрафа за нарушение сроков выполнения работ по договору в  размере  82 668, 68  рубля и штрафа за расторжение указанного договора в размере 121 640, 39 рубля являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 

Расчет штрафов судом проверен, признан арифметически верным.   Оснований для снижения размера штрафов в соответствии со статьей 333 ГК РФ у суда не имеется, поскольку от ответчика заявления о снижении неустойки не поступало. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

По результатам рассмотрения настоящего дела с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в виде уплаченной истцом государственной пошлины в сумме 7 086, 00 рубля. 

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройГарантСервис»   (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» (ОГРН 

<

***>;                                        ИНН 

<

***>)  204 309, 07 рубля, а также в возмещение судебных расходов 7 086, 00 рубля. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья             В. В. Яковенкова