АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2024 года

 

Дело № А33-1217/2024

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2024 года.

В полном объеме решение изготовлено 26 февраля 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Теплокомплект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к муниципальному казенному учреждению "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки

в предварительном судебном заседании присутствуют:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2024, личность удостоверена паспортом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Теплокомплект" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к муниципальному казенному учреждению "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края"  (далее – ответчик) о взыскании 419 050 руб. 04 коп. неустойки за период с 04.10.2023 по 20.12.2023

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 23.01.2024 возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между муниципальныым казенным учреждением «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Теплокомплект» (подрядчик) на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300033823000103 от «12» июля 2023 года, заключили муниципальный контракт № 0119300033823000103 на капитальный ремонт котлов на котельных Емельяновского района (контракт).

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по Капитальному ремонту котлов на котельных Емельяновского района, (далее -Работы), в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии с локальными сметными расчетами (приложение № 1 к Контракту), и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

Как следует из пункта 1.2 контракта Наименование и виды работ, их количество и стоимость определяются локальными сметными расчетами (приложение № 1 к Контракту) и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту).

Виды и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту).

В соответствии с пунктом 2.1 контракта (в редакции дополнительного соглашения №1 от 11.09.2023) цена настоящего Контракта составляет 12 074 057,03 руб. (двенадцать миллионов семьдесят четыре тысячи пятьдесят семь рублей три копейки), НДС не облагается на основании ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

В цену Контракта включены прибыль Подрядчика, расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, а также расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

На основании пункта 2.5 контракта плата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона №44-ФЗ, а также акта (актов) приемки работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 без замечаний Заказчика.

В силу пункта 6.3 контракта Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ, включая оформление результатов приемки, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику подписанного Подрядчиком акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ, а также Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся приложением к указанному Акту.

Пунктом 6.4 контракта заказчик рассматривает направленные Подрядчиком документы по сдаче объемов выполненных работ на их соответствие фактически выполненным и принятым работам.

По результатам приемки выполненных работ (отдельного этапа исполнения контракта) Заказчик в срок, установленный в п.6.3 настоящего Контракта, подписывает акт о приемке выполненных работ (документ о приемке) либо мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Формирование и размещение в единой информационной системе документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется в соответствии с ч.13 ст.94 Закона №44-ФЗ.

Из пункта 11.3 контракта следует в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Споры, возникающие из настоящего Контракта, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. Срок для рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края (пункт 14.3 контракта).

Как следует из иска в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. Контракта: 25 сентября 2023 года Заказчик подписал в единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документ о приемке.

Работы заказчиком с нарушением срока.

Подрядчиком за нарушение срока оплаты работ Заказчиком по контракту начислена неустойка в порядке пункта 11.3 контракта в размере 419 050 руб. 04 коп.

В досудебном порядке урегулирования спора, по настоящее время ответчиком требования истца не удовлетворены, что подтверждается получением настоящего претензионного письма направленного 22 декабря 2023 года в адрес истцом в адрес ответчика и полученное ответчиком 28 декабря 2023 года, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 66215090027646 .

Требования истца ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены.

На основании изложенного истец обратился в Арбитражный суд с настоящим иском.

Надлежащим образом извещенный ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не направил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем порядке статьей 310 Гражданского кодекса  Российской Федерации не допускается.

Заключенный между сторонами муниципальный контракт № 0119300033823000103 по своей правовой природе является договором подряда, отношения по которому регламентированы главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона N 44-ФЗ государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Как следует из материалов дела, между муниципальныым казенным учреждением «Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Теплокомплект» (подрядчик) на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300033823000103 от «12» июля 2023 года, заключили муниципальный контракт № 0119300033823000103 на капитальный ремонт котлов на котельных Емельяновского района (контракт).

Согласно пункту 1.1 контракта подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ по Капитальному ремонту котлов на котельных Емельяновского района, (далее -Работы), в соответствии с условиями настоящего Контракта, в соответствии с локальными сметными расчетами (приложение № 1 к Контракту), и Техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

Истцом в материалы дела представлен подписанный в системе ЕИС акт о приемке выполненных работ №21 от 14.09.2023 на сумму 12 074 057 руб. 03 коп. Акт подписан без возражений и замечаний.

С учетом изложенного, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что работы сданы подрядчиком и приняты заказчиком.

На основании пункта 2.5 контракта плата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона №44-ФЗ, а также акта (актов) приемки работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 без замечаний Заказчика.

Как указывает истец и не оспаривает ответчик, оплата работ ответчиком произведена  с нарушением установленных сроков.

Со ссылкой на изложенные обстоятельства истцом заявлено требование о взыскании 419 050 руб. 04 коп. неустойки за период с 04.10.2023 по 20.12.2023

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Из пункта 11.3 контракта следует в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик (исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Судом проверен расчет истца, признан арифметически неверным на основании следующего.

Как следует из пункта 2.5 контракта плата по контракту осуществляется единовременным платежом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона №44-ФЗ, а также акта (актов) приемки работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 без замечаний Заказчика.

Акт подписан заказчиком 25.09.2023, таким образом, последним днем надлежащего исполнения обязанности по оплате является 04.10.2023, просрочку надлежит рассчитывать с 05.10.2023.

С учетом изложенного, приставленный истцом расчет подлежит корректировке в отношении количества дней просрочки в рамках периода с 05.10.2023 по 29.10.2023 согласно следующему расчету:

12 074 057 руб. 03 коп. – сумма долга

25 – количество дней просрочки с 05.10.2023 по 29.10.2023

13% - ключевая ставка

12 074 057 руб. 03 коп. х 25 х 1/300 х 13% = 130 8002 руб. 28 коп.

В остальной части расчет истца признает судом верным.

Таким образом, размер подлежащей взысканию с учетом корректировки составляет 413 817 руб. 94 коп.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере согласно расчету суда в размере 413 817 руб. 94 коп., в остальной части в удовлетворении указанного требования суд отказывает.

На основании изложенного, Арбитражный суд взыскивает с ответчика в польщу истца 413 817 руб. 95 коп. пени.

При обращении в суд с настоящим иском истцом уплачена государственная пошлина в размере 11 381 руб. на основании платежного поручения №4 от 12.01.2024.

Исковые требования удовлетворены судом частично (98,75%), с учетом изложенного, а также положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать 11 239 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского района Красноярского края" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Теплокомплект" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 413 817 руб. 95 коп. пени, а также 11 239 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

С.А. Красовская