﻿

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-59948/2021

19 ноября 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Москаленко К.А.,    

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" (196626, Санкт-Петербург город, поселок Шушары, шоссе Московское, дом 19, корпус 2, литер А, офис 322, ОГРН: 1167847485266) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (195030, Санкт-Петербург город, проспект Ударников, дом 46, литер А, помещение 2-Н, ОГРН: 1147847148272) 

о взыскании 

при участии	

- от истца: Галацевич Д.В. по доверенности от 05.04.2021; 

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" (далее – ООО "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (далее -  ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ") о взыскании 1654650 руб. неосвоенного аванса по договору подряда на разработку проектной и рабочей документации от 15.04.2019 № Ц/Р 14-19 (далее – Договор).

Представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" (заказчиком) и ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (проектировщиком) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает, а проектировщик принимает на себя обязательство разработать на условиях Договора проектную документацию на стадии «Проектная Документация «ПД») и «Рабочая Документация («РД») и согласовать разработанную документацию в соответствии с условиями Договора (далее «Работы») по объекту: Логистический центр по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, уч. 1311, южнее дома 54 литера А, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 78:42:0015108:2297 (далее – Объект). 

По п. 1.4. Договора объем и содержание работ определены в «Задании на проектирование» (приложение № 1 к Договору). Сроки выполнения работ определяются «Совмещенным графиком выполнения проектно-изыскательских работ и подготовки проектной документации (приложение № 2 к Договору). 

Согласно п. 2.1. Договора срок начала выполнения работ по Договору – с момента заключения настоящего Договора и определен сторонами в плане финансирования и сроков выполнения этапов работ и «Совмещенном графике выполнения проектно-изыскательских работ и подготовки проектной документации» (приложение № 2 к Договору). Срок окончания выполнения работ по Договору стадии «ПД» - 16 ноября 2019 года и определен сторонами в плане финансирования и сроков выполнения этапов работ и документации (приложение № 2 к Договору).  Срок выполнения отдельных этапов работ стадии «ПД» определен сторонами в «Совмещенном графике выполнения проектно-изыскательских работ и подготовки проектной документации» (приложение № 2 к Договору). Сроки выполнения работ по Договору стадии «РД» составляют 59 календарных дней с момента утверждения заказчиком выполненных работ стадии «ПД».

В силу п. 3.1. Договора, в редакции дополнительного соглашения от 10.06.2019 № 1 к Договору, стоимость работ, выполняемых проектировщиком в соответствии с «Заданием на проектирование» (приложение № 1), кроме работ, указанных в разделе 4 настоящего Договора, составляет 4499300 руб. 

В соответствии с п. 3.4. Договора оплата заказчиком работ по этапу осуществляется на основании счета проектировщика в течение 5 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу. Зачет ранее выплаченного аванса по этапу производится при оплате выполненных и принятых работ по соответствующему этапу.

По п. 5.2. Договора сдача-приемка выполненных по Договору работ производится по окончании выполнения каждого этапа работ, предусмотренного соответствующим согласованным сторонами «Планом финансирования этапов выполнения работ» (приложение № 3 к Договору). 

Согласно п. 10.1. Договора настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых ими по Договору.  

ООО "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" перечислило ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1654650 руб. аванса по Договору по платежным поручениям от 16.04.2019 № 34 на сумму 700000 руб., от 11.06.2019 № 83 на сумму 754650 руб., от 16.08.2019 № 1 на сумму 200000 руб. 

ООО "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" направило ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" отказ от исполнения договора подряда № Ц/Р 14-19 от 15.04.2019 года на разработку проектной и рабочей документации от 14.05.201 № 23, в котором, ссылаясь на невыполнение работ по Договору, отказалось от исполнения Договора, и претензию от 14.05.2021 с требованием возврата денежных средств, перечисленных по Договору.

Отказ ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В силу статьи 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно абз. 1 – 4 ст. 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором, согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

 В силу пунктов 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт перечисления 1654650 руб. аванса по Договору подтверждается платежными поручениями.

Отказ от исполнения Договора письмом от 14.05.2021 № 23 направлен ответчику по почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо (РПО № 19224253100159), возвращено отправителю из-за истечения срока хранения 16.06.2021.

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил. 

Поскольку ответчик не представил доказательства возврата неотработанного аванса, суд удовлетворяет исковые требования о взыскании 1654650 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" в пользу обществу с ограниченной ответственностью "ДИАЛОГ-ТЕРМИНАЛ" 1654650 руб. неосновательного обогащения и 29547 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья 									Косенко Т.А.