РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  03 сентября 2024 года  по делу № А33-17538/2024 Красноярск  

«26» сентября 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда по  настоящему делу в законную силу исполнить обязательства по договору об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №  20.2400.6703.23 от 21.07.2023 согласно техническим условиям:  

- подготовить технические условия на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств заявителя: объект «Объекты наружного освещения»,  расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул.  Назаровская, от ул. Калинина до жилого дома № 6 по ул. Назаровской, от жилого дома № 6  до ул. Цимлянской и до ул. Шушенской;  

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое  присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу)  напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя  электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской  Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии  (мощности) на розничном рынке;  

- выполнить требования по проектированию, строительству новых и реконструкции  существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь»«Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную  документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации  и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от  16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в  соответствии с действующим законодательством, в том числе:  

выполнить усиление существующей ЛЭП-ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-3043 для  присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при  проектировании;  

выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от  04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения города  Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 10 040,69 руб. неустойки за период с 29.01.2024 по 06.05.2024, 8  000,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в  Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.В. Командирова