Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-234120/19-143-1896

27 января 2020 года

г. Москва

         

Резолютивная часть решения объявлена                              14 января 2020 года

Мотивированное решение изготовлено      27 января 2020 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Гедрайтис О.С. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «ТТЭ» (ИНН 

<

***>) 

к ООО «ССУ 1» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 1.840.265 руб. 84 коп.

при участии: 

от истца: не явка, извещен

от ответчика: ФИО2 дов. от 31.10.2019;

УСТАНОВИЛ:

ООО «ТТЭ» обратилась к ООО «ССУ 1» о взыскании 1.668.228 руб. 26 коп. задолженности, 172.037 руб. 58 коп. процентов за пользование чужими по договору субподряда №ББГ-17/09-1 от 12.09.2017. 

Истец в судебное заседание не явился, дополнительных заявлений и ходатайств не представил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи, с чем суд в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ рассмотрел иск в отсутствие представителя истца.

Ответчик в судебном заседании иск не признал, просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Оценив материалы дела, выслушав представителя ответчика, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, исходя при этом из следующего.

Истец в исковом заявлении ссылается на то, что 12.09.2017 между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор субподряда №ББГ-17/09-1, согласно которого истец обязался выполнить строительно-монтажные работы по объекту «6-й пусковой комплекс- Блок «Е» в составе стройки «Учебно-производственный центр в п. Первомайский Тамбовской обл.»

В нарушение принятых на себя обязательств ответчиком не произведена оплата за выполненные работы по договору, задолженность ответчика перед истцом составляет 1.668.228 руб. 26 коп.

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст.711 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу ст.ст.309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п.11.9 договора в счет обеспечения гарантийных обязательств субподрядчика перед подрядчиком, подрядчиком удерживаются 5% от стоимости выполненных субподрядчиком работ, установленной на основании соответствующего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и соответствующей справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3. Денежные средства, удержанные подрядчиком при оплате выполненных Субподрядчиком работ в счет обеспечения гарантийных обязательств субподрядчика перед Подрядчиком по Договору на Гарантийный срок, возвращаются субподрядчику в течение десяти банковских дней с даты истечения Гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет пять лет с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).( п.11.4 договора).

Общая стоимость работ составляет 34 162 470 руб., гарантийное удержание 5% должно быть произведено в размере 1 791 535 руб.сроком на пять лет. Сумма, удержанная подрядчиком в рамках гарантийного удержания составила даже менее данной суммы, а именно 1 668 228 руб. 26 коп.

Гарантийные удержания не являются удержанием имущества подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств подрядчика в соответствии со ст.329 ГК РФ.

Таким образом, заявленная сумма задолженности в размере 1.668.228 руб. 26 коп. является гарантийным удержанием, срок оплаты которого не наступил.

В соответствии с п.п.11.5, 11.6 договора если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие эксплуатации объекта, субподрядчик обязан устранить за свой счет и в установленные подрядчиком сроки. Для участия и составления акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка их устранения. Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного извещения подрядчика об обнаружении дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийный срок при этом продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе субподрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только подрядчиком.

В процессе эксплуатации объекта были выявлены дефекты выполненных работ.

23.10.2019 ООО «ТТЭ» было направлено письмо с требованием явиться для составления дефектной ведомости (акта) и устранить выявленные дефекты на объекте в срок до 09.11.2019. 

31.10.2019 между ООО «СпецГазСтрой» и ООО «ССУ 1» подписана дефектная ведомость по дополнительным работам, которые необходимо выполнить в рамках гарантийных обязательств ООО «ТТЭ» по договору субподряда на объекте. Истец для составления дефектной ведомости (акта) не явился. 

В соответствии с п. 1.7 договора если субподрядчик (истец) в течение срока, установленного подрядчиком (ответчиком), не устранит недостатки в выполненных работах, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, подрядчик (ответчик) вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом расходы подрядчика (ответчика) субподрядчик (истец) обязан возместить в течение одного месяца с даты предъявления соответствующих требований подрядчиком (ответчиком).

В указанный срок ООО «ТТЭ» не выполнило работы, ООО «ССУ 1» было вынуждено заключить договор со сторонней компанией для устранения дефектов на объекте. 

09.11.2019 заключен договор подряда №09П между ООО «ССУ 1» и ООО «Регионстрой» для выполнения работ по устранению дефектов на объекте. Стоимость работ по договору составила 1745 933 руб. 81 коп. Работы выполнены в полном объеме и сданы ООО «ССУ 1», что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

В соответствии с п.11.9 договора субподряда подрядчик (ответчик) вправе распоряжаться удержанными денежными средствами (в счет обеспечения гарантийных обязательств) для устранения любых несоответствий и нарушений результата работ, которые субподрядчик (истец) не устранил в соответствии с условиями договора.

28.11.2019 истцу направлено уведомление о зачете суммы гарантийного удержания в размере 1 668 228 руб. 26 коп. в счет устранения дефектов на объекте и компенсировать дополнительные затраты истца на гарантийное устранение нарушений на объекте в размере 77 705 руб. 55 коп.

Требование ООО «ТТЭ» о возврате гарантийного удержания удовлетворению не подлежит.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 10, 432, 702, 711, 720, 740, 743 ГК РФ, ст. ст. 65, 106, 110, 156, 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований   отказать. 

                Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

СудьяО.С. Гедрайтис