АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 19 тел. (4922) 32-29-10, факс (4922) 47-23-98 

е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-12771/2020

г. Владимир

09 августа 2021 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи  Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело   № А11-12771/2020 по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью специализированный застройщик «Стройком»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 600005, 

<

...>, эт. 1, оф. 1) к администрации города  Владимира (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 600000, 

<

...>) о внесении изменений в пункты 3.1.3, 3.1.6,  3.1.7, 4.1 договора от 14.01.2014 № 01-01/2 и заключении дополнительного  соглашения к данному договору,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора, индивидуальный предприниматель ФИО2  (ОГРНИП 311332720300011, ИНН 

<

***>, адрес: г. Владимир).  

Руководствуясь статьями 17, 65, 71, 101, 110, 121, 123, 156, 167-170, 176, 180,  181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Внести изменения в пункты 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 4.1 договора от 14.01.2014   № 01-01/2 «О развитии застроенной территории квартала, ограниченного улицами:  Северной, ФИО3, 1-й Пионерской в городе Владимире»:  

Пункт 3.1.3 договора от 14.01.2014 № 01-01/2 изложить в следующей  редакции: «Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную  собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам,  выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального  найма, договорам найма специализированного жилого помещения и  расположенных на застроенной территории.  

Срок исполнения – не позднее 144 (ста сорока четырех) месяцев с момента  утверждения проекта планировки застроенной территории.  

Созданные (приобретенные) и передаваемые жилые помещения для  предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных  по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого  помещения и расположенных на застроенной территории, должны отвечать  

требованиям, установленным жилищным законодательством Российской  Федерации»;  

Пункт 3.1.6 договора от 14.01.2014 № 01-01/2 изложить в следующей  редакции: «Осуществить строительство на застроенной территории в соответствии  с утверждённым проектом планировки застроенной территории в срок не позднее  158 (ста пятидесяти восьми) месяцев со дня утверждения проекта планировки  застроенной территории»;  

Пункт 3.1.7 договора от 14.01.2014 № 01-01/2 изложить в следующей  редакции: «Осуществить при необходимости в установленном порядке  строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры,  объектов коммунально-бытового назначения, предназначенных для обеспечения  застроенной территории, в срок не позднее 158 (ста пятидесяти восьми) месяцев со  дня утверждения проекта планировки застроенной территории»;  

 Пункт 4.1 договора от 14.01.2014 № 01-01/2 изложить в следующей  редакции: «Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами  при условии соблюдения сторонами порядка обеспечения исполнения  обязательств по договору, установленного разделом 7 договора, и действует в  течение 14 (четырнадцати) лет с момента вступления его в силу».  

Взыскать с администрации города Владимира в пользу общества с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Стройком»  6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Выдача исполнительного листа производится в соответствии со статьей 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с  момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в  законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Смагина