АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-13653/2018

г. Чебоксары

12 апреля 2019 года

Резолютивная часть решения вынесена 09.04.2019

Полный текст решения изготовлен 12.04.2019

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Манеевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 02.04.2019-09.04.2019

дело по иску

муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428032, г. Чебоксары, Чувашская Республика, бульвар купца ФИО2 д. 16)

к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, Россия 428020, г. Чебоксары, Чувашская Республика, проезд Гаражный д. 6/40)

об обязании,

3-и лица: временный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» ФИО3, муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» Муниципального образования города Чебоксары Чувашской Республики (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>).

при участии

от истца: ФИО4 по доверенности от 09.01.2019 (сроком по 31.12.2019),

от ответчика: ФИО5 по доверенности от 09.01.2019 №3 (сроком на 1 год),

от третьего лица муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» Муниципального образования города Чебоксары Чувашской Республики: ФИО6 - доверенность от 24.10.2018 № 9 (сроком действия 1 год),

установил:

муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  обратилось в арбитражный суд с иском   к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» об обязании в срок до 01.07.2019 произвести восстановление нарушенного благоустройства при производстве ремонта тепловых и электрических сетей на основании ордеров–разрешений на производство земляных работ, выданных в период с апреля  по 31.08.2018 на 175   объектах.

Требования мотивированы тем, что ответчик в  период с 01.04.2018 по 31.08.2018 производил плановый и аварийный ремонт тепловых и электрических сетей. При этом, в нарушения положений Правил благоустройства  территории города Чебоксары, утвержденных Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 28.11.2017 №1006 (пункт 5.2.4.8.6.)  восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ  в установленных  порядке и сроки не произведено.  

Определением от 24.01.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьих  лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии» ФИО3, а также муниципальное унитарное предприятие  «Теплосеть» Муниципального образования  города Чебоксары Чувашской Республики.

Представитель истца в заседании суда требования уточнил в редакции ходатайства от 29.03.2019, исключив 5 объектов с учетом пояснений третьего лица. Требования в редакции уточнения поддержал, просил - удовлетворить.  Возражал против приостановления производства по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. В связи с чем все   заявленные изменения  требований  судом были приняты в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика в заседании суда не возражал против принятия судом уточнения, просил суд приостановить производство по делу до рассмотрения по существу  заявления о признании платежей по восстановлению нарушенного благоустройства, подлежащими погашению в преимущественном порядке в рамках дела №А79-7646/2015. В части требований поддержал ранее изложенную позицию,  просил в удовлетворении иска отказать по основаниям, изложенным в отзыве от 21.01.2019 №16/2/02-04/61. Указал, что решением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 05.04.2018 по делу №А79-1448/2016 между сторонами расторгнут договор  целевой долгосрочной аренды муниципального имущества от 16.04.2007 №148. В связи с тем, что все движимое и недвижимое эксплуатируемое  ответчиком по договору  аренды имущество возвращено  собственнику (акты приема-передачи от 28.08.2018), который, в свою очередь, передал его МУП «Теплосеть», ответчик не имеет возможности производить какие-либо действия на участках тепловой сети. Пояснил, что в период с сентября 2018 года по настоящее время   МУП «Теплосеть» производило аварийно-ремонтные работы по ряду объектов, указанных в иске. Указанное делает невозможным определение степени нарушения благоустройства ответчиком. А требование к ответчику о восстановлении нарушенного благоустройства после проведения земляных работ МУП «Теплосеть», по мнению ответчика, заявлено неправомерно. 

 Отметил также, что для производства работ по восстановлению благоустройства ответчиком были заключены договоры подряда с ООО «Сельва (договор от 16.05.2018 №446) и  с ООО «Атлантстройторг»  (договор от 21.03.2018 №239). Подрядными организациями своевременно не были выполнены работы.

Третье лицо временный управляющий ООО «Коммунальные технологии»  ФИО3 в заседание суда не явился, представил отзыв от 06.03.2019, которым указал, что решением Арбитражного суда Чувашской Республики – чуваши от 05.04.2018 по делу №А79-1448/2016 между сторонами спора расторгнут договор целевой долгосрочной аренды муниципального имущества от 16.04.2007 №148. Дал пояснения относительно квалификации требований. Просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Представитель третьего лица МУП «Теплосеть» в заседании суда пояснил следующее согласно отзыву от 28.03.2019 №2148. В результате проведенного анализа выданных МУП «Теплосеть» и ООО «Коммунальные технологии» ордеров - разрешений и планов-схем расположения места для благоустройство по объектам, указанным в исковом заявлении МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», из 163 объектов выявлены 25 объектов,  по которым и МУП «Теплосеть» и ООО «Коммунальные технологии» выдавались ордера-разрешения на производство аварийно-восстановительных работ теплотрасс, расположенных по одному и тому же адресу. Исходя из планов-схем расположения мест для благоустройства по 5 объектам из 25 мест проведения (участки теплотрасс) аварийно-ремонтных работ МУП «Теплосеть» и ООО «Коммунальные технологии» совпали, на остальных 20 объектах аварийно-ремонтные работы МУП «Теплосеть» не проводились, совпадения отсутствуют.

Согласно части 6 статья 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получении информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и возбуждении производства по делу.

Кроме того, суд в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   размещал информацию о совершении процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.chuvashia.arbitr.ru, и на сайте   www.arbitr.ru в разделе «Картотека арбитражных дел».

Дело в соответствии со статьями 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.

Заявленное истцом уточнение требований судом принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Что касается ходатайства о приостановлении производства по делу, то суд считает необходимым отметить следующее.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В данном случае суд не усматривает необходимости в приостановлении производства по делу, в связи с чем, считает необходимым в удовлетворении ходатайства ООО «Коммунальные технологии»  о приостановлении производства по делу    до рассмотрения  заявления в рамках  арбитражного дела № А79-7646/2015 - отказать. Возможным рассмотреть дело по имеющимся в материалах дела документам.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей сторон и третьего лица МУП «Теплосеть», суд установил следующее.

Между истцом (пользователь) и Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом (собственник) заключен договор о передаче в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны от 26.12.2011, предметом которого является предоставление собственником пользователю права на пользование объектами внешнего благоустройства, в интересах муниципального образования города Чебоксары в пределах, установленных договором.  

Объекты внешнего благоустройства, являющиеся муниципальной собственностью г. Чебоксары, учитываются на забалансовом счете пользователя и учитываются Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом в Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары.

Пользователь принимает на себя обязательства по управлению переданным ему объектами внешнего благоустройства в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ним договором (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 4 договора основной задачей пользователя является содержание объектов внешнего благоустройства.

Данный факт установлен решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 13.02.2018 по делу №А79-13652/2018, вступившим в законную силу.

В силу части  2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В период с апреля по август  2018  года ответчиком поданы заявки на получение ордера – разрешения на производство аварийных работ в городе Чебоксары, в том числе по указанным в уточненном иске адресам.      

В связи с производством аварийных работ на объектах по указанным адресам, ответчиком нарушено благоустройство прилегающих территорий.

26.09.2018 истец обратился в адрес ответчика с претензией № 01/12-3485 с требованием о восстановлении разрушенного благоустройства на объектах в течении 30 дней.

Неисполнение требований истца по восстановлению благоустройства в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца с данным требованием в суд. 

В соответствии с пунктом 1.6 Правил благоустройства территории города Чебоксары, утвержденных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 28.11.2017 № 1006 (далее – Правила благоустройства) под понятием благоустройство территории понимается комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории

Элементами благоустройства территории считаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

Объекты благоустройства территории - это территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории города Чебоксары, в том числе: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории районов города Чебоксары.

Пунктом 5.2.4 Правил благоустройства регулируется проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций и сооружений.

Так, согласно пункту 5.2.4.8.6 Правил благоустройства ордер-разрешение на производство аварийных работ для устранения аварии на подземных инженерных коммуникациях выдается при предоставлении следующих документов:

- заявки установленного образца;

- исполнительной съемки с указанием места аварии.

Ордер-разрешение на производство аварийных работ выдается в течение 1 (одного) дня с момента предоставления полного пакета документов.

Нормативные сроки выполнения аварийных работ с восстановлением благоустройства в летнее время (с 16 апреля по 14 октября) составляют не более 5 суток, в зимнее время (с 15 октября по 15 апреля) - не более 7 суток.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

С 01.04.2018 по 31.08.2018 истцом производился аварийный  ремонт тепловых и электрических сетей на основании ордеров-разрешений на производство земляных работ (том 1 л.д. 20-182, том 2 л.д. 1-12). Факт нарушения графика благоустройства по указанным в иске  адресам подтверждено материалами дела и ответчиком не оспаривается. Доказательства приведения объектов в надлежащее состояние в материалы дела не представлены. Иное из материалов дела не следует. Согласно части 2 стати 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя  из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Таким образом, оценив представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая, что факт выполнения ответчиком работ не оспаривается, а доказательства восстановления благоустройства в материалы дела не представлены,  требование истца об обязании ответчика произвести восстановление нарушенного благоустройства при производстве аварийно-восстановительных работ в период с апреля по август 2018 года, судом признается обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В связи с чем, суд считает необходимым обязать ООО «Коммунальные технологии» в срок до 01.07.2019  произвести восстановление нарушенного благоустройства при производстве ремонта тепловых и электрических сетей на основании ордеров-разрешений на производство земляных работ, выданных в период с апреля по 31 августа 2018 на следующих объектах и объемах:

№

Номер ордера-разрешения

Адрес производства работ

Нарушенное благоустройство, подлежащее восстановлению

ОСП «Чебоксарские тепловые сети» 

2018 год

1

АК-177

ул. Гагарина, 26 — ул. Цивильская, 1/24 (2 места)

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

2

АМ-179

ул. Лебедева, 25 — 68 (2 места)

Газон 140 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

3

АК-183

ул. Декабристов, 20/1

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

4

АЛ-184

ул. Б.Хмельницкого, 117

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

5

АК-192

пл. Скворцова, д. 4

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

6

АМ-211

ул. Энтузиастов, 5/1

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

7

АМ-221

ул. Игнатьева, 4

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

8

АМ-224

пр. М.Горького, 13-22

Газон 160 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 75 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

9

АК-228

пр. Тракторостроителей, 18

Тротуар 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

10

АМ-229

ул. Урукова, 19

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

11

АМ-230

ул. Лебедева, 1а

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 75 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

12

АМ-243

ул. Димитрова, 22

Газон 70 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

13

АМ-244

ул. Эльгера, 17

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

14

АК-260

ул. Гастелло, 3-5

Проезжая часть 14 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

15

АК-262

ул. Ашмарина, д. 25

Газон 24 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

16

АМ-263

ул. Максимова, д. 2

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

17

АЛ-267

пр. И.Яковлева, 14

Газон 200 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

18

АМ-271

ул. Гузовского, 16

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

19

АЛ-272

ул. Петрова, 2

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

20

АМ-280

б-р Миттова, 7

Газон 300 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

21

АМ-284

ул. Пирогова, 16

Газон 155 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

22

АЛ-285

пр. И. Яковлева 10/1

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

24

АК-296

ул. П.Лумумбы, 13

Газон 55 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

25

АМ-299

ул. М.Павлова, д. 30

Газон 280 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

26

АК-300

пер. Молодежный, 5/1

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

27

АМ-303

ул. Чернышевского, 9«в» (насосная ООО «КТ»)

Газон 350 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

28

АК-305

ул. Р.Зорге, 7

Газон 16 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

29

АМ-309

ул. Кирова, 14

Газон 170 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

30

АК-310

пр. Тракторостроителей, 10 (в р-не МНТК_со стороны детск.поликл.)

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

31

АК-312

пр. Тракторостроителей, 29-33

Газон 36 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

32

АМ-313

ул. К. Иванова,  98

Проезжая часть 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

33

АМ-314

ул. К. Иванова,  83

Тротуар 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

34

АЛ-319

пр. Ленина, 55

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

35

АМ-320

ул. Сверчкова, 15

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

36

АМ-321

пр. Московский, 8

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

37

АМ-326

ул. М.Павлова, 46

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

38

АМ-328

пр. Московский, 41/1

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

39

АМ-331

ул. Энтузиастов, д. 3 корп. 1

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

40

АМ-336

пр. М.Горького 49

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Троутар 12 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

41

АМ-338

ул. О.Кошевого, 3

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Троутар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

42

АМ-339

ул. Тополиная, 17

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

43

АМ-340

ул. Чернышевского, 20

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

44

АМ-344

ул. Пирогова, 4/2

Проезжая часть 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

45

АМ-345

ул. Гузовского, 24

Газон 250 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

46

АК-348

ул. Декабристов, 14-16/1

Газон 55 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

47

АК-349

ул. Николаева, 57-59

Газон 25 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

48

АЛ-350

ул. Чапаева, 8/2

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

49

АЛ-351

ул. Хузангая, 34

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 60 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

50

АЛ-352

ул. Хузангая, 17

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

51

АК-353

пр. Тракторостроителей, 23

Газон 35 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

52

АК-354

Эгерский б-р, 20

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

53

АЛ-359

пр. Мира, 72

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

54

АЛ-360

пр. Мира, 90/1

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

55

АК-361

пр. Тракторостроителей, 9

Газон 5 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

56

АМ-363

ул. М.Павлова, 12

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

57

АМ-364

пр. М.Горького, 36/1

Газон 280 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

58

АЛ-368

пр. И.Яковлева, 18/1 — 18/2

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

59

АЛ-369

пр. 9-ой Пятилетки, 18 — 22/2

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

60

АК-370

пр. Тракторостроителей,27

Газон 120 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

62

АЛ-372

ул. Энгельса, 24

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

63

АЛ-373

ул. Энгельса, 26

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

64

АК-374

ул. Комбинатская, 5

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

65

АК-375

ул. И.Франко, 18

Газон 75 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

66

АЛ-382

ул. Байдула, 11

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

67

АЛ-390

пр.Ленина 25

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

68

АЛ-392

ул. Хузангая 2/14

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

69

АМ-398

ул. М.Павлова, 34-38

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

70

АМ-399

ул. М.Павлова, 24

Газон 1100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 22 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

71

АК-400

ул. 50 лет Октября, 11 (со стороны 

<

...> Октября)

Газон 180 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

72

АМ-405

ул. М.Павлова, 21 (территория Пожарной части)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

73

АЛ-407

ул. Маршака между д.2 и д.4 (с улицы)

Газон 200 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

74

АК-408

Эгерский б-р, 24

Газон 6 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

75

АК-409

ул. Л.Комсомола, 40-40/1

Газон 38 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

76

АК-410

ул. Шумилова, 30

Газон 42 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

77

АЛ-414

Президентский б-р, д. 14 

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

78

АЛ-417

ул. Совхозная, 16

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

79

АЛ-420

пр. Ленина, 38

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

80

АК-421

ул. Гагарина, 47

Газон 480 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 1 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

81

АМ-423

б-р Миттова, 45

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

82

АМ-424

б-р Миттова, 17

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

83

АК-425

ул. Шумилова, 28-33

Газон 65 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 95 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

84

АК-428

ул. Текстильщиков, 11

Газон 4 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

85

АЛ-430

ул. Совхозная, д. 14

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

86

АЛ-431

ул. Энгельса, 13

Проезжая часть 25 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

87

АЛ-433

ул. Петрова, д. 11

Проезжая часть 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

88

АМ-436

ул. Гузовского, 23

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

89

АЛ-438

ул. Ленинградская 24

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

90

АК-440

ул. Декабристов, 12

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

91

АМ-441

ул. Максимова, 5

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

92

АК-442

ул. Кадыкова, 18

Газон 18 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

93

АЛ-444

ул. Чапаева, 13

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

94

АЛ-445

ул. Совхозная, 21

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

95

АЛ-453

ул. Гагарина, 19

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

96

АМ-454

ул. Университетская, 38

Газон 1000 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

97

АК-455

ул. Крупской, д. 3

Газон 43 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

99

АЛ-458

ул. Б. Хмельницкого, 121

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

100

АЛ-463

пр. Ленина, 32

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

101

АМ-470

ул. Гражданская 113

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

102

АЛ-471

пр. 9-й Пятилетки, 2-II

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

103

АК-476

ул. Восточная, 8

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

104

АМ-480

Б-р Миттова, 20-24

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

105

АЛ-482

пр. Мира, 21а

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

106

АК-491

ул. Шумилова, 35

Газон 400 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

107

АМ-494

ул. 139 Стр.дивизии между д. 6 и д. 10

Газон 320 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

108

АК-506

ул. Калинина, 102

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

109

АМ-508

Б-р Миттова, 35

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

110

АК-512

ул. И.Франко, 8

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

111

АЛ-513

Эгерский б-р, 5

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

112

АЛ-514

Эгерский б-р, 27

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Отмостка 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

113

АК-517

ул. 50 Лет Октября, 16

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

114

АК-518

ул. Р.Зорге, 1

Газон 18 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

115

АК-522

ул. Текстильщиков, 13

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

116

АК-528

ул. И.Франко, 3

Газон 15в.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

117

АК-538

ул. Николаева, 22

Газон 130 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

118

АМ-540

пр. Московский, 12 (возможно 2 места — и со стороны двора в т.ч.)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 50 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

119

АЛ-545

пр. 9-ой Пятилетки, 5

Проезжая часть 80 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

120

АК-546

ул. Цивильская, 13 (в сторону д.15)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

121

АМ-548

ул. М.Павлова между 18 и 13

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

122

АМ-551

ул. Максимова, 1

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

123

АК-552

ул. Кадыкова, 18

Газон 62 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

124

АЛ-553

ул. Совхозная, 8 (на кольце у дома)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

125

АК-557

ул. Валькевича, 3

Газон 850 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

126

АМ-564

пр. М.Горького 23-25

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

127

АМ-565

ул. Кривова 17-19

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

128

АМ-570

ул. Гражданская, 72

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

129

АМ-571

ул. М.Павлова, 18

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

130

АЛ-573

ул. Хевешская, 25

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

131

АК-575

ул. Р. Люксембург, 1

Газон 28 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

132

АК-586

пр. Мира, 6

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

133

АК-594

ул. Калинина, 112

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

134

АК-599

ул. Николаева 53

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

135

АМ-617

пр. Московский, между д.2 и 8

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

137

АМ-626

ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 6

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

138

АЛ-627

пр. 9-ой Пятилетки, д. 5

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

139

АК-628

ул. Калинина д. 106 корп. 1

Газон 85 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

140

АК-632

ул. Никитина, 7

Газон 28 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

141

АМ-633

ул. М.Залка между 10 и 8

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

142

АМ-634

ул. Энтузиастов 26

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

143

АЛ-636

Эгерский б-р 3

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Отмостка 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

144

АЛ-637

пр. И. Яковлева, 8Д

Проезжая часть 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

145

АК-638

ул. Текстильщиков, д. 6

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

146

АЛ-644

ул. Николаева, 19

Газон 90 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

147

АЛ-646

пр. Мира, 23 Б

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

148

АЛ-647

пр. Мира, 17 А

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

149

АЛ-651

ул. 324 Стрелковой дивизии,5

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

150

АЛ-653

ул. К.Маркса, д. 33

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

151

АМ-656

ул. Беспалова, д. 2

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

152

АЛ-657

ул. Петрова, 13

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

154

АК-663

ул. Лен Комсомола 62

Газон 6 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

155

АЛ-667

ул. Петрова, 

<

...>)

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

156

АЛ-676

ул. Чапаева, 2

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

157

АМ-678

ул. Гражданская 80

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

158

АК-685

ул. Шумилова, 26-33

Тротуар 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

159

АЛ-686

ул. Хевешская, 27

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

160

АЛ-697

ул. Ленина, 11 (на вводе)

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

161

АЛ-712

ул. К.Маркса 47

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

162

АК-715

ул. Сапожникова, 15

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

163

АЛ-725

ул. Ленина 40

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

ОСП «Чебоксарские электрические сети» 

2018 год

1

АЛ-222

пер. Ягодный, 2

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

2

АМ-233

ул. Энтузиастов, 27

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

3

АК-335

Складской пр. 6 А

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

4

АМ-397

ул. Надежды д. 1

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

5

АМ-427

пр. Московский, 5  9к5

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

6

АМ-448

пр. Московский, 40

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

7

АЛ-489

пр. Мира, 90/2

Проезжая часть 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

8

АМ-498

ул. Эльменя 18

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

9

АМ-569

ул. Радищева, 7

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

10

АЛ-700

Проезд Базовый, 6А, к.1

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

11

АК-711

ул. Шумилова 18

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

12

АМ-728

ул. Чернышевского, 10А

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

При этом истцом  приняты во внимание  довода ответчика о том, что на ряде объектов, указанных в иске, ремонтные работы также производились третьим лицом – МУП «Теплосеть», что делает невозможным установить лицо, которое обязано восстановить благоустройство, в связи с чем ряд позиций  была исключена Управлением  самостоятельно.

Кроме того, суд считает необходимым отметить следующее.

На основании пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

Последствия вынесения судом определения о введении в отношении должника процедуры банкротства - наблюдения, предусмотрены статьей 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Согласно статье 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.

Таким образом, из приведенных разъяснений следует, что с момента открытия конкурсного производства происходит трансформация неденежного требования в денежное требование.

На момент рассмотрения настоящего спора в отношении ООО «Коммунальные  технологии» введена процедура банкротства - наблюдение.

Управлением заявлены требования неимущественного характера, в связи с чем, требования в отношении  ООО «Коммунальные  технологии»    подлежат рассмотрению в рамках искового производства.

Расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 143-144, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии»  о приостановлении производства по делу    до рассмотрения  заявления в рамках  арбитражного дела № А79-7646/2015.

Обязать ООО «Коммунальные технологии» в срок до 01.07.2019  произвести восстановление нарушенного благоустройства при производстве ремонта тепловых и электрических сетей на основании ордеров-разрешений на производство земляных работ, выданных в период с апреля по 31 августа 2018 на следующих объектах и объемах:

№

Номер ордера-разрешения

Адрес производства работ

Нарушенное благоустройство, подлежащее восстановлению

ОСП «Чебоксарские тепловые сети» 

2018 год

1

АК-177

ул. Гагарина, 26 — ул. Цивильская, 1/24 (2 места)

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

2

АМ-179

ул. Лебедева, 25 — 68 (2 места)

Газон 140 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

3

АК-183

ул. Декабристов, 20/1

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

4

АЛ-184

ул. Б.Хмельницкого, 117

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

5

АК-192

пл. Скворцова, д. 4

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

6

АМ-211

ул. Энтузиастов, 5/1

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

7

АМ-221

ул. Игнатьева, 4

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

8

АМ-224

пр. М.Горького, 13-22

Газон 160 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 75 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

9

АК-228

пр. Тракторостроителей, 18

Тротуар 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

10

АМ-229

ул. Урукова, 19

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

11

АМ-230

ул. Лебедева, 1а

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 75 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

12

АМ-243

ул. Димитрова, 22

Газон 70 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

13

АМ-244

ул. Эльгера, 17

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

14

АК-260

ул. Гастелло, 3-5

Проезжая часть 14 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

15

АК-262

ул. Ашмарина, д. 25

Газон 24 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

16

АМ-263

ул. Максимова, д. 2

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

17

АЛ-267

пр. И.Яковлева, 14

Газон 200 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

18

АМ-271

ул. Гузовского, 16

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

19

АЛ-272

ул. Петрова, 2

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

20

АМ-280

б-р Миттова, 7

Газон 300 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

21

АМ-284

ул. Пирогова, 16

Газон 155 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

22

АЛ-285

пр. И. Яковлева 10/1

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

24

АК-296

ул. П.Лумумбы, 13

Газон 55 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

25

АМ-299

ул. М.Павлова, д. 30

Газон 280 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

26

АК-300

пер. Молодежный, 5/1

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

27

АМ-303

ул. Чернышевского, 9«в» (насосная ООО «КТ»)

Газон 350 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

28

АК-305

ул. Р.Зорге, 7

Газон 16 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

29

АМ-309

ул. Кирова, 14

Газон 170 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

30

АК-310

пр. Тракторостроителей, 10 (в р-не МНТК_со стороны детск.поликл.)

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

31

АК-312

пр. Тракторостроителей, 29-33

Газон 36 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

32

АМ-313

ул. К. Иванова,  98

Проезжая часть 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

33

АМ-314

ул. К. Иванова,  83

Тротуар 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

34

АЛ-319

пр. Ленина, 55

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

35

АМ-320

ул. Сверчкова, 15

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

36

АМ-321

пр. Московский, 8

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

37

АМ-326

ул. М.Павлова, 46

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

38

АМ-328

пр. Московский, 41/1

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

39

АМ-331

ул. Энтузиастов, д. 3 корп. 1

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

40

АМ-336

пр. М.Горького 49

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Троутар 12 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

41

АМ-338

ул. О.Кошевого, 3

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Троутар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

42

АМ-339

ул. Тополиная, 17

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

43

АМ-340

ул. Чернышевского, 20

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

44

АМ-344

ул. Пирогова, 4/2

Проезжая часть 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

45

АМ-345

ул. Гузовского, 24

Газон 250 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

46

АК-348

ул. Декабристов, 14-16/1

Газон 55 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

47

АК-349

ул. Николаева, 57-59

Газон 25 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

48

АЛ-350

ул. Чапаева, 8/2

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

49

АЛ-351

ул. Хузангая, 34

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 60 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

50

АЛ-352

ул. Хузангая, 17

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

51

АК-353

пр. Тракторостроителей, 23

Газон 35 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

52

АК-354

Эгерский б-р, 20

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

53

АЛ-359

пр. Мира, 72

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

54

АЛ-360

пр. Мира, 90/1

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

55

АК-361

пр. Тракторостроителей, 9

Газон 5 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

56

АМ-363

ул. М.Павлова, 12

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

57

АМ-364

пр. М.Горького, 36/1

Газон 280 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

58

АЛ-368

пр. И.Яковлева, 18/1 — 18/2

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

59

АЛ-369

пр. 9-ой Пятилетки, 18 — 22/2

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

60

АК-370

пр. Тракторостроителей,27

Газон 120 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 18 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Тротуар 5 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

62

АЛ-372

ул. Энгельса, 24

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

63

АЛ-373

ул. Энгельса, 26

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

64

АК-374

ул. Комбинатская, 5

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

65

АК-375

ул. И.Франко, 18

Газон 75 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

66

АЛ-382

ул. Байдула, 11

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

67

АЛ-390

пр.Ленина 25

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

68

АЛ-392

ул. Хузангая 2/14

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

69

АМ-398

ул. М.Павлова, 34-38

Газон 100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

70

АМ-399

ул. М.Павлова, 24

Газон 1100 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 22 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

71

АК-400

ул. 50 лет Октября, 11 (со стороны 

<

...> Октября)

Газон 180 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

72

АМ-405

ул. М.Павлова, 21 (территория Пожарной части)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

73

АЛ-407

ул. Маршака между д.2 и д.4 (с улицы)

Газон 200 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

74

АК-408

Эгерский б-р, 24

Газон 6 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

75

АК-409

ул. Л.Комсомола, 40-40/1

Газон 38 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

76

АК-410

ул. Шумилова, 30

Газон 42 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

77

АЛ-414

Президентский б-р, д. 14 

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

78

АЛ-417

ул. Совхозная, 16

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

79

АЛ-420

пр. Ленина, 38

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

80

АК-421

ул. Гагарина, 47

Газон 480 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 1 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

81

АМ-423

б-р Миттова, 45

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

82

АМ-424

б-р Миттова, 17

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

83

АК-425

ул. Шумилова, 28-33

Газон 65 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 95 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

84

АК-428

ул. Текстильщиков, 11

Газон 4 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

85

АЛ-430

ул. Совхозная, д. 14

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

86

АЛ-431

ул. Энгельса, 13

Проезжая часть 25 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

87

АЛ-433

ул. Петрова, д. 11

Проезжая часть 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

88

АМ-436

ул. Гузовского, 23

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

89

АЛ-438

ул. Ленинградская 24

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

90

АК-440

ул. Декабристов, 12

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

91

АМ-441

ул. Максимова, 5

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

92

АК-442

ул. Кадыкова, 18

Газон 18 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

93

АЛ-444

ул. Чапаева, 13

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

94

АЛ-445

ул. Совхозная, 21

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

95

АЛ-453

ул. Гагарина, 19

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

96

АМ-454

ул. Университетская, 38

Газон 1000 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

97

АК-455

ул. Крупской, д. 3

Газон 43 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

99

АЛ-458

ул. Б. Хмельницкого, 121

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

100

АЛ-463

пр. Ленина, 32

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

101

АМ-470

ул. Гражданская 113

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 8 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

102

АЛ-471

пр. 9-й Пятилетки, 2-II

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

103

АК-476

ул. Восточная, 8

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

104

АМ-480

Б-р Миттова, 20-24

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

105

АЛ-482

пр. Мира, 21а

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

106

АК-491

ул. Шумилова, 35

Газон 400 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

107

АМ-494

ул. 139 Стр.дивизии между д. 6 и д. 10

Газон 320 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

108

АК-506

ул. Калинина, 102

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

109

АМ-508

Б-р Миттова, 35

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

110

АК-512

ул. И.Франко, 8

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

111

АЛ-513

Эгерский б-р, 5

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

112

АЛ-514

Эгерский б-р, 27

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Отмостка 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

113

АК-517

ул. 50 Лет Октября, 16

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

114

АК-518

ул. Р.Зорге, 1

Газон 18 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

115

АК-522

ул. Текстильщиков, 13

Проезжая часть 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

116

АК-528

ул. И.Франко, 3

Газон 15в.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

117

АК-538

ул. Николаева, 22

Газон 130 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

118

АМ-540

пр. Московский, 12 (возможно 2 места — и со стороны двора в т.ч.)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 50 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

119

АЛ-545

пр. 9-ой Пятилетки, 5

Проезжая часть 80 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

120

АК-546

ул. Цивильская, 13 (в сторону д.15)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

121

АМ-548

ул. М.Павлова между 18 и 13

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

122

АМ-551

ул. Максимова, 1

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

123

АК-552

ул. Кадыкова, 18

Газон 62 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

124

АЛ-553

ул. Совхозная, 8 (на кольце у дома)

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

125

АК-557

ул. Валькевича, 3

Газон 850 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

126

АМ-564

пр. М.Горького 23-25

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 40 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

127

АМ-565

ул. Кривова 17-19

Газон 150 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 30 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

128

АМ-570

ул. Гражданская, 72

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

129

АМ-571

ул. М.Павлова, 18

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

130

АЛ-573

ул. Хевешская, 25

Газон 20 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

131

АК-575

ул. Р. Люксембург, 1

Газон 28 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

132

АК-586

пр. Мира, 6

Газон 8 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

133

АК-594

ул. Калинина, 112

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

134

АК-599

ул. Николаева 53

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

135

АМ-617

пр. Московский, между д.2 и 8

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

137

АМ-626

ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 6

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

138

АЛ-627

пр. 9-ой Пятилетки, д. 5

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

139

АК-628

ул. Калинина д. 106 корп. 1

Газон 85 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

140

АК-632

ул. Никитина, 7

Газон 28 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

141

АМ-633

ул. М.Залка между 10 и 8

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

142

АМ-634

ул. Энтузиастов 26

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

143

АЛ-636

Эгерский б-р 3

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Отмостка 3 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

144

АЛ-637

пр. И. Яковлева, 8Д

Проезжая часть 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

145

АК-638

ул. Текстильщиков, д. 6

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

146

АЛ-644

ул. Николаева, 19

Газон 90 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

147

АЛ-646

пр. Мира, 23 Б

Газон 80 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

148

АЛ-647

пр. Мира, 17 А

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

149

АЛ-651

ул. 324 Стрелковой дивизии,5

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Тротуар 4 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

150

АЛ-653

ул. К.Маркса, д. 33

Проезжая часть 2 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

151

АМ-656

ул. Беспалова, д. 2

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

152

АЛ-657

ул. Петрова, 13

Газон 40 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Проезжая часть 16 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

154

АК-663

ул. Лен Комсомола 62

Газон 6 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

155

АЛ-667

ул. Петрова, 

<

...>)

Газон 60 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

156

АЛ-676

ул. Чапаева, 2

Проезжая часть 20 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

157

АМ-678

ул. Гражданская 80

Газон 30 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

158

АК-685

ул. Шумилова, 26-33

Тротуар 9 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

159

АЛ-686

ул. Хевешская, 27

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

160

АЛ-697

ул. Ленина, 11 (на вводе)

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

161

АЛ-712

ул. К.Маркса 47

Газон 50 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

162

АК-715

ул. Сапожникова, 15

Газон 22 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

163

АЛ-725

ул. Ленина 40

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

ОСП «Чебоксарские электрические сети» 

2018 год

1

АЛ-222

пер. Ягодный, 2

Проезжая часть 15 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

2

АМ-233

ул. Энтузиастов, 27

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

3

АК-335

Складской пр. 6 А

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

4

АМ-397

ул. Надежды д. 1

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

5

АМ-427

пр. Московский, 5  9к5

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

6

АМ-448

пр. Московский, 40

Проезжая часть 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

7

АЛ-489

пр. Мира, 90/2

Проезжая часть 6 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

8

АМ-498

ул. Эльменя 18

Тротуар 10 кв.м путем восстановления песчаного слоя, щебня и асфальтобенного покрытия

9

АМ-569

ул. Радищева, 7

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

10

АЛ-700

Проезд Базовый, 6А, к.1

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

11

АК-711

ул. Шумилова 18

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

12

АМ-728

ул. Чернышевского, 10А

Газон 10 кв.м путем восстановления растительного слоя земли, торфа и посева семян газонной травы

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии»  в пользу муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»  6`000 (Шесть тысяч) руб.  в возмещение понесенных истцов расходов по  оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.В. Манеева