АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-11484/2023

10 октября  2023 года

город Симферополь

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября  2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме  10 октября  2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании делу по исковому заявлению:

ООО  «РоялтиКо» (ОГРН 

<

***>)

к ГУП РК «Крымэнерго»  (ОГРН 

<

***>)

понуждении

в отсутствии явки в судебное заседание уполномоченных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.

установил:

ООО  «РоялтиКо»  обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ГУП РК «Крымэнерго»  в котором просит обязать  ответчика исполнить обязательства по договору от 04.04.2022, а именно осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям индивидуального жилищного строительства по адресу 

<

...> кадастровый номер 90:25:090102:217 течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Ответчик в представленном отзыве на исковое заявление  указал на то, что им проводятся мероприятия по  технологическому  присоединению объекта  истца, при этом  выполнить обязательства по договору в полном объеме  ответчик   сможет   в течение  трех  месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что04.04.2022 между ГУП Республики Крым "Крымэнерго" (далее  - ответчик) и ООО "РоялтиКо" (далее – Заявитель,  истец) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 86-06-874-293-22 (далее – Договор), который  считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета.

В соответствии с условиями Договора Заявителем 04.04.2022 платежным поручением № 181  была  осуществлена  оплата  услуг по технологическому присоединению объекта  по адресу 

<

...>. кадастровый номер 90:25:090102:217.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6  месяцев со дня заключения Договора, то есть до  04.10.2022г.

В связи с невыполнением  ответчиком  в установленный срок своих обязательств по Договору, истец направил  ответчику претензию 28.10.2022 в которой просил исполнить  взятые на себя обязательства по договору,  которая осталась без удовлетворения.

Вышеизложенное послужило основанием для обращении с иском в суд.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в названном Кодексе. 

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила). 

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

Из пункта 7 Правил № 861 следует, что технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, одним из этапов которого является выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором (подпункт "в" пункта 7 Правил № 861).

Согласно пункту 16 Правил № 861 существенными условиями договор о технологическом присоединении являются, в том числе, перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

В соответствии с пунктом 16.3 Правил № 861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:    - заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Заявителями, имеющими право в соответствии с п. 12.1 Правил право на заключение договора присоединения и осуществление присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения, являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, обратившиеся с заявлением в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). 

Материалами дела подтверждается  внесение истцом 02.07.2018 платы  за технологическое присоединение по Договору  в размере 550,00 руб.

По смыслу пункта 1 статьи 328 ГК РФ, пункта 16.3 Правил № 861 и Технических условий обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению являются встречными.

Заключение Договора  породило обязательственные отношения между сторонами, что дает им право требовать друг от друга исполнения обязательств, а также защищать это право в порядке, способами и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

Требование  истца об обязании ответчика исполнить свои обязательства по договору и осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям по техническим условиям, заявлено в соответствии с абзацем 7 статьи 12 ГК РФ, предусматривающим защиту гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства. 

Ответчиком  не отрицался факт неисполнения им своих обязательств по Договору в части  осуществления технологического присоединения устройств истца, а также факт оплаты истцом услуг по технологическому присоединению в соответствии с условиями  Договора.

Наличие каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о невозможности осуществить технологическое присоединение истца  к электрическим сетям, ответчик  подтвердил относимыми и допустимыми доказательствами. 

Руководствуясь  статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

исковые требования удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» выполнить обязательства по договору от 04.04.2022, а именно осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям индивидуального жилищного строительства по адресу 

<

...> кадастровый номер 90:25:090102:217 течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэнерго" в пользу ООО  «РоялтиКо»  судебные  расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6 000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы, если он не отменено и не изменено,  со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.                                                                     

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья                                                                                                                       М.П. Гаврилюк