АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

19 октября 2018 года

Дело № А33-24639/2018

Красноярск

        Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 12.10.2018.

        В полном объёме решение изготовлено 19.10.2018.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Деревягина М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Альфа» (ИНН 2460001399, ОГРН 1022401798209, г. Красноярск)

к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

об обязании совершить фактические действия,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 24.02.2018,      ФИО2, представителя по доверенности от 06.08.2018,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью  «Альфа» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском (с учетом уточнения исковых требований, принятого в судебном заседании 11.10.2018) к публичному акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»  (далее – ответчик) об обязании исполнить требования подпунктов 10.3 – 10.5 пункта 10 технических условий для присоединения к электрическим сетям дополнительного соглашения №2 от 19.07.2012 к договору №20.24.4404.11 от 02.09.2011 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нежилого помещения, принадлежащего ООО «Альфа», а именно:

- совершить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца;

-  произвести реконструкцию ТП №940 с заменой существующих трансформаторов 2х630кВА на трансворматоры большей мощности, определенной проектом;

-    произвести установку в РУ-0,4кВ ТП №940 двух дополнительных панелей ЩО-70.

Определением арбитражного суда от 12.09.2018 исковое заявление принято к производство; предварительное и судебное заседания по делу назначены на 08.10.2018.

На основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание завершено, рассмотрение  дела продолжено в судебном заседании.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. В соответствии со статьёй 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  дело рассматривается в его отсутствие.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялись перерывы до 13 часов 15 минут  11.10.2018, до 13 часов 15 минут 12.10.2018, о чем вынесены протокольные определения. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (заявителем) и ответчиком (сетевой организацией) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11, согласно пункту 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) н/в щит-0.4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 70 кВт;

- категория надежности 3;

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ;

- ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, отсутствует. 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

В силу пункта 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр. Северного жилого района, пер. Светлогорский.

Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия ТУ составляет 3 года (пункт 4 договора в редакции дополнительного соглашения от 24.01.2018 №4).

Из пункта 5 договора (в редакции протокола разногласий к дополнительному соглашению от 24.01.2018 № 4) срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - до 01.07.2018.

В соответствии с пунктом 6 договора сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

В соответствии с пунктом 10 договора (в редакции дополнительного соглашения от 19.07.2012 № 20.24.4404.11 дс2) размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом РЭК Красноярского края от 15.12.2010 № 311-п  и составляет: 296 371,41 руб., в том числе НДС 18% в сумме 45 209,20 руб.

Согласно пункту 11 договора (в редакции дополнительного соглашения от 19.07.2012 №20.24.4404.11 дс2): 

- 44 177,78 руб., в том НДС 18% в сумме 6 738,98 руб. оплачивается при заключении договора;  

- 170 261,18 руб., в том числе НДС 18% в сумме 25 972,04 руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения дополнительного соглашения №2;               

- 72 969,08 руб., в том числе НДС 18% в сумме 11 130,88 руб. оплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней до даты фактического присоединения.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 19.07.2012 № 20.24.4404.11 дс2) сетевая организация осуществляет: фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; реконструкцию ТП№ 940 с заменой существующих трансформаторов 2х630кВА на трансформаторы большей мощности. Мощность трансформаторов определить проектом; установку в РУ-0,4 кВ ТП № 940 двух дополнительных панелей ЩО-70. Заявитель осуществляет: строительство КЛ-0,4 кВ от      РУ-0,4 кВ ТП № 940 до ВРУ-0,4 кВ подземной автостоянки; выполнить расчетный учет в РУ-0,4 кВ ТП № 940 на отходящих КЛ-0,4 кВ и контрольный учет на ВРУ-0,4 кВ подземной автостоянки.

Платежными поручениями от 16.12.2011 № 2050 на сумму 22 088,89 руб., от 23.12.2011 № 2129 на сумму 22 088,89 руб., от 05.09.2018 № 811 на сумму 170 261,18 руб. истец перечислил ответчику денежные средства в счет оплаты по договору от 02.09.2011 №20.24.4404.11.

В подтверждение факта исполнения истцом обязательств по договору истцом в материалы дела представлены: разрешение Администрации города Красноярска № 205, технический отчет от 06.08.2014 № 14/20, письма ООО «Альфа» от 18.11.2016 № 571, от 22.03.2016 № 115, от 25.09.2018 № 639, выкопировка из топографического плана.

Письмами от 26.07.2018 № 521, от 27.07.2018 № 5253 истец уведомил ответчика о выполнении обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11 и просит осуществить фактическое присоединение объекта заявителя с составлением акта разграничения эксплуатационной ответственности, акта об осуществлении технологического присоединения.

В письме от 17.08.2018 № 1.3/20/20427-исх ответчик сообщил истцу о том, что в срок до 27.08.2018 будут определены номера коммутационных аппаратов для осуществления мероприятий по заведению, принадлежащих заявителю кабельных линий и установки системы учета электрической энергии.

Поскольку до настоящего времени фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца не совершены, реконструкция ТП №940 с заменой существующих трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы большей мощности (мощность определить проектом) и установка в РУ-0.4кВ ТП №940 двух дополнительных панелей ЩО-70 не произведены ответчиком, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации определен такой способ защиты права как присуждение к исполнению обязанности в натуре. В силу статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Неисполнение ответчиком обязательств, предусмотренных договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Спорные отношения сторон основаны на договоре, которые регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроснабжении».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ    «Об электроснабжении» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).

Согласно пункту 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу пункта 4 Правил любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил).

Из материалов дела следует, что между истцом (заявителем) и ответчиком (сетевой организацией) подписан договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11, согласно пункту 1 которого сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) н/в щит-0.4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 70 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ; ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, отсутствует. 

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 к дополнительному соглашению от 19.07.2012 № 20.24.4404.11 дс2) сетевая организация осуществляет: фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств заявителя; реконструкцию ТП№ 940 с заменой существующих трансформаторов 2х630кВА на трансформаторы большей мощности. Мощность трансформаторов определить проектом; установку в РУ-0,4 кВ ТП № 940 двух дополнительных панелей ЩО-70. Заявитель осуществляет: строительство КЛ-0,4 кВ от      РУ-0,4 кВ ТП № 940 до ВРУ-0,4 кВ подземной автостоянки; выполнить расчетный учет в РУ-0,4 кВ ТП № 940 на отходящих КЛ-0,4 кВ и контрольный учет на ВРУ-0,4 кВ подземной автостоянки.

Платежными поручениями от 16.12.2011 № 2050 на сумму 22 088,89 руб., от 23.12.2011 № 2129 на сумму 22 088,89 руб., от 05.09.2018 № 811 на сумму 170 261,18 руб. истец перечислил ответчику денежные средства в счет оплаты по договору от 02.09.2011 №20.24.4404.11.

В подтверждение факта исполнения истцом обязательств по договору истцом в материалы дела представлены: разрешение Администрации города Красноярска № 205, технический отчет от 06.08.2014 № 14/20, письма ООО «Альфа» от 18.11.2016 № 571, от 22.03.2016 № 115, от 25.09.2018 № 639, выкопировку из топографического плана.

Материалами дела установлено, что ответчик свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11 в полном объеме не выполнил до настоящего момента. Ответчиком данные обстоятельства не оспариваются.

Исследовав в совокупности представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, арбитражный пришел к выводу, что исковые требования об обязании публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11 в отношении объекта – подземная автостоянка по адресу: г.Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский: совершить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца; произвести реконструкцию ТП №940 с заменой существующих трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы большей мощности. Мощность определить проектом; произвести установку в РУ-0.4кВ ТП №940 двух дополнительных панелей ЩО-70, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Госпошлина, рассчитанная от суммы иска по настоящему делу, составляет 6 000 руб. Указанная сумма уплачена истцом в доход федерального бюджета на основании платежного поручения от 30.08.2018 № 774.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 руб.  подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 14 дней после вступления в законную силу решения суда в рамках исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.09.2011 №20.24.4404.11 в отношении объекта – подземная автостоянка по адресу: г.Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский:

- совершить фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств истца;

- произвести реконструкцию ТП №940 с заменой существующих трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы большей мощности. Мощность определить проектом;

- произвести установку в РУ-0.4кВ ТП №940 двух дополнительных панелей ЩО-70.

Взыскать с публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Альфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

М.В. Деревягин