22/2024-1837(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-9385/2023

город Саранск

16 января 2024 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района  Республики Мордовия  

к обществу с ограниченной ответственностью "СтройСнабМастер" 

об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному  контракту,  

стороны в судебное заседание не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "СтройСнабМастер"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок до 01.05.2024 устранить  недостатки выполненных работ по муниципальному контракту   № 01093000094200000090001 от 03.07.2020 на выполнение работ по  благоустройству городского парка, расположенного по адресу: Республика  Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов, ул.К Маркса, д.111А, а именно:  

на площадке для физических упражнений на свежем воздухе и активного  отдыха устранить просадки бетонного основания и нарушение целостности  резинового покрытия площадью 8м2;  

на площадке для детей от 7 до 12 лет (старшая группа) устранить  нарушение целостности резинового покрытия площадью 10м2, устранить сколы  и трещины детского игрового комплекса «Горка спиральная 1,8м Комплект с  опорной стойкой» (артикул 221024-40) и произвести его монтаж,;  

на площадке для детей до 7 лет (младшая группа) устранить просадки  бетонного основания и нарушение целостности резинового покрытия  площадью 10м2;  

на пешеходных дорожках устранить продольную и поперечную просадку  брусчатки;  

восстановить наружное видеонаблюдение. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "СтройСнабМастер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 6000руб.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Кшняйкин