Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-36516/2021

13 сентября 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" (190098, Россия, Санкт-Петербург г., муниципальный округ Адмиралтейский округ вн.тер.г., Галерная ул., д. 20-22, литера А, этаж 3, ком. 318, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ТЕХГАЗМОНТАЖ" (188302, Ленинградская область, Гатчинский район, Промзона (массив химози тер) улица, дом 1, корпус 1, офис 1Н, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 15.03.2021; 

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 11.05.2021, ФИО4 по доверенности от 11.05.2021; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" (далее - ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕХГАЗМОНТАЖ" (далее – ООО "ТЕХГАЗМОНТАЖ") о взыскании 2266897,86 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 31.12.20219 по 31.12.2020 по договору на выполнение строительно-монтажных работ от 23.03.2018 № ОЗ/15/2018 (далее – Договор).

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Представитель ответчика поддержал возражения против заявленных требований. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" (заказчиком) и ООО "ТЕХГАЗМОНТАЖ" (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого генподрядчик обязуется в установленный Договором срок построить и передать заказчику законченный строительством объект, т.е. выполнить строительно-монтажные работы, предусмотренные технической документацией, а также любые иные работы, необходимые для строительства объекта и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, для его последующей эксплуатации в соответствии с назначением. Заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ, оплатить эти работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством объект. 

По п. 2.2. договора результатом выполненных работ является законченный строительством объект, переданный заказчику в порядке, установленном статьей 23 Договора.

В силу п. 3.2. Договора договорная цена генподрядчика по строительству объекта с учетом НДС составляет 61937136,82 руб. Договорная цена включает в себя стоимость подрядных работ, указанных в проектной документацией, и любых иных работ, необходимых для строительства объекта и его нормальной эксплуатации, стоимость материалов , а также учитывает все возможные расходы генподрядчика, включая, но не ограничиваясь расходами, указанными в п. 3.3 Договора, а также сумму НДС. 

В соответствии с п. 5.1. Договора срок выполнения работ по договору – 210 календарных дней. Датой начала работ считается дата подписания сторонами акта о передаче площадки под строительство. Датой окончания строительства и датой начала гарантийного срока считается дата подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а). 

Согласно п. 25.8. Договора сторона, в одностороннем порядке отказывающаяся от исполнения Договора, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или Договором, направляет другой стороне письменное уведомление за 30 дней до даты прекращения отношений сторон по Договору. 

Заказчик перечислил подрядчику 12091876 руб. аванса по Договору по платежному поручению от 15.05.2018 № 4341. 

ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" направило ООО "ТЕХГАЗМОНТАЖ" уведомление от 24.11.2020 об одностороннем отказе от исполнения договора, а также претензию от 10.02.2021 № 70В-01/625 с требованием оплатить неустойку за нарушение срока окончания работ по Договору.

Отказ ООО "ТЕХГАЗМОНТАЖ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

С письмом от 14.09.2020 № 261/19/ГИГ генподрядчик направил заказчику акты о приемке выполненных работ за период с марта 2018 года по декабрь 2020 года на общую сумму 18186830,40 руб.

Возражая против привлечения к ответственности за нарушение срока окончания выполнения по договору работ, Ответчик указывает, что неисполнение указанного срока произошло по вине заказчика.

Ссылаясь на положения п. 2 ст. 308 ГК РФ, п. 1 ст. 404 ГК РФ, п. 3 ст. 405 ГК РФ, ст. 406 ГК РФ, п. 1 ст. 706 ГК РФ, ст. 718 ГК РФ, п. 1 ст. 719 ГК РФ, п.3 ст. 743 ГК РФ, ч. 3 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), ч. 4 ст. 52 ГрК РФ, ответчик просит суд отказать истцу в удовлетворении заявленных требований.

Кроме того, ответчик заявил ходатайство о снижении неустойки по ст. 333 ГК РФ.

Согласно пункту 1.1 дополнительного соглашения от 18.05.2018 № 2 к договору срок выполнения работ по договору определен не позднее 31.12.2019. датой начала работ считается дата подписания сторонами акта о передаче площадки под строительство.

Фактически стороны подписали названный акт о передаче площадки под строительство 26.03.2018.

Таким образом, в срок выполнения работ не включаются 4 дня.

По условиям Договора заказчик обязуется получить и передать генподрядчику разрешение на строительство объекта и техническую документацию (п. 7.2. договора), а также техническую документацию – проектную и рабочую документацию, включая надлежаще оформленные письменные изменения и дополнения, необходимые и достаточные для выполнения работ и эксплуатации объекта (ст. 1 Договора).

В письме от 14.10.2019 генподрядчик уведомил заказчика о том, что работы по нулевому циклу выполнены в полном объеме, в августе 2018 года работы приостановлены в связи с отсутствием актуальной рабочей документации, так как начата корректировка проекта. Рабочая документация подрядчиком не выдана генподрядчику.

Как указывает истец, данное письмо заказчик получил после направления генподрядчику уведомления от 09.10.2019 об одностороннем отказе от спорного договора.

ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" с письмом от 05.12.2019 № ЮВ-03/13540 передало генподрядчику проектную документацию, в отношении которой получено положительное заключение экспертизы, в связи с чем просило разработать рабочую и сметную документацию и возобновить строительно-монтажные работы на объекте.

Таким образом, задержка выполнения работ по вине заказчика составила 53 дня (14.10.2019-05.12.2019).

Между тем суд полагает возможным признать, что выполнение части работ по нулевому циклу не свидетельствует о том, что генподрядчик мог своевременно приступить к выполнению работ при отсутствии проектной документации.

Принимая во внимание, что в период с 23.03.2018 по 05.12.2019 генподрядчик не имел проектную документацию, сроки выполнения работ подлежат продлению.

Расторжение договора 09.10.2019 было не мотивировано заказчиком, не связано с нарушениями, допущенными генподрядчиком. Не указаны мотивы расторжения заказчиком договора и в уведомлении от 24.11.2020 об одностороннем отказе от исполнения договора, в связи с чем данное расторжение договора произведено ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" на основании статьи 717 ГК РФ.

При этом требование заказчика в письме от 05.12.2019 о том, что генподрядчик должен разработать сметную и рабочую документацию, противоречит условиям спорного договора, по пункту 7.2 которого «техническая документация» (состоит из проектной и рабочей документации) подлежит передаче заказчиком генподрядчику.

Доказательств передачи в полном объеме технической документации генподрядчику ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" не представило. 

В силу п. 1 ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Исходя из изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения требований ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ", в иске отказывает.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.