Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-646/2024

21 июня 2024 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 28 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  21 июня 2024 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шулаевой В. А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: закрытое акционерное общество «Си Проект» (адрес: 196191, 

<

...>, литер А, помещение 146Н, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» (адрес: 150006, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 05.07.2023), 

- от ответчика: не явился (извещен), 

установил:

Закрытое акционерное общество «Си Проект» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к публичному акционерному обществу «Ярославский судостроительный завод» о взыскании 11 571 934 руб. 20 коп. задолженности по договорам №1621187400551412209010292/П-50/2019 и №1621187400551412209010292/П-51/2019 от 26.06.2020, 70 000 руб. расходов на оплату услуг представителя (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК РФ). 

Ответчик представил отзыв на иск, в котором возражал против удовлетворения требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя, заявил о чрезмерности заявленной суммы. 

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец поддержал заявленное требование в полном объеме с учетом уточнения. 

Исследовав материалы дела, заслушав позицию истца, суд установил следующие обстоятельства. 

Между закрытым акционерным обществом «Си Проект» (далее - «Поставщик») и публичным акционерным обществом «Ярославский Судостроительный Завод» (далее - «Покупатель») были заключены договоры:

- №1621187400551412209010292/П-50/2019 от 26.06.2020 г. с дополнительными соглашениями (далее «Договор П-50/2019»), в соответствии с которым Поставщик обязался выполнить и сдать, а Покупатель – принять и оплатить выполнение работ по теме «Поставка программно-аппаратного комплекса интегрированной логистической поддержки для судна проекта 23470 (далее по тексту «ПАК ИЛП-23470»;

- №1621187400551412209010292/П-51/2019 от 26.06.2020 г. с дополнительными соглашениями (далее «Договор П-51/2019»), в соответствии с которым Поставщик обязался выполнить и сдать, а Покупатель – принять и оплатить выполнение работ по теме «Поставка системы информационной поддержки борьбы за живучесть судна проекта 23470 (далее по тексту «СИП БЖ-23470»).

1. По Договору П-50/2019, поставка и работы должны выполняться в 6 этапов, в том числе работы по этапу № 1 (поставка изделия) и этапу 2 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав.№ 412, работы по этапу № 3 (поставка изделия) и этапу № 4 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав. № 413, работы по этапу № 5 (поставка изделия) и этапу №6 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав. № 414. 

Стоимость этапов и порядок расчетов по выполненным Работам установлены в Протоколе цены и порядка расчетов (Приложении 4 к Договору, далее по тексту «Протокол») в фиксированной цене. Величины платежей, установленные Протоколом, исчисляются в процентном отношении от общей стоимости поставленного Товара, включающей стоимость этапа поставки и стоимость этапа выполнения пусконаладочных работ для каждого заказа.

Протоколом определены следующие платежи за выполнение работ:

1. Авансовый платеж – 40% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает не позднее 9 месяцев до даты поставки, установленной Договором;

2. Второй платеж – 50% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении  10 календарных дней после получения письменного уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке;

3. Третий платеж – 5% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении  30 календарных дней с даты поставки Товара и приемки его по количеству и качеству на складе Покупателя и подписания сторонами товарной накладной;

4. Четвертый платеж – 5% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении  30 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки ПНР и швартовно-ходовых испытаний.

Указанный порядок платежей распространяется на поставку Товара для каждого из трех заказов.

В обоснование иска истец указал, что Исполнитель должным образом исполнил свои обязательства по этапам № 1,2,3 Договора – все работы по данным этапам выполнены и сданы Покупателю, что подтверждено: 

  по этапу 1 – Уведомлением исх. №241/16 от 24.12.2021 г. о готовности к отгрузке Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №412, Товарной накладной №97 от 27.12.2021 г. по форме ТОРГ-12 о приемке Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №412 на складе Покупателя;

  по этапу 2 – Актом №486.2022.1/208 от 09.11.2022 г. сдачи-приемки работ по этапу 2, Сводным актом № 486.2022.1/209 от 09.11.2022 г. сдачи-приемки работ по этапам № 1,2. 

  по этапу № 3 – Уведомлением исх. №190/06 от 11.10.2022 г. о готовности к отгрузке Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №413, Товарной накладной №91 от 12.10.2022 г. по форме ТОРГ-12 о приемке Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №413 на складе Покупателя.

- Выполнены работы по поставке Товара для заказа зав. №412 (этап №1,2) на сумму 3 241 593,20 рублей, в т.ч. НДС 20% – 540 265,53 рублей.

Выполненные работы за поставку Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №412 (этап №1,2) Покупателем оплачены частично   на сумму 1 296 637,28 рублей, в т.ч. НДС 20% 216 106,21 рублей. Следует к перечислению в оплату выполненных работ за поставку Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №412 (этап №1,2) на сумму 1 944 955,92 рублей,  в т.ч. НДС 20% – 324 159,32 рублей. 

- Выполнены работы по поставке Товара для заказа зав. №413 (этап №3) на сумму 3 078 727,60 рублей, в т.ч. НДС 20% – 513 121,27 рублей. Выполненные работы за поставку Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №413 (этап №3) Покупателем оплачены частично на сумму 1 338 810,94 рублей, в т.ч. НДС 20%  –  223 135,16 рублей. Следует к перечислению в оплату выполненных работ за поставку Товара «ПАК ИЛП-23470» для заказа зав. №413 (этап №3) на сумму 1 739 916,66 рублей,  в т.ч. НДС 20% – 289 986,11 рублей. 

Таким образом, сумма задолженности Покупателя за выполненные работы по этапам №1,2,3 Договора №1621187400551412209010292/П-50/2019 от 26.06.2020 г. составляет 3 684 872,58 рублей, в т.ч. НДС 20% 614 145,43 рублей.

2. По Договору П-51/2019, поставка и работы должны выполняться в 6 этапов, в том числе работы по этапу № 1 (поставка изделия) и этапу 2 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав.№ 412, работы по этапу № 3 (поставка изделия) и этапу № 4 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав.№ 413, работы по этапу № 5 (поставка изделия) и этапу №6 (выполнение пусконаладочных работ) для заказа зав. № 414. 

Стоимость этапов и порядок расчетов по выполненным работам установлены в Протоколе цены и порядка расчетов (Приложении 4 к Договору, далее по тексту «Протокол») в фиксированной цене. Величины платежей, установленные Протоколом, исчисляются в процентном отношении от общей стоимости поставленного Товара, включающей стоимость этапа поставки и стоимость этапа выполнения пусконаладочных работ для каждого заказа.

Протоколом определены следующие платежи за выполнение работ для заказов зав. №412 (этапы №1,2) и зав. №413 (этапы №3,4):

1. Авансовый платеж – 60% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает не позднее 9 месяцев до даты поставки, установленной Договором;

2. Второй платеж – 20% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении 10 календарных дней после получения письменного уведомления Поставщика о готовности Товара к отгрузке;

3. Третий платеж – 10% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении 30 календарных дней с даты поставки Товара и приемки его по количеству и качеству на складе Покупателя и подписания Сторонами товарной накладной;

4. Четвертый платеж – 5% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает за 10 календарных дней до планируемой даты начала ПНР и  швартовно-ходовых испытаний;

5. Пятый платеж – 5% от Стоимости Товара Покупатель уплачивает в течении 30 календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки ПНР и швартовно-ходовых испытаний.

В обоснование иска истец указал, что Исполнитель должным образом исполнил свои обязательства по этапам № 1,2,3 Договора – все работы по данным этапам выполнены и сданы Покупателю, что подтверждено: 

  по этапу 1 – Уведомлением исх. №241/15 от 24.12.2021 г. о готовности к отгрузке Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №412, Товарной накладной №100 от 27.12.2021 г. по форме ТОРГ-12 о приемке Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №412 на складе Покупателя; 

  по этапу 2 – Актом №487.2022.1/206 от 09.11.2022 г. сдачи-приемки работ по этапу 2, Сводным актом № 486.2022.1/207 от 09.11.2022 г. сдачи-приемки работ по этапам № 1,2. 

  по этапу № 3 – Уведомлением исх. №190/07 от 11.10.2022 г. о готовности к отгрузке Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №413, Товарной накладной №93 от 12.10.2022 г. по форме ТОРГ-12 о приемке Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №413 на складе Покупателя.

- Выполнены работы по поставке Товара для заказа зав. №412 (этап №1,2) на сумму 5 547 608,24 рублей, в т.ч. НДС 20% – 924 601,37 рублей.

Выполненные работы за поставку Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №412 

(этап №1,2) Покупателем оплачены частично   на сумму 4 438 086,58 рублей, в т.ч. НДС 20% 739 681,09 рублей. Следует к перечислению в оплату выполненных работ за поставку Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №412 (этап №1,2) на сумму 1 109 521,66 рублей, в т.ч. НДС 20% – 184 920,28 рублей. 

- Выполнены работы по поставке Товара для заказа зав. №413 (этап №3) на сумму 5 247 097,46 рублей, в т.ч. НДС 20% – 874 516,25 рублей.

Выполненные работы за поставку Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №413 

(этап №3) Покупателем оплачены частично на сумму 3 313 956,29 рублей, в т.ч. НДС 20% 552 326,05 рублей. Следует к перечислению в оплату выполненных работ за поставку Товара «СИП БЖ-23470» для заказа зав. №413 (этап №3) на сумму 1 933 141,17 рублей,  в т.ч. НДС 20% – 322 190,20 рублей. 

Таким образом, сумма задолженности Ответчика (Покупателя) за выполненные работы по этапам №1,2,3 Договора №1621187400551412209010292/П-51/2019 от 26.06.2020 г. составляет 3 042 662,83 рублей, в т.ч. НДС 20% 507 110,48 рублей.

Истец направил претензию (требование) досудебное урегулирование спора исх. №185/12 от 04.10.2023 г., получена Ответчиком 17.10.2023, отчет о вручении АО ПОЧТА РОССИИ. Ответчик не выполнил требования Истца и не предоставил мотивированного отзыва на претензию.

Истец направил претензию (требование) досудебное урегулирование спора исх. №185/11 от 04.10.2023 г., получена Ответчиком 17.10.2023, отчет о вручении АО ПОЧТА РОССИИ. Ответчик не выполнил требования Истца и не предоставил мотивированного отзыва на претензию. 

Также Истец направил Ответчику Сопроводительное письмо №193/12 от 16.10.2023 г. и Акт сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2023 г. по Договорам П-50/2019 и П-51/2019, на которое Истцом не было представлено протокола разногласий. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

В связи с поставкой оборудования по этапу 5 Договора №П-50 и №П-51(товарная накладная №1 и счет-фактура №3 от 16.01.2024 и товарная накладная №31 и счет-фактура №42 от 05.04.2024 г.), а также проведением сверки расчетов, увеличилась сумма основного долга по Договорам №П-50 и №П-51. 

Истец уточнил исковые требования, просит взыскать с ответчика задолженность в размере 11 571 934,20 рублей (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать четыре рубля 20 копеек), в том числе: 

- По этапам 1, 2, 3, 5 Договора №1621187400551412209010292/П-50/2019 всего 5 029 492,03 рублей (Пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч четыреста девяносто два рубля 03 копейки), в том числе по каждому из этапов:

По этапу 1 – 1 576 514,79 рублей (Один миллион пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот четырнадцать рублей 79 копеек);

По этапу 2 - 368 441,13 рублей (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок один рубль 13 копеек);

По этапу 3 – 1 587 392,88 рублей (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто два рубля 88 копеек);

По этапу 5 - 1 497 143,23 рублей (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч сто сорок три рубля 23 копейки).

- По этапам 1, 2, 3, 5 Договора №1621187400551412209010292/П-51/2019 всего 6 542 442,17 рублей (Шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи четыреста сорок два рубля 17 копеек), в том числе по каждому из этапов:

По этапу 1 – 1 025 669,45 рублей (Один миллион двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 45 копеек);

По этапу 2 - 83 852,22 рублей (Восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два рубля 22 копейки);

По этапу 3 – 2 034 612,12 рублей (Два миллиона тридцать четыре тысячи шестьсот двенадцать рублей 12 копеек);

По этапу 5 - 3 398 308,38 рублей (Три миллиона триста девяносто восемь тысяч триста восемь рублей 38 копеек).

Уточнения приняты судом на основании статьи 49 АПК РФ. 

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки; если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями (пункт 1 статьи 516 ГК РФ).

Факт поставки товара и приемки его Покупателем подтверждается следующими доказательствами: товарными накладными, актами сдачи-приемки, сводными актами сдачи-приемки, платежными поручениями о частичной оплате товара. 

Публичное акционерное общество «Ярославский судостроительный завод» факт поставки товара не опровергло, возражений по объему и срокам поставки, качеству товара не заявило. 

Оценив с соблюдением требований статей 67, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд считает требование истца о взыскании задолженности в заявленном размере подлежащим удовлетворению, учитывая отсутствие доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком обязанности по оплате поставленного товара в размере 11 571 934 руб. 20 коп.

Также истец заявил требование о взыскании с ответчика 70 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), а также другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле.

Часть 2 статьи 110 АПК РФ предусматривает, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием (пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). 

В подтверждение факта несения расходов истец представил договор поручения на совершение юридических действий от 14.12.2023 № 06-АРБ/2023-р, заключенный с ООО «Северо-Западный правовой альянс», платежное поручение от 21.12.2023 № 3158 на сумму 70 000 руб. Исходя из анализа всех обстоятельств дела, суд считает доказанным факт несения истцом судебных расходов в размере 70 000 руб. Связь данных расходов с рассмотрением настоящего дела, а равно и участие представителя при рассмотрении дела документально подтверждены.

Ответчик заявил возражения, сослался на чрезмерность заявленной суммы расходов на оплату услуг представителя. 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности судебных расходов могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»). 

Принимая во внимание отсутствие со стороны ответчика доказательств недостоверности или недействительности предъявленных истцом документов, а также доказательств чрезмерности спорных судебных расходов, требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. Государственная пошлина в части увеличения исковых требований подлежит взысканию с ответчика непосредственно в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» в пользу закрытого акционерного общества «Си Проект» 11 571 934 руб. 20 коп. задолженности, 56 638 руб. расходов по уплате государственной пошлины, 70 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Ярославский судостроительный завод» в доход федерального бюджета 24 222 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.