﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД

 ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тюмень	Дело № А45-26144/2019

Резолютивная часть постановления объявлена  13 мая 2020 года

Постановление изготовлено в полном объеме  14 мая 2020 года

 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего			Ткаченко Э.В.,

судей							Курындиной А.Н.,

								Лукьяненко М.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств видеоконференц-связи помощником судьи Мурзиной Н.А., рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью  «Винтех» на решение от 16.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области (судья Зюзин С.Г.) и постановление от 18.11.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Сухотина В.М., Марченко Н.В., Ярцев Д.Г.) по делу № А45-26144/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Винтех» (630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 88, этаж 2 офис 21, ОГРН 1185476087653, ИНН 5406995099) к обществу с ограниченной ответственностью «Дельтатехсервис» (630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 1-й Кирзавод, д. 28А, оф. 2; ИНН 5406232210, ОГРН 1025402451876) о взыскании неосновательного обогащения и неустойки.

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Наумова Т.А.) в заседании участвовали представители: общества с ограниченной ответственностью «Винтех» - Казанцев Н.С. по доверенности от 05.07.2019 № 6; общества с ограниченной ответственностью «Дельтатехсервис» - Николаева Е.В. по доверенности от 01.11.2019.

Суд установил:

общество с ограниченной ответственностью «Винтех» (далее - ООО «Винтех», истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Дельтатехсервис» (далее - ООО «Дельтатехсервис», ответчик) о взыскании 21 000 руб. неосновательного обогащения, 7 000 руб. штрафа и 15 260 руб. неустойки.

ООО «Дельтатехсервис»  предъявило встречный иск о взыскании 50 005 руб. основного долга и неустойки.

Решением от 16.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 18.11.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда, первоначальные исковые требования удовлетворены частично, с ООО «Дельтатехсервис» в пользу ООО «Винтех» взыскано 10 500 руб. неустойки, а также 452 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска; в удовлетворении первоначального иска в остальной части отказано. Встречные исковые требования удовлетворены частично: с ООО «Винтех» в пользу ООО «Дельтатехсервис» взыскано 49 000 руб. основного долга, 294 руб. неустойки, а также 1 972 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины и 17 676 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя; в удовлетворении встречного иска в остальной части отказано. В результате зачета с ООО «Винтех» в пользу ООО «Дельтатехсервис» взыскано 49 000 руб. основного долга, 294 руб. неустойки, а также 8 696 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя.

ООО «Винтех», не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратилось с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы ООО «Винтех» указывает на то, что судами не были учтены положения статьей 165.1, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также условие пункта 9.7 договора об исключительном способе обмена документами между сторонами; в договоре отсутствуют условия, устанавливающие, что обмен информацией между сторонами осуществляется путем направления сообщений по электронной почте; обмен информацией осуществляется путем отправления почтовой корреспонденции (заказным письмом с уведомлением); исполнительная документация, включая акты обследования (технического освидетельствования), заказчику не была передана; у заказчика имелись основания для одностороннего отказа от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий.

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Дельтатехсервис» просило обжалуемые судебные акты оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения, 

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов на основании статей 284, 286 АПК РФ, исходя из доводов кассационной жалобы и отзыва на нее, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые решение и постановление не подлежат отмене или изменению.

Как установлено судами, между ООО «Винтех» (заказчик) и ООО «Дельтатехсервис» (подрядчик) заключен договор подряда от 10.01.2019 № 06-1812-03 (далее – договор), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить обследование установок пожарной автоматики согласно РД 009-02-96 и технического задания на выполнение работ по обследованию систем водяного пожаротушения на объекте по адресу г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 130 а, а заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

Общая стоимость работ по договору составила 70 000 руб. (пункт 2.1 договора).

Во исполнение условий договора (пункт 2.2) истец перечислил ответчику предварительную оплату в сумме 21 000 руб., что подтверждается представленным платежным поручением от 23.01.2019.

Согласно пунктам 3.6.1 и 3.6.2 договора срок начала работ - в течение 5 рабочих дней с даты оплаты аванса, срок окончания - 20 рабочих дней с даты начала работ. С учетом даты оплаты аванса работы должны быть завершены в срок до 27.02.2019 включительно.

В соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 договора результат обследования оформляется актом первичного обследования систем пожарной автоматики.

Истец принимает работы в виде приемки указанного акта. При наличии неисправностей систем пожарной автоматики ответчик оформляет дефектную ведомость приложением к акту первичного обследования систем пожарной автоматики.

В соответствии с пунктом 4 технического задания (приложение № 1 к договору) подрядчик по результатам обследования передает заказчику акт проверки с приложением копий свидетельств о поверке используемых измерительных приборов, заключение о работоспособности систем пожаротушения с выявленными неисправностями и сметный расчет на устранение выявленных неисправностей.

Истец в обоснование требований указал, что в установленный договором срок ответчик работы не выполнил, соответствующие результаты обследования не передал.

В этой связи письмом от 23.04.2019 истец направил ответчику уведомление об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке с требованием возвратить сумму аванса.

Оставление указанного требования без удовлетворения явилось основанием для предъявления искового заявления о взыскании суммы неотработанного аванса, неустойки за нарушение сроков выполнения работ и штрафа в соответствии с пунктом 4.9 договора в связи с отказом заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке.

Ответчиком предъявлено встречное исковое заявление о взыскании задолженности по оплате стоимости работ и неустойки за нарушение сроков оплаты.

 Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчик исполнил свои обязательства по договору до направления истцом уведомления об отказе от договора, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании суммы неотработанного аванса. 

Установив, что работы фактически выполнены и переданы истцу с нарушением установленного договором срока, суд первой инстанции частично удовлетворил требования о взыскании неустойки, указав, что основания для начисления неустойки после 13.05.2019 отсутствуют.

Суд первой инстанции признал отказ заказчика от исполнения договора необоснованным, в связи с чем отказал в удовлетворении требований истца о взыскании штрафа согласно пункту 4.9 договора. 

По встречному исковому заявлению, суд первой инстанции, установив, что работы по договору выполнены и переданы истцу, удовлетворил требования ответчика о взыскании задолженности по оплате стоимости работ в заявленном размере. Установив факт ненадлежащего исполнения истцом договорных обязательств, проверив представленный расчет пени, суд признал его подлежащим корректировке в связи с неверным определением периода просрочки, удовлетворил требование о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ за период с 17.06.2019 по 28.06.2019 в размере 294 руб.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции находит выводы судов первой и апелляционной инстанций обоснованными и соответствующими действующему законодательству и обстоятельствам дела.

Доводы кассационной жалобы о том, что судами не были учтены положения стаей 165.1, 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также условие пункта 9.7 договора об исключительном способе обмена документами между сторонами; исполнительная документация, включая акты обследования (технического освидетельствования), заказчику не была передана; у заказчика имелись основания для одностороннего отказа от исполнения договора в связи с существенным нарушением его условий, подлежат отклонению.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (часть 1 статьи 708 ГК РФ).

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно статье 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с частью 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, в силу указанной статьи заказчику предоставлено законное право на односторонний отказ от исполнения договора при наличии соответствующих условий.

Как разъяснено в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, в том числе переписку сторон, учитывая сложившиеся между сторонами отношения по обмену информацией в рамках исполнения договора, исходя из того, что с момента начала договорных отношений с ООО «Дельтатехсервис» обмен документами между сторонами производился посредством электронной почты (статья 5 ГК РФ), установив, что подрядчик выполнил объем работ до направления заказчиком уведомления об отказе от договора, сообщив о готовности работ к приемке истцу и направив акты первичного обследования и акт на обследование установок пожарной автоматики посредством электронной почты 13.05.2019, принимая во внимание, что письмом от 14.05.2019 истец замечаний по актам обследования и сметным расчетам ответчику не заявил, указал лишь на необходимость предоставления оригиналов актов, расценив указанное письмо как окончательную приемку работ истцом, суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности факта возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 21 000 руб. ввиду необоснованного отказа ООО «Винтех» от исполнения договора и отсутствии в этой связи оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании 21 000 руб. и 7 000 руб. штрафа.

Суды, оценив условия договора, а также поведение сторон при его исполнении, пришли к выводу, что фактически целью договора являлось определение работоспособности системы пожарной автоматики и пожаротушения; акты первичного обследования в оригинале представляли интерес для истца только в том случае, если бы в работе систем не было выявлено недостатков и система была бы признана полностью работоспособной, так как данные акты истец имел возможность представить в компетентные органы. Однако при обследовании систем пожарной автоматики и пожаротушения было установлено значительное количество недостатков, без устранения которых система пожарной автоматики и пожаротушения не могла функционировать надлежащим образом. Данное обстоятельство отражено в актах первичного обследования, где описаны все выявленные недостатки и указано на необходимость повторной проверки после устранения недостатков. Также на это обстоятельство указывает пункт 4 технического задания и то, что истец согласовал полученные от ответчика сметные расчеты на устранение недостатков.

С учетом изложенного, суды обоснованно исходили из того, что договор со стороны подрядчика следует считать исполненным в тот момент, когда он передал истцу акты первичного обследования, содержащие описание всех выявленных недостатков и сметные расчеты с описанием работ по их устранению; указанные документы в электронном виде в полном объеме были направлены ответчиком истцу 13.05.2019, замечаний по указанным документам истец не заявил.

При этом судами указано, что в связи с наличием недостатков в системе пожарной автоматики и пожаротушения потребительскую ценность для истца имеют не сами оригиналы актов, а сведения, изложенные в них о выявленных недостатках, а также сметные расчеты по их устранению.

 ООО «Винтех» также заявлено требование о взыскании с ООО «Дельтатехсервис» неустойки за нарушение срока выполнения работ.

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Судами установлено, что согласно пунктам 3.6.1 и 3.6.2 договора с учетом даты оплаты аванса работы должны быть завершены в срок до 27.02.2019 включительно.

Пунктом 4.1 договора сторонами согласована неустойка за нарушение сроков окончания работ в размере 0,2 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

Установив факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору, проверив расчет неустойки и признав его подлежащим корректировке в части определения периода начисления пени, указав в качестве конечного срока начисления неустойки дату передачи результата работ истцу, а именно 13.05.2019, суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки за период  с 28.02.2019 по 13.05.2019 в размере 10 500 руб.

Согласно статье 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнена надлежащим образом и в согласованны срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (часть 1 статьи 720 ГК РФ).

В соответствии со статьей 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованным.

Названная норма защищает интересы исполнителя работ, если заказчик необоснованно отказался или уклоняется от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку работ.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, в том числе акты первичного обследования и акт на обследование установок пожарной автоматики, установив, что ответчик фактически выполнил работы и передал результат истцу, в отсутствие доказательств, свидетельствующих о выполнении ООО «Дальтатехсервис» работ ненадлежащего качества и о предъявлении ООО «Винтех» соответствующих претензий, суды пришли к обоснованному выводу о наличии у истца обязанности по оплате выполненных работ, в связи с чем правомерно удовлетворили встречные исковые требования в части взыскания основного долга в размере 49 000 руб.    

ООО «Дельтатехсервис» также заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 1 005 руб. за период с 17.06.2019 по 28.06.2019.

В пункте 4.2 договора стороны согласовали условие о неустойке за нарушение сроков оплаты работ в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Установив факт просрочки ООО «Винтех» оплаты стоимости работ, проверив представленный расчет пени, признав его подлежащим корректировке, в связи с арифметической ошибкой, суды правомерно удовлетворили требование о взыскании неустойки за период с 17.06.2019 по 28.06.2019 в размере 294 руб.

 Доводы кассационной жалобы по существу направлены на переоценку доказательств и установленных обстоятельств по делу, что не входит в полномочия арбитражного суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 АПК РФ, в связи с чем подлежат отклонению.

Согласно правовому подходу, изложенному в определении от 17.02.2015 № 274-О Конституционного Суда Российской Федерации, иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо.

Иное толкование заявителем жалобы положений действующего законодательства, а также иная оценка обстоятельств спора, не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права.

В обжалуемых решении и постановлении суды в полной мере исполнили процессуальные требования, изложенные в статьях 170, 271 АПК РФ, указав выводы, на основании которых частично удовлетворили иск, а также мотивы, по которым суды отвергли те или иные доказательства. При этом отсутствие оценки судом (всех) представленных доказательств (в отдельности) и доводов, заявленных сторонами, само по себе не является основанием для отмены вынесенных решения и постановления.

Нарушений норм материального и процессуального права (статья 288 АПК РФ) арбитражными судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела не допущено.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

ООО «Дальтатехсервис» в отзыве на кассационную жалобу заявлено о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции в сумме 15 000 руб. за представительство в суде кассационной инстанции и подготовку отзыва на кассационную жалобу.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Частью 5 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным данной статьей.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - постановление № 1), лицо, подавшее апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, а также иные лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела на соответствующей стадии процесса, но не подававшие жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы, в случае, если по результатам рассмотрения дела принят итоговый судебный акт в их пользу.

В свою очередь, с лица, подавшего апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, в удовлетворении которой отказано, могут быть взысканы издержки других участников процесса, связанные с рассмотрением жалобы.

Понесенные участниками процесса издержки подлежат возмещению при условии, что они были обусловлены их фактическим процессуальным поведением на стадии рассмотрения дела судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанций, на стадии пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

В качестве доказательств несения заявленных расходов на оплату услуг представителя ООО «Дальтатехсервис» представлены: копия договора об оказании юридических услуг от 21.02.2020, заключенного между ООО «Дальтатехсервис» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Подразделение «Д» (исполнитель), предметом которого является оказание юридических услуг, а именно: участие в судебных заседаниях суда кассационной инстанции, подготовка отзыва на кассационную жалобу;  копия акта об оказанных услугах от 16.03.2020; копия платежного поручения от 27.02.2020 № 121; копия приказа от 29.06.2018 о приеме работника на работу.

Расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 руб. понесены в связи с составлением отзыва на кассационную жалобу, участием представителя ООО «Дальтатехсервис» в судебном заседании.

Исследовав и оценив перечисленные документы, суд кассационной инстанции приходит к выводу, что расходы на оплату юридических услуг фактически понесены и документально подтверждены.

Частью 2 статьи 110 АПК РФ, пунктом 12 постановления № 1 предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных расходов, суд не вправе уменьшать их произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ). Суд вправе уменьшить размер судебных издержек, если заявленная к взысканию сумма, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер (пункт 11 постановления № 1).

В соответствии с пунктом 13 постановления № 1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Оценив уровень сложности дела, содержание и объем выполненных представителем работ в суде кассационной инстанции, содержание отзыва на кассационную жалобу, исходя принципа разумности размера подлежащих взысканию судебных расходов, суд округа приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о взыскании  судебных расходов за представление интересов ООО «Дальтатехсервис» в суде кассационной инстанции в заявленном размере (15 000 руб.).

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

постановил:

решение от 16.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 18.11.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А45-26144/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Винтех» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дельтатехсервис» 15 000 руб. - расходов на оплату услуг представителя в суде кассационной инстанции.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий					Э.В. Ткаченко

Судьи									А.Н. Курындина

										М.Ф. Лукьяненко