АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Орел Дело № А48–9155/2023  25 декабря 2023 года  

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Н.В. Подриги при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Г.В. Тереховой,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Субъекта  Российской Федерации - Орловская область в лице Казенного учреждения Орловской  области «Орелгосзаказчик» (302026, город Орёл, улица Мопра, дом 42, ИНН 5752030770,  ОГРН 1035753000700) к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» (241520,  Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 17, офис 1,  ОГРН 1193256005744, ИНН 3245016726) о понуждении подрядчика к исполнению  гарантийных обязательств по государственному контракту от 17 марта 2020 года № 4-кр,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167–170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (241520, Брянская  область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 17, офис 1, ОГРН  1193256005744, ИНН 3245016726) в течение 30 календарных дней с даты вступления  настоящего решения суда в силу исполнить гарантийные обязательства в рамках  Контракта 4-кр от 17.03.2020 г., а именно:  

- кабинет № 2 - выполнить закрепление коробки дверного блока двери, выполнить  отбивку поврежденной штукатурки стен на площади 11,75 м, обработку поверхности  грунтовкой глубокого проникновения, штукатурку, шпатлевку и покраску стен на  указанной площади;  

- кабинет № 3 - выполнить регулировку дверного полотна и устранить перекос  полотна влево на 2 мм;  

- дверь в коридоре (между 3 и 4 кабинетами) - выполнить регулировку дверного  полотна и устранить зазор 2 мм в верхнем углу;  

- кабинет № 5 - выполнить отбивку поврежденной штукатурки стен на площади  12,42 м2, произвести обработку поверхности грунтовкой глубокого проникновения,  

штукатурку, шпатлевку и покраску стен на указанной площади;  

- кабинет № 6 - выполнить отбивку поврежденной штукатурки стен на площади  6,00 м2, обработку поверхности грунтовкой глубокого проникновения, штукатурку,  шпатлевку и покраску стен на указанной площади;  

- коридор - выполнить отбивку поврежденной штукатурки стен на площади 21,88  м2, обработку поверхности грунтовкой глубокого проникновения, штукатурку, шпатлевку  и покраску стен на указанной площади;  

- кладовая - выполнить отбивку поврежденной штукатурки стен на площади 2,70  м2, обработку поверхности грунтовкой глубокой проникновения, антисептическую  обработку стен, штукатурку, шпатлевку и покраску стен на указанной площади;  

- дверь в мужской туалет - выполнить регулировку дверного замка; 

- дверь в кладовую - выполнить регулировку дверного полотна, устранить перекос  полотна вправо;  

- кабинет № 8 - выполнить закрепление коробки дверного блока, восстановление  шпатлевки под наличником дверного проема;  

- кабинет № 9 - выполнить регулировку дверного полотна, устранить перекос  полотна;  

- кабинет № 10 - выполнить закрепление дверной коробки. Выполнить ремонт и  регулировку замка двери;  

- дверь в мужской туалет - выполнить регулировку дверного полотна, устранить  перекос полотна;  

- дверь в женский туалет - выполнить регулировку замка двери; 

- выполнить восстановление штукатурного слоя, шпатлевки и краски в местах  отслоения в нижней части стены с внешней стороны здания в осях А-Д на высоту до 25 см  от отмостки на отдельных участках по всей длине стены здания;  

- козырек над входом - произвести установку отсутствующего анкера крепления  козырька и заменить два вырванных анкера.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» (241520,  Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 17, офис 1,  ОГРН 1193256005744, ИНН 3245016726) в доход федерального бюджета госпошлину в  размере 6 000 руб.  

Выдать исполнительный лист налоговому органу.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  

Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской  

области в течение одного месяца со дня его принятия. 

Судья Н.В. Подрига