654/2023-88942(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12  

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

дело № А40-185543/22 

Резолютивная часть постановления объявлена 17 апреля 2023 года  Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2023 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е. Судей Тетюка В.И., Семёновой А.Б., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Ответчика  

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2023г. (резолютивная часть от  12.12.2022г.) по делу № А40-185543/22  

по иску ООО "ИСКАТЕЛЬ" (ИНН 

<

***>) к ООО "СТРОЙПАРТНЕР" (ИНН  

<

***>) о взыскании,  

при участии в судебном заседании: от истца: директор ФИО2, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.10.2022 

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ИСКАТЕЛЬ" (далее – истец, подрядчик) предъявило ООО  "СТРОЙПАРТНЕР" (далее – ответчик, заказчик) иск о взыскании задолженности в  размере 7 853 697 руб. 60 коп. и процентов за пользование чужими денежными  средствами в размере 745 188 руб. за период с 04.10.2021 по 12.08.2022.  

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176  АПК РФ 12.12.2022г., изготовленным в полном объеме 03.02.2023г. исковые  требования удовлетворены частично.  

Суд взыскал с ООО "СТРОЙПАРТНЕР" в пользу ООО "ИСКАТЕЛЬ"  задолженность в размере 7 853 697 руб. 60 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами в размере 388 166 руб. 30 коп., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 64 209 руб. В остальной части иска отказано.  

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и  доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.  

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения  суда первой инстанции, полагает его подлежащим оставлению без изменения.  

Установлено, что между ООО «СтройПартнер» и ООО «Искатель» был  заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ № 33 по выполнению  работ «под ключ» по объекту: «Восстановление ТС в 

<

...> от  ТК10И-ТК13И». Согласно п. 4.2 договора цена подлежащих выполнению работ  составляет 10 761 638 руб. 40 коп.  

Пунктом 4.3 договора предусмотрено, что расчет за выполненные работы  производится заказчиком в течение 45 календарных дней (для предприятий,  относящихся к субъектам малого предпринимательства 15 рабочих дней) с момента  выполнения работ и подписания заказчиком «акта о приемке выполненных работ»  формы КС-2, «справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3.  

В силу пункта 3.1 договора календарные сроки производства работ определены  сторонами: начало работ: с момента заключения договора, окончание: 15.09.2021 г.  

Договор на подписание был направлен в адрес ООО «Искатель» по электронной  почте 25.08.2022 г.  

Во исполнение условий договора 04.10.2021 г. посредством электронной почты  подрядчиком в адрес заказчика были направлены акты о приемке выполненных работ и  затрат (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и вручены  нарочно.  

Поскольку мотивированного отказа от подписания актов субподрядчику не  направлено, работы в силу ст. 753 ГК РФ считаются принятыми и подлежат оплате.  

В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, принятых по  договору, с учетом частичной оплаты работ на сумму 2 907 940 руб. 80 коп.,  образовалась задолженность в размере 7 853 697 руб. 60 коп.  

Доказательств погашения задолженности в добровольном порядке ответчик не  представил, доводы истца о нарушении сроков оплаты за выполненные истцом работы  документально не опроверг.  

Поскольку требование истца об уплате основного долга, ответчиком добровольно  не удовлетворено, задолженность в размере 7 853 697 руб. 60 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами в размере 388 166 руб. 30 коп. (с учетом  принятого постановления Правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497) подлежат  присуждению ко взысканию с него на основании ст.ст. 309, 310, 395, 702, 711 ГК РФ в  судебном порядке.  

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции  применена ст. 753 ГК РФ не подлежащая применению, поскольку ответчик направил  письмо исх. № 39 по электронной почте 01.10.2021, в котором указал замечания к  исполнительной документации и к объему выполненных подрядчиком работ, подлежит  отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку Акты КС-2, КС-3 с  исправленными замечаниями были направлены заказчику, что подтверждается в т.ч.  письмом истца исх. от 05.10.2021 № 101 (т. 1 л.д. 49), на которое ответчик не ответил.  

Таким образом, поскольку Истец основывает требования на односторонних Актах  КС-2, которые были направлены Ответчику, и который не представил на них  мотивированных возражений, т.е. фактически их принял.  

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство об  отложении судебного разбирательства, что свидетельствует о нарушении судом  принципа состязательности, не состоятелен, поскольку опровергается протоколом  судебного заседания от 12.12.2022 (т. 1 л.д. 97).  

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том,  что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и подлежит  оставлению без изменения.  

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2023г. (резолютивная часть  от 12.12.2022г.) по делу № А40-185543/22 оставить без изменения, апелляционную  жалобу – без удовлетворения.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня  изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья Е.Е. Кузнецова 

Судьи В.И. Тетюк 

 А.Б. Семёнова 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.