АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                       Дело № А65-29811/2021

Дата принятия решения –  17 февраля 2022 года.

Дата объявления резолютивной части –  16 февраля 2022 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Воробьева Р.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Заречье», г. Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СЕВерСтрой-НЧ», г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договорам подряда №1/20 от 25.03.2020 года, №10/20 от 10.06.2020 года, №11/20 от 01.11.2020 года в размере 2 696 438 рублей 7 копеек, неустойки в размере 1 741 414 рубля 46 копеек,

с участием: 

от истца – ФИО2 по доверенности, ФИО3 по доверенности,

от ответчика – не явился,

у с т а н о в и л :

общество с ограниченной ответственностью «Заречье» (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском обществу с ограниченной ответственностью «СЕВерСтрой-НЧ» (ответчик) о взыскании задолженности по договорам подряда №1/20 от 25.03.2020 года, №10/20 от 10.06.2020 года, №11/20 от 01.11.2020 года в размере 2 696 438 рублей 7 копеек, неустойки в размере 1 741 414 рубля 46 копеек.

Истец в судебном заседании иск подержал, дал пояснения.

Ответчик в судебное заседание не явился, ранее представил отзыв.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, 25.03.2020года между ООО «СЕВерСтрой-НЧ» и ООО «Заречье» был заключен договор подряда №1/20. 10.06.2020 года между ООО «СЕВерСтрой-НЧ» и ООО «Заречье» был заключен договор подряда №10/20. 01.11.2020 года между ООО «СЕВерСтрой-НЧ» и ООО «Заречье» был заключен договор подряда №11/20. Согласно актам, была выполнена работа на сумму 5 879 848,95 рублей. 

Согласно платежным поручениям и актам сверки, была выплачена и учтена взаимозачетом по другим договорам сумма в общем размере 3 436 742,33 рублей. Сальдо согласно акту сверки за 2020 года равно 253 331,45 рублей. Задолженность составила - 2 696 438,07 рублей.

23.09.2021 года была направлена претензия с просьбой выплатить образовавшуюсязадолженность по договору и выплатить неустойку за просрочку оплаты по договору.

Ответа на претензию получено не было.

Поскольку ответа на претензию не последовало, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд, исследовав представленные материалы дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В статье 722 ГК РФ установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

Факт исполнения истцом своих обязательств подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно п. 5.1. Договоров №1/20, №10/20, №11/20 Заказчик должен подписать акт в течение 5 дней с момента получения извещения об окончании работы.

В соответствии с п. 3.2 Договоров №1/20, №10/20, №11/20 Заказчик производит оплату не позднее 3 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.

В соответствии с п. 7.3 Договоров №1/20, №10/20, №11/20 неустойка за несвоевременную оплату выполненных работ составляет 0,3% от суммы подлежащей уплате за день просрочки.

В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или    ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Сумма неустойки по указанным договорам, согласно расчета представленного истцом,  составила 1 741 414 рубля 46 копеек.

Произведенный истцом расчет неустойки судом проверен, не превышает сумму неустойки, подлежащую взысканию в соответствии с требованиями закона, условиями договоров и требование истца в данной части правомерно.

Учитывая вышеизложенное суд находит требование истца обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЕВерСтрой-НЧ», г.Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Заречье», г. Набережные Челны (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 2 696 438,7 руб., неустойку в размере 1 741 414,46 руб., расходы по государственной пошлине в размере 45 189 руб.

Исполнительный лист выдать по заявлению.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья                                                                                                                Р.М. Воробьев