АРБИТРАЖНЫЙ СУД УРАЛЬСКОГО ОКРУГА

Ленина проспект, д. 32/27, Екатеринбург, 620075  

http://fasuo.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Ф09-3914/23 

Екатеринбург

07 августа 2023 г.

 

Дело № А07-14560/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 августа 2023 г. 

 

Арбитражный суд Уральского округа в составе:

председательствующего Краснобаевой И.А.,

судей Тороповой М.В., Столярова А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Институт нефтехимпереработки" (далее – общество "Институт нефтехимпереработки") на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.2022 по делу № А07-14560/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2023 по тому же делу.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте Арбитражного суда Уральского округа.

В судебном заседании приняли участие представители:

акционерного общества "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" (далее -  общество "НК НПЗ") - ФИО1 (доверенность от 01.01.2023, диплом, паспорт);

общества "Институт нефтехимпереработки" - ФИО2 (доверенность от 12.12.2022), ФИО3 (доверенность от 16.11.2022).

Общество "НК НПЗ" (истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу "Институт нефтехимпереработки" (ответчик) о взыскании убытков в размере 44 444 228 руб. 38 коп.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.20222 исковые требования общества "НК НПЗ" удовлетворены в полном объеме, распределены судебные расходы на оплату судебной экспертизы и по уплате государственной пошлины.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2023 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе общество "Институт нефтехимпереработки" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что судами не учтено, что ответчик по результатам выполнения работ разработал проектную документацию и передал заказчику, который принял по актам разделы проектной документации: № 1 от 09.06.2014 на сумму 10 507 948,18 руб. - этап (раздел) № 2 "Разработка концепции по реконструкции сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 40"; № 2 от 20.10.2014 на сумму 24 904 573,81 руб. - этапы (разделы) № 7 "Разработка и передача Заказчику на согласование графической части разделов 2-5", № 8 "Разработка и передача Заказчику на согласование разделов 1-5, 11 в полном объеме", № 9 "Разработка и передача Заказчику на согласование разделов 6-10 и 12 в полном объеме"; № 3 от 15.12.2014 на сумму 5 353 882,39 руб. - этапы (разделы) № 4 "Выполнение инженерно-геодезических изысканий" № 5 "Выполнение инженерно-геологических изысканий", № 6: "Выполнение инженерно-экологических изысканий"; № 4 от 23.12.2016 на сумму 3 677 824 руб. - этапы (разделы) № 13.1 "Насосная станция № 1 (АС, ТХ, ЭМ, ТИ, ЭО), N 13.2 "Насосная станция № 2 (АС, ТХ, ЭМ, ТИ, ЭО). По принятым разделам в заключении государственной экспертизы от 21.01.2019 полностью отсутствуют замечания по разделам ПЗ, ПЗ-ИРД, ПЗУ, АР, КР-01, КР-02, КР-03, КР-04, ИОС1, ИОС2, ИОСЗ, ИОС5, ИОС7-01, ИОС7-02, ПОД, ООС-01, ООС-02, МПБ, ОЭЭ, ГОЧС, СМИС. ТБЭ, ДПБ-03. 

Общество "Институт нефтехимпереработки" обращает внимание на то, что в письменных ответах судебного эксперта ФИО4 от 10.11.2022 указано о предоставлении и принятии экспертом остальных разделов проектной документации, как соответствующих постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию", но при этом не дана оценка потребительской ценности разделов ПЗ, ПЗ-ИРД. ПЗУ, АР, КР-01, КР-02, КР-03, КР-04, ИОС1, ИОС2, ИОСЗ, ИОС5, ИОС7-01, ИОС7-02, ПОД, ООС-01, ООС-02, МПБ, ОЭЭ, ГОЧС, СМИС, ТБЭ, ДПБ-03, принятых государственной экспертизой (это большая часть проектной документации). Отмечает, так как согласно условиям договора, работа выполнялась и принималась поэтапно, каждый раздел имеет свою ценность и стоимость. Истец не оспаривает, что им приняты работы по актам № 1 от 09.06.2014 на сумму 10 507 948 руб. 18 коп., № 2 от 20.10.2014 на сумму 24 904 573 руб. 81 коп., № 3 от 15.12.2014 на сумму 5 353 882 руб. 39 коп., № 4 от 23.12.2016 на сумму 3 677 824 руб., после которых в период с момента принятия работ до момента расторжения договора в течение 5 лет (2014 - 2019 гг.) он продолжал принимать активное участие в дальнейшем согласовании, обсуждении, коррекции проектной документации, но при этом каких-либо требований о расторжении договора и официального отказа от уже принятой работы от заказчика не поступало, работа ранее была принята в соответствии с порядком приемки, указанным в договоре (раздел 6 договора "Сдача и приемка работ"). Кроме того, судом первой инстанции не учтено, что результаты работ в виде "Разработка концепции по реконструкции сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 40", принятые по акту № 1 от 09.06.2014 на сумму 10 507 948 руб. 18 коп., не входят в объем документации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", не подлежат проверке ГГЭ, не влияют на ее результат. Данная документация не направлялась истцом для ГГЭ и может использоваться отдельно от проектно-сметной документации, проходившей ГГЭ. Договор предполагал поэтапное выполнение и сдачу ряда работ, предусмотренных приложением № 1 к договору подряда № 3281214/0610Д от 12.05.2014, получение заключения ГГЭ - лишь один из видов работ по договору. Таким образом, судом первой инстанции необоснованно взысканы с ответчика 10 507 948 руб. 18 коп. Рабочая документация (со статусом для строительства) разработана на основании томов проектно-сметной документации; АР, КР-01. КР-02, КР-03, ИОС2, ИОС7-01, ИОС7-02, ПЗУ, ПОД, по которым отсутствуют замечания ГГЭ, что свидетельствует о ее потребительской ценности и возможности дальнейшего использования данных томов в комплекте ПСД и рабочей документации. Кроме того, рабочая документация не входит в состав документации, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", и не передается для проверки в ГГЭ. Данная документация не направлялась истцом для ГГЭ.

В отзыве на кассационную жалобу общество "НК НПЗ" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверяется судом кассационной инстанции в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (части 1, 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судами, 12.05.2014 между обществом "НК НПЗ" (заказчик) и ГУП "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (правопреемник общества "Институт нефтехимпереработки", подрядчик) заключен договор подряда № 3281214/0610Д, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции сооружений механической и физико-химической очистки Ц.40 по объекту "Цех № 11. Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки", в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации, условиями договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и размере, предусмотренном договором (п. 1.1 договора).

В соответствии с п. 1.2 договора состав, содержание, технические, экономические и другие требования к разработке проектной документации указываются в задании на проектирование "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха 11", утвержденном заказчиком (приложение № 1), и являющемся неотъемлемой часть договора. Настоящим подрядчик выражает свое согласие со всеми условиями задания на проектирование.

Стоимость работ по договору носит договорной характер в действующих ценах и определена протоколом соглашения о договорной цене (приложеие № 2) и составляет 73 096 252 руб. 71 коп., в том числе НДС - 11 150 275 руб. 84 коп. (п. 3.1 договора).

Дополнительным соглашением № 3 от 20.03.2018 стороны изменили стоимость договора, установив сумму работ в размере 58 852 747 руб. 37 коп. Кроме того, НДС 18% - 10 593 494 руб. 53 коп. Всего с учетом НДС 18% - 69 446 241 руб. 90 коп.

В соответствии с 4.1 договора сроки выполнения работ, сроки выдачи рабочей документации и стоимость работ согласовываются сторонами в календарном плане (приложение № 3), который является неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 6.13 договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.03.2018) работы считаются выполненными подрядчиком и принятыми заказчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем акте сдачи-приемки работ.

В соответствии с п. 7.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.03.2018) оплата выполненных результатов работ по договору производится заказчиком по факту, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании актов приема-сдачи работ в течение 90 календарный дней, но не ранее чем через 45 календарных дней (нижняя граница) с даты подписания актов приема-сдачи работ, но не ранее получения оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством и договором. Электронные или факсовые копии документов передаются с последующим обязательством предоставления оригиналов в течение не более 10 календарных дней, но не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным. Датой исполнения денежного обязательства заказчика по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

Как указывает истец, работы по договору подрядчиком выполнены и сданы заказчику, что подтверждается актами сдачи-приемки работ № 1 от 09.06.2014 на сумму 10 507 948 руб. 18 коп., № 2 от 20.10.2014 на сумму 24 904 573 руб. 81 коп., № 3 от 15.12.2014 на сумму 5 353 882 руб. 39 коп., № 4 от 23.12.2016 на сумму 3 677 824 руб.

Указанные работы были приняты истцом и оплачены.

В соответствии с утвержденным заданием на проектирование к договору подрядчик обязуется проектную документацию разработать и соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами ОАО "НК Роснефть" и постановлением Правительств Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию", статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом проектная документация должна быть разработана в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.

В дальнейшем, между обществом "НК НПЗ" (заказчик) и Федеральным автономным учреждением "Главное управление государственной экспертизы" (исполнитель, ФАУ "Главгосэкпертиза России") заключен договор на выполнение экспертных работ от 08.12.2016 № 033Д-16/СГЭ4923/03/3281216/1284Д, по которому исполнитель обязуется провести по заданию заказчика государственную экспертизу следующей проектной документации и результатов инженерных изысканий: "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", а заказчик обязуется принять и оплатить работы. Результатом работ является заключение исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной проектной документации требованиям законодательства, нормативно-технических документов и результатам инженерных изысканий (п. 1.2 договора).

В рамках договора № 033Д-16/СГЭ-4923/03/3281216/1284Д от 08.12.2016 истец по заявлению о проведении государственной экспертизы № 35.1-22950 от 30.11.2016 направил полученную от ответчика проектную документацию в ФАУ "Главгосэкпертиза России" для подготовки заключения государственной экспертизы проекта.

По итогам государственной экспертизы ФАУ "Главгосэкпертиза России" выдано отрицательное заключение государственной экспертизы № 0069-17/СГЭ4923/03 от 29.03.2017, в котором сделан вывод, что проектная документация по объекту "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11" не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Проектная документация возвращена ответчику на доработку и для исправления выявленных недочетов.

Корректировка проектной документации выполнена, в связи с чем общество "НК НПЗ" произвело выгрузку документации на соответствующий сетевой ресурс Главгосэкспертизы.

В дальнейшем, между обществом "НК НПЗ" (заказчик) и ФАУ "Главгосэкпертиза России" (исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 0296Д-18/СГЭ-04923/902/3281218/1158Д от 24.09.2018, по которому исполнитель обязуется провести по заявлению заказчика повторную государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", представленных заказчиком в электронном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить услуги. Результатом услуг является заключение исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной документации требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным документам федеральных органов исполнительной власти в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании", результатам инженерных изысканий, а результатов инженерных изысканий - требованиям технически регламентов.

По итогам повторной государственной экспертизы ФАУ "Главгосэкпертиза России" выдано отрицательное заключение от 21.01.2019 № 63-1-2-3-000774-2019, в котором сделан вывод, что проектная документация не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору и получением отрицательного заключения государственной экспертизы истец обратился к ответчику с требованием о возмещении понесенных истцом убытков на общую сумму 44 444 228 руб. 38 коп.

Истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке № 14-15051 от 30.07.2019 со ссылкой на статьи 721, 723 и 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также претензией от 03.03.2021 № 02-4-218 просил перечислить на расчетный счет истца убытки в размере 44 444 228 руб. 38 коп.

Поскольку требование истца оставлено ответчиком без удовлетворения истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требований, суд первой инстанции оценив заключение судебного эксперта № 2022/081 от 01.08.2022 в совокупности с представленными в материалы дела доказательства, пришел к выводу, что заявленная истцом сумма в размере 44 444 228 руб. 38 коп. является убытками истца, возникшими в результате изготовления ответчиком проекта, не соответствующего требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Проверив законность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции не находит оснований для их отмены.

Суды правомерно исходили из того, что правоотношения сторон вытекают из договора подряда от 12.05.2014 № 3281214/0610Д, регулируемых главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общими нормами гражданского законодательства об обязательствах и ответственности за их нарушение.

В соответствии со статьями 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, в том числе и в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме.

Все участники гражданских правоотношений предполагаются добросовестными исполнителями своих прав и обязанностей, поэтому кредитор (потерпевший) должен доказать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения своим должником лежащих на нем обязанностей, а также наличие и размер понесенных убытков и причинную связь между ними и фактом правонарушения. В свою очередь, ответчики вправе доказывать отсутствие своей вины в причинении убытков.

Согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статей 15 и 393 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками. Должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования (пункт 2 статьи 721 Кодекса).

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика (пункт 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное (пункт 2 статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положения статьи 761 Гражданского кодекса Российской Федерации исходят из того, что все недостатки работ по составлению технической документации объективно не могут быть установлены заказчиком при приемке работ. Недостатки могут быть обнаружены и после завершения строительства.

При рассмотрении спора судами установлено, что подрядчик обязуется разработать проектную документацию в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами ОАО "НК Роснефть", постановлением Правительств Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов Проектной документации и требованиях к их содержанию", статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом проектная документация должна быть разработана в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязан, в том числе выполнить проектные работы согласно утвержденным Техническим заданиям, нормативным документам на проведение проектных работ, подготовить и передать заказчику материалы проектных работ в соответствии с Техническими заданиями, договором, требованиями действующего законодательства.

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза (пункт 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В связи с наличием спора между разногласий относительно соответствия объемов и качества выполненных работ условиям договора, проектно-сметной документации, а также с учетом наличия между сторонами разногласий по вопросу потребительской ценности выполненных ответчиком по договору работ, по ходатайству истца определением суда первой инстанции от 17.02.2022 назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория судебной экспертизы ФЛСЭ" ФИО4

По результатам проведенной экспертизы в материалы дела представлено заключение эксперта № 2022/081 от 01.08.2022. Эксперт, пришел к выводу о том, что проектная документация и результаты инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", подготовленных по договору подряда № 3281214/0610Д от 12.05.2014 не соответствуют условиям договора подряда № 3281214/0610Д от 12.05.2014, техническому заданию к договору, требованиям, установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническим регламентам.

Экспертом сделан вывод о том, что результат работ по подготовке проектной документации имеет недостатки (дефекты) в части состава и содержания разделов проектной документации. Данные недостатки (дефекты) выявлены неоднократно, что позволяет отнести их к существенным, за исключением факта отсутствия отдельных разделов, которые являются критическими дефектами. Недостатки (дефекты) являются устранимыми. Данные недостатки (дефекты) существенно влияют на использование продукции по назначению, но не являются критическими, за исключением отнесенных к критическим. Фактически выполненные работы по рабочей документации имеют недостатки (дефекты) в части комплектности (разделы на экспертизу не представлены). Недостатки (дефекты) являются устранимыми. Данные недостатки считаются как критические, использование продукции по назначению при которых невозможно.

Экспертом сделан вывод о том, что при наличии недостатков, потребительская ценность проектной документации и результатов инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", подготовленных по договору подряда № 3281214/0610Д от 12.05.2014, отсутствует. Данная проектная документация и результаты инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", подготовленные по договору подряда № 3281214/0610Д от 12.05.2014 в текущем состоянии не могут быть использованы заказчиком по назначению в соответствии с условиями договора.

Экспертом сделан вывод о том, что возможность доработки проектной документации и результатов инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", подготовленных по договору подряда № 3281214-0610Д от 12.05.2014, для использования по назначению имеется. Стоимость доработки проектной документации и результатов инженерных изысканий "Реконструкция сооружений механической и физико-химической очистки стоков цеха № 11", подготовленных по договору подряда № 3281214-0610Д от 12.05.2014 для использования по назначению составляет 102 249 428 руб.

Исследовав и оценив представленное в материалы дела экспертное заключение, суды установили, что заключение является ясным, полным, соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также положениям Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», при этом судами также принято во внимание, что эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений, доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, а также доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматриваются,  обстоятельств, свидетельствующих о том, что заключение судебной экспертизы является недостоверным, сторонами не приведено.

Ставя под сомнение выводы эксперта, общество "Институт нефтехимпереработки" просило назначить по делу повторную экспертизу, проведение которой поручить индивидуальному предпринимателю ФИО5 или обществу с ограниченной ответственностью "Корпорация экспертов".

Отказывая в удовлетворении ходатайства ООО "Интеллектуальные системы" о проведении по делу повторной экспертизы, суд первой инстанции, отклоняя доводы ответчика о недостоверности проведенной по делу экспертизы со ссылками на неполноту исследования, что повлекло вероятностный и условный характер результатов экспертизы, счел заключение эксперта полным и обоснованным. Выводы эксперта сделаны по поставленным вопросам, не содержат противоречий, подтверждаются представленными в материалы дела доказательствами, а также устными пояснениями самого эксперта. При этом суд учитывает, что само по себе несогласие с выводами, изложенными в экспертном заключении, не может являться достаточным основанием для назначения повторной или дополнительной экспертизы.

Таким образом, названное заключение экспертов признано соответствующим требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аргумент подателя жалобы о необоснованном отклонении ходатайства о назначении повторной экспертизы подлежит отклонению, так как исходя из положений статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации необходимость в повторной экспертизе возникает при наличии у суда сомнений в обоснованности экспертного заключения или при наличии противоречий в выводах эксперта (комиссии экспертов), а при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза.

В силу положений статьи 86 и 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о необходимости проведения экспертизы, в том числе повторной или дополнительной, а также вызова эксперта в судебное заседание относится к исключительной компетенции суда и является для него правом, а не обязанностью.

Апелляционный суд дал оценку заключению эксперта № 2022/081 от 01.08.2022 и не нашел оснований, указанных в статье 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для назначения по делу повторной экспертизы. Экспертом даны полные, конкретные и ясные ответы на поставленные вопросы, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования.

Также судом апелляционной инстанции принято во внимание, что заявляя ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы, ответчик не представляет доказательств внесения ни на депозитный счет суда первой инстанции, ни на депозитный счет суда апелляционной инстанции денежных средств за проведение повторной экспертизы.

Кроме того, отсутствие результата работ также подтверждено судебными актами по делу № А07-38864/2019, в рамках которого суды пришли к выводу, что получение отрицательных заключений государственных экспертиз проектной документации повлекло именно ненадлежащее исполнение ответчиком принятых на себя обязательств (статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответственность подрядчика за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ, в том числе недостатки, связанные с прохождением экспертизы в случае получения отрицательного заключения экспертизы по выполненным подрядчиком проектным работам, установлена статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 названного Кодекса).

Части 1 и 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязывают арбитражный суд оценить доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, основываясь на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, в том числе на предмет их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, который должен содержать мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, при этом в мотивировочной части должны быть обозначены доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле (пункты 2, 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, процессуальный закон обязывает арбитражный суд оценить представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и отразить в судебном акте мотивы, по которым он пришел к своим выводам, принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, исходя из принципов равноправия сторон и состязательности процесса.

Руководствуясь приведенными положениям закона, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе результаты проведенной государственной экспертизы, установив, что проект не соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, принимая во внимание, что результат работ не достигнут, что установлено экспертным заключением № 2022/081 от 01.08.2022, он не может быть использован заказчиком по назначению в соответствии с условиями договора подряда от 12.05.2014 № 3281214/0610Д, суды первой и апелляционной инстанций при наличии причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникновением убытков у истца, пришли к обоснованному и правомерному выводу, что отсутствие встречного предоставления влечет возврат оплаченной суммы в размере 44 444 228 руб. 38 коп., в связи с чем удовлетворили заявленные исковые требования.

Вопреки доводам кассационной жалобы, судами двух инстанций установлено, что истец не имеет возможности использовать отрывочно пакет документов от проектно-сметной документации, которая должна пройти Главгосэкспертизу, учитывая, что цель договора состояла в ином. Производить строительные работы без утвержденной проектной документации в силу требований законодательства заказчик не имеет возможности. Кроме того, экспертным заключением № 2022/081 от 01.08.2022 также установлено о необходимости значительной переработки документации, в виду изменения нормативной документации в строительстве с момента проведения работ в 2016 году.

Иного из материалов дела не следует, суду не доказано (статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При установленных по делу обстоятельствах и сделанных на их основании выводов судов первой и апелляционной инстанций суд округа не усматривает оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Изложенные в кассационной жалобе доводы заявителя по существу направлены на переоценку выводов суда о фактических обстоятельствах дела и имеющихся в деле доказательствах, сводятся к изложению заявителем собственных представлений об установленных судами обстоятельствах и толковании примененных норм права, что не свидетельствуют о допущенных ими нарушениях норм материального и процессуального права и не являются основанием для отмены или изменения обжалуемых судебных актов.

Суд округа полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов у суда кассационной инстанции не имеется (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нормы материального права применены судами по отношению к установленным ими обстоятельствам правильно, выводы судов соответствуют имеющимся в деле доказательствам, исследованным в соответствии с требованиями, определенными статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу положений статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловными основаниями для отмены судебных актов, судом округа не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.12.2022 по делу № А07-14560/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу акционерного общества «Институт нефтехимпереработки»  – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

Председательствующий                                             И.А. Краснобаева 

 

Судьи                                                                           М.В. Торопова 

 

                                                                                      А.А. Столяров