АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-11115/2020

г. Уфа

23 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен 23 октября 2020 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), третьи лица – 1) Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2) Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 3) Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об обязании  ООО «УКЗ №4 ОАО КПД» исполнить пункт 3.1.8 договора №29-РТ от 24.05.2012г. о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан – осуществить строительство детского сада на 95 мест по ул.Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ориентировочной стоимостью 107 511 120 руб. и в течение одного месяца со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать по акту- приема передачи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

В судебное заседание явились:

От Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан – ФИО3 по доверенности №01-05-2166/13 от 17.09.2020, представлен паспорт гражданина РФ;

От Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - ФИО4 по доверенности от 06.02.2018;

От Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан - ФИО5 по доверенности №Д-125 от 09.09.2019, представлен диплом о высшем юридическом образовании Академии труда и социальных отношений г. Москва Башкирский филиал;

От Управления образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан – ФИО6, по доверенности  №01-19/2459 от 14.10.2020, представлен диплом о высшем юридическом образовании, паспорт гражданина РФ;

От общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД"- явки нет, извещены надлежащим образом;

Администрация городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), третьи лица – 1) Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 2) Управление земельных и имущественных отношений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 3) Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан об обязании  ООО «УКЗ №4 ОАО КПД» исполнить пункт 3.1.8 договора №29-РТ от 24.05.2012г. о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан – осуществить строительство детского сада на 95 мест по ул.Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ориентировочной стоимостью 107 511 120 руб. и в течение одного месяца со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать по акту- приема передачи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Представитель истца исковые требования поддержал, просит удовлетворить иск в полном объеме.

Представители третьих лиц представили отзыв на исковое заявление, заявили, что поддерживает изложенную позицию истца по данному делу, просят удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика представил отзыв с требованиями не согласны в полном объеме по основаниям в нем изложенным.

Рассмотрев ходатайство ответчика об отложении судебного заседания, суд приходит к выводу, что оно подлежит отклонению.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда. Приведенные ответчиком обстоятельства обязательным основанием для применения статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются.

Невозможность участия в судебном заседании конкретного представителя не является препятствием к реализации стороной по делу ее процессуальных прав.

Ответчик, являющийся юридическим лицом, не был лишен возможности представлять доказательства, подтверждающие свои требования, приводить письменные пояснения в обоснование своих доводов, а также заявлять соответствующие ходатайства через другого представителя, действующего по доверенности, равно как и через орган юридического лица (генерального директора).

Явка в судебное заседание представителей ответчика обязательной не признана, а при наличии процессуальной заинтересованности в представлении новых доказательств ответчик имел реальную возможность направления таких доказательств одновременно либо вместо ходатайства об отложении судебного разбирательства.

Суд отмечает, что в рассматриваемом случае правовая позиция заявителя жалобы изложена им в отзыве на исковое заявление. Явка участников процесса не была признана судом обязательной.

В ходатайстве не содержится ссылок на обстоятельства, доводы и доказательства, препятствующие рассмотрению дела в отсутствие представителя ответчика, а также ссылок на обстоятельства, наличие которых требует личного присутствия представителя ответчика в судебном заседании суда.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела,  24.05.2012г. между Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан (истце, сторона 1) и Обществом с ограниченной ответственностью  "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД" (ответчик, Сторона 2) заключен договор №29-РТ о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – договор). 

Согласно п.1.1 договора № 29-РТ в соответствии с условиями аукциона по продаже прав на заключение договора о развитии застроенной территории, утвержденными постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 07.03.2012 года № 613 «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан», от 03.04.2012г. № 982 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и опубликованными в газете «Вечерняя Уфа»  № 64 от 05.04.2012 на основании протокола №2 об итогах аукциона от 05 мая 2012 года, настоящим договором сторона 1 предоставляет на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а сторона 2, получая права, принимает на себя обязательства в установленные разделом 3 настоящего договора сроки своими силами и за свой счет (или с привлечением сил и средств третьих лиц) выполнить указанные в разделе 3.1 настоящего договора обязательства по развитию вышеуказанной территории(далее – застроенная территория), в том числе разработать и утвердить в установленном порядке проект планировки и проект межевания застроенной территории, оформить права на земельные участки в границах застроенной территории и осуществить строительство объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией, а сторона 1 обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств стороной 2.

Согласно подпункта 3.1.2 договора с учетом дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2013г. общество «УКЗ №4 ОАО КПД» приняло на себя следующие обязательство: разработать и представить на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан проект планировки и проект межевания застроенной территории в срок до 31 марта 2014г.

Во исполнение пункта 3.1.2 договора ответчик разработал проект планировки и проект межевания территории ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по результатам чего принято постановление Администрации города № 5074 от 18.11.2014г. об его утверждении. 

В соответствии с пунктом 3 приложения №4 к вышеуказанному постановлению Администрации предусмотрено строительство детского сада на 130 мест по ул. ФИО2.

Также во исполнение пункта 3.1.2 договора ответчик разработал изменения в проект планировки и проект межевания территории ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по результатам чего принято постановление Администрации города №824 от 02.06.2016г. об утверждении соответствующих изменений. 

Откорректированный проект планировки предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры - образовательного учреждения, а именно строительство детского сада на 95 мест по ул. Нежинской.

В соответствии с пунктом 3.1.8. договора общество «УКЗ №4 ОАО КПД» обязано в течение пяти лет с момента заключения договора №29-РТ от 24.05.2012г. осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.  

Ориентировочная стоимость предполагаемого вышеуказанного объекта образования согласно постановлению Правительства РБ №315 от 29.05.2019г. составляет 107 511 120,00 (сто семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто двадцать рублей). 

Ввиду неисполнения вышеуказанного обязательства, с целью принятия мер к досудебному урегулированию спора и понуждению Ответчика к исполнению обязательства, 27.03.2020г. Администрация ГО г. Уфа направила в адрес ответчика претензию № 01-05-00777/11  с требованием исполнения обязательств, предусмотренных пункта 3.1.8 договора. Ответа не последовало.

В связи с тем, что ответчик уклоняется от исполнения обязательства предусмотренного пунктом 3.1.8. договора № 29-РТ, Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан обратилась в суд с рассматриваемыми требованиями.

Оценив  все  представленные  доказательства  в  отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном,  объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает  иск  подлежащим  удовлетворению на  основании следующего.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрен такой вид договора как договор о развитии застроенной территории, в рамках которого одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3 - 6 части 3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 7 - 9 части 3 настоящей статьи.

Статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения истцом и ответчиком договора) по договору о развитии застроенной территории одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 3 - 6 части 3 настоящей статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пунктами 7 - 9 части 3 этой статьи. Договором могут быть предусмотрены иные обязательства сторон в соответствии с частью 4 этой статьи (ч. 1). Договор заключается органом местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным лицом в соответствии с частями 25 и 28 статьи 46.3 этого Кодекса (ч. 2). Существенными условиями договора являются, в том числе: обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования (при их отсутствии - в соответствии с утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки таких документов; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с пунктом 4 этой части; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории; максимальные сроки осуществления строительства; обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5 этой части, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земельными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; срок договора; ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора (ч. 3).

В пункте 4 ст. 46.2 ГрК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) определено, что в договоре наряду с указанными в части 3 настоящей статьи существенными условиями могут быть предусмотрены иные существенные условия, в том числе: 1) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; 2) указание видов объектов, предусмотренных пунктом 1 настоящей части и подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность; условия и сроки такой передачи; 3) условия и объем участия органа местного самоуправления в развитии застроенной территории с указанием соответствующих сроков; — 4) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления. 

Как следует из статьи 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из основания, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно статье 432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В силу пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена указанным кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Существенным условием договора согласно  является обязательство общества «УКЗ №4 ОАО КПД» осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (пункт 3.1.8 договора). 

Утвержденная постановлением Администрации города №824 от 02.06.2016г. корректировка проекта межевания территории ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, отражает нуждаемость территории в наличии следующего объекта социальной инфраструктуры: - детский сад на 95 мест по ул.Нежинской.

Указанное условие соответствует требованиям статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), согласно которой в договоре о развитии застроенной территории в качестве существенных условий могут быть предусмотрены обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, указание видов объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, и подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность.

Также, частью 1 статьи 46.2 ГрК РФ определено, что по договору о развитии застроенной территории одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств.

Согласно пункту 1.1 договора общество «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД» приняло на себя обязательство своими силами и за свой счет (и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц) выполнить предусмотренные настоящим договором обязательства, а Администрация обязалась создать условия для выполнения обществом своих обязательств.

Обязательство осуществить постройку и (или) реконструкцию объектов социальной сферы и безвозмездно передать их в собственность муниципального образования предусмотрено пунктом 3.1.8 договора.

Таким образом, условия договора не устанавливали обязанность Администрации софинансировать строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, строительство и реконструкция которых предусмотрено документацией, разработанной обществом "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД".

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

Частью 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Общество «УКЗ №4 ОАО КПД» до настоящего времени обязательства по исполнению п.3.1.8. вышеуказанного договора не выполнило, что подтверждается ортофотопланом.

В силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. 

В соответствии с нормой статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа состязательности, а лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Оценив в соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, суд полагает требования истца подлежащими удовлетворению.

Довод ответчика о том, что при заключении договора № 29-РТ от 24.05.2012г. сторонами не было достигнуто соглашение о строительстве детского сада, его параметрах, сроках его строительства, судом отклоняется.

 Конкретные показатели (то есть школа это, детский сад или школа-детский сад, их вместимость; количество, назначение помещений, их площадь и т.д.) определяются не исходя из мнения застройщика, а в строгом соответствии с региональными нормативами градостроительного регулирования, а также Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а также Сводом правил СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 17 августа 2016 № 572/пр).

Довод ответчик, что поскольку срок действия указанного договора истек 23.05.2017г., следовательно, в соответствии с положениями ст.407 ГК РФ обязательства сторон прекратились, судом отклоняется.

В силу пункта 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств.

Следовательно, толкование положений статьи 425 ГК РФ позволяет сделать следующий вывод: срок действия договора может быть определен в нем самом. Само по себе окончание срока действия договора не прекращает обязательство, если какая-либо из сторон не успела к этому моменту исполнить свои обязанности. Однако в случаях, предусмотренных законом или договором, завершение этого срока прекращает договор. При отсутствии в договоре указания на срок его действия, он считается действующим до установленного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств. Речь идет только о действии соглашения сторон, рассчитанного на надлежащее исполнение. И когда срок такого исполнения наступает, действие соглашения исчерпывается.

Поскольку процессуальным законодательством в основу распределения судебных расходов между сторонами положен принцип возмещения их истцу за счет ответчика в случае удовлетворения исковых требований, расходы по государственной пошлине, в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан удовлетворить.

Обязать  Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД" исполнить пункт 3.1.8 договора №29-РТ от 24.05.2012г. о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Ульяновых, ФИО2, Маяковского, Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан – осуществить строительство детского сада на 95 мест по ул.Нежинской в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ориентировочной стоимостью 107 511 120 руб. и в течение одного месяца со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать по акту-приема передачи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству истца. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК - УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ № 4 КПД" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья                                   Д.П.Кузнецов