АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск                                                                                               

«24» октября 2022 года       Дело  № А19-15993/2022

Резолютивная часть решения вынесена 17.10.2022. Решение в полном объеме изготовлено 24.10.2022.

Арбитражный суд  Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БСЭС-ИРКУТСК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 664001, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 22)

к  ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 257)  

о взыскании 1 261 386 руб. 60 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель Курной Д.Н. по доверенности от 10.01.2022, паспорт, диплом;

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности № юр-167 от 09.08.2022.

установил:

ООО «БСЭС-ИРКУТСК» 28.07.2022 обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском ОАО «ИЭСК» с требованиями о взыскании задолженности  по договору подряда № 65-ВЭС-2020 от 13.07.2020 в размере 50 000 руб. 

При рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял размер исковых требований и в окончательной редакции просил взыскать 1 261 383 руб. 60 коп. - задолженность  по договору подряда № 65-ВЭС-2020 от 13.07.2020.

Уточнения иска судом приняты, иск подлежит рассмотрению в уточненной редакции.

Истец в судебном заседании иск поддержал в уточненной редакции в размере 1 261 383 руб. 60 коп.

Ответчик в судебном заседании иск не признал.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, между Открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» (заказчиком по договору) и Обществом с ограниченной ответственностью «БСЭС-Иркутск» (подрядчиком по договору) заключен договор строительного подряда №65-ВЭС-2020 от 13.07.2020, по условиям которого подрядчик обязуется на объекте: строительство ВОЛС от оп. № 45а/198 ВЛ-110 Усть-Орда - Никольск до ПС Никольск (протяженность - 11 км) и от оп. № 296 ВЛ-110 Усть-Орда - Тихоновка до ПС Тихоновка (протяженность - 2 км) с организацией каналов связи ПС 110/35/1 ОкВ Усть-Орда - ПС 110/ЮкВ Тихоновка - ПС 110/ЮкВ Никольск выполнить:

1.1.1.Проектные работы в соответствии с заданием на разработку рабочей документации (Приложение №10), по:

-Строительству ВОЛС от оп. № 45а/198 ВЛ-110 Усть-Орда - Никольск до ПС Никольск (протяженность - 11 км) и от оп. № 296 ВЛ-110 Усть-Орда - Тихоновка до ПС Тихоновка (протяженность - 2 км) с организацией каналов связи ПС 110/35/1 ОкВ Усть-Орда - ПС 110/1 ОкВ Тихоновка - ПС 110/1 ОкВ Никольск.

1.1.2.Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы в соответствии с рабочей документацией, разработанной Подрядчиком по:

-Строительству ВОЛС от оп. № 45а/198 ВЛ-110 Усть-Орда - Никольск до ПС Никольск (протяженность - 11 км) и от оп. № 296 ВЛ-110 Усть-Орда - Тихоновка до ПС Тихоновка (протяженность - 2 км) с организацией каналов связи ПС 110/35/1 ОкВ Усть-Орда - ПС 110/1 ОкВ Тихоновка - ПС 110/1 ОкВ Никольск, (далее по тексту - «работы») и сдать результаты выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их (п. 1.1 договора).

Пунктом 2.1 договора предусмотрена стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ и составляет 2 634 000 рублей, без НДС, кроме того НДС 20% 526 800,00 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, всего: 3 160 800,00 (Три миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с НДС, является твёрдой на заданный объем работ. Расчет договорной цены приведен в (Приложении №2).

В силу пункта 5.1 проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в срок с момента подписания обеими сторонами настоящего договора по «20» декабря 2021 года. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ указываются в Графике выполнения работ (Приложение №7).

Во исполнение принятых на себя обязательств, истец выполнил работы 14.01.2020, что подтверждается актом КС-2 № 3 от 31.05.2022 о приемке выполненных работ (л.д. 36-47), справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.05.2022 на сумму 1 261 383 руб. 60 коп., ведомостью выполненных объемов работ.

Ответчик оплату не произвел.

В целях досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия № 210 от 27.06.2022 с требованием произвести оплату по принятым работам по акту КС-2 № 3 от 31.05.2022 в размере 1 261 383 руб. 60 коп. 

Неисполнение требований, изложенных в претензии, явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. 

Проанализировав условия представленного договора №65-ВЭС-2020 от 13.07.2020, суд считает, что по своей правовой природе он является договором подряда, правовое регулирование которого осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы, по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ.

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного договора строительного подряда являются:

- условия о содержании и объеме работ (предмете);

- срок выполнения работ.

Оценив условия договора №65-ВЭС-2020 от 13.07.2020, суд пришел к выводу о согласовании сторонами всех его существенных условий:

- предмет договора (объем и содержание подрядных работ) определены в пункте 1.1 договора, рабочей документации (приложение № 10);

- сроки выполнения работ согласованы в пункте 5.1 договора, в Графике выполнения работ (Приложение №7).

С учетом проведенного анализа суд приходит к выводу, что вышеуказанный контракт является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства сторон.

Факт выполнения истцом работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 3 от 31.05.2022, подписанным и скрепленным печатями сторон без каких-либо замечаний относительно объема, качества и сроков выполненных работ.

Ответчик возражал против заявленных требований, однако документально требование не опроверг, качество и объем выполненных работ под сомнение не поставил.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что у ответчика возникла обязанность по оплате оказанных услуг.

В силу положений пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 8.1 договора оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В течение пяти дней после подписания актов формы № КС-2, № КС-3 Подрядчик предоставляет счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. По согласованию сторон возможна оплата ценными бумагами (векселями ПАО «Иркутскэнерго»), взаимозачетом, либо другим, не запрещенным законом способом.

Акт подписан сторонами 31.05.2022.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Ответчик доказательства оплаты долга в размере 1 261 383 руб. 60 коп. не представил. 

Учитывая изложенное, положение статей  309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, условия договора №65-ВЭС-2020 от 13.07.2020, суд приходит к выводу, что иск о взыскании основного долга в размере 1 261 383 руб. 60 коп. заявлен обоснованно и подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

При принятии решения арбитражный суд в силу положений части 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решает вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо об обеспечении исполнения решения; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения; определяет дальнейшую судьбу вещественных доказательств, распределяет судебные расходы, а также решает иные вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Исковые требования истца судом признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Истец при обращении в суд с иском уплатил государственную пошлину в размере 2 000 руб., о чем свидетельствует платежное поручение № 1252 от 19.07.2022.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за рассмотрение дела, с учетом уточнений, составляет              25 613 руб. 84 коп.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истца следует взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., а в доход федерального бюджета 23 613 руб. 84 коп.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 257)  в пользу ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БСЭС-ИРКУТСК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: 664001, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 22) 1 261 383 руб. 60 коп. - задолженность  по договору подряда № 65-ВЭС-2020 от 13.07.2020, 2 000 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664033, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 257)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 613 руб. 84 коп.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области. 

Судья                                                                                                          Е.Ю. Колосова