АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-73/2022

г. Ярославль

19 мая 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена  19 апреля 2023 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в лице филиала Северная дирекция по капитальному строительству (ИНН  

<

***>, ОГРН   

<

***>)

к  обществу с ограниченной ответственностью ПКФ "Профтехнологии" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 

о   взыскании   158145.38  руб.,

при участии

от истца – ФИО2 по  доверенности от 18.08.2020 № ДКСС-840/Д, диплому,

от ответчика – не явились

установил:

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" в лице филиала Северная дирекция по капитальному строительству обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью ПКФ "Профтехнологии" о   взыскании с учетом уточнения 158 145 руб. 38 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 02.06.2020 №858/ОАЭ-ДКСС/20/1/1.

В судебном заседании представитель истца пояснила развернуто расчет, позицию по делу, требования поддержала.

Ответчик направил письменный отзыв, против иска возражает по основаниям отзыва, в отзыве и в судебных заседаниях представитель ответчика возражал против начисления неустойки, полагая, что договором не определена сторонами ответственность за промежуточные сроки, цель установления которых заключалась в распределении равномерного финансирования по объектам, заявил о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответчик также представил контррасчет, заявил о применении ст. 10, 404 ГК РФ.

Истец против доводов отзыва и дополнения к нему возражает, представил письменные пояснения, полагает, что отсутствуют основания для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

02.06.2020 между ОАО "РЖД" (Заказчик) и ООО ПКФ "Профтехнологии" (Подрядчик) в соответствии протоколом проведения электронного аукциона от 21.04.2020 г. №858/ОАЭ-ДКСС/20/2 заключен договор №858/ОАЭ-ДКСС/20/1/1 на выполнение строительно-монтажных работ (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 23.07.2020 и № 2 от 26.02.2021), по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по объектам: «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Вохтога» (Бизнес код объекта: 001.2018.10002971),  «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Приволжье» (Бизнес код объекта: 001.2018.10002970), «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Шексна» (Бизнес код объекта: 001.2018.10002982), «Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Бурачиха» (Бизнес код объекта: 001.2018.10002988), Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Кадниковский (Бизнес код объекта: 001.2018.10002986), Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Шелекса (Бизнес код объекта: 001.2018.10002987), (далее – Объект) на полигоне Северной железной дороги в интересах Северной дирекции пассажирских обустройств (далее – эксплуатирующая/ие организация/и), в составе инвестиционного проекта «Реконструкции вокзального комплекса пригородных пассажирских перевозок» (п.1.1 договора).

Согласно п. 2.1 договора Общая цена настоящего Договора с учетом суммы всех налогов, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, погрузочноразгрузочными работами и хранением, стоимости строительно-монтажных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, инфляции, коэффициента снижения, определенного нормативными документами ОАО «РЖД» на момент заключения Договора, расходов на непредвиденные работы и затраты, а также все иных затрат и расходов Подрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ, составляет - 6 921 071 рублей 10 копеек (шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьдесят один рубль 10 копеек) руб., кроме того НДС - 1 384 214 рублей 22 копейки (один миллион триста восемьдесят четыре тысячи двести четырнадцать рублей 22 копейки), всего с учетом НДС - 8 305 285 рублей 32 копейки (восемь миллионов триста пять тысяч двести восемьдесят пять рублей 32 копейки) и отражена в Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), в том числе: на 2020 год: Общая цена Комплекса работ составляет - 6 921 071 рублей 10 копеек (Шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьдесят один рубль 10 копеек), кроме того НДС 20% - 1 384 214 рублей 22 копейки (Один миллион триста восемьдесят четыре тысячи двести четырнадцать рублей 22 копейки), всего с учетом НДС 20% - 8 305 285 рублей 32 копейки (Восемь миллионов триста пять тысяч двести восемьдесят пять рублей 32 копейки), в том числе: 

- цена строительно-монтажных Работ составляет – 6 818 778 рублей 90 копеек (Шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 90 копеек), кроме того НДС 20% - 1 363 755 рублей 78 копеек (Один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять рублей 78 копеек), всего с учетом НДС 20% - 8 182 534 рублей 68 копеек (Восемь миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 68 копеек); 

- цена непредвиденных затрат составляет – 102 292 рублей 20 копеек (Сто две тысячи двести девяносто два рубля 20 копеек), кроме того НДС 20% - 20 458 рублей 44 копейки (Двадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 44 копейки), всего с учетом НДС 20% - 122 750 рублей 64 копейки (Сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят рублей 64 копейки).

В п. 10.1 договора стороны установили, что для обеспечения контроля за фактически выполненными объемами работ и финансированием строительства Объекта Подрядчик ежемесячно предъявляет Заказчику выполненный объем Работ.

Подрядчик в четырех экземплярах оформляет: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - Акт КС-2), справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее - Справка КС-3), накопительную ведомость, а также счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц, с указанием кода объекта в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, и передает указанные документы по реестру Заказчику не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. Приемка Работ за отчетный месяц производится Заказчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, Подрядчик оформляет в четырех экземплярах Акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 (далее - Акт ФСУ-3) и передает Заказчику по реестру не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. По каждому источнику финансирования оформляются отдельные Акты КС-2 и Справка КС-3.

Акты КС-2 не являются актами предварительной приемки Работ, не влекут переход к Заказчику права собственности на результаты Работ и риска случайной гибели результатов Работ, а подтверждают выполнение промежуточных работ за отчетный месяц для проведения расчетов с Подрядчиком.

В приложении № 2 к договору стороны установили Сводный календарный график производства Комплекса работ:

№ п/п

Наименование объекта

Дата начала

производства

работ

Дата окончания

производства

работ

Место производства работ

1

Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Вохтога

Бизнес код объекта: 001.2018.10002971)

С даты подписания

настоящего договора

30.11.2020г.

Северная железная

дорога, Вологодская

область, ст. Вохтога

2

Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Приволжье

(Бизнес код объекта: 001.2018.10002970)

С даты подписания настоящего договора

30.11.2020г.

Северная железная дорога, Ярославская

область,

ст. Приволжье

3

Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Шексна

(Бизнес код объекта: 001.2018.10002982

С даты подписания настоящего договора

30.11.2020г.

Северная железная дорога, Вологодская

область,

ст. Шексна

4

Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Бурачиха (Бизнес код объекта: 001.2018.10002988)

С даты подписания настоящего договора 

30.11.2020г.

Северная железная дорога, Архангельская

область, ст. Бурачиха

ст. Бурачиха

5

Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Кадниковский

(Бизнес код объекта: 001.2018.10002986)

С даты подписания настоящего договора

30.11.2020г.

Северная железная дорога, Вологодская область,

ст. Кадниковский

6

Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Шелекса

(Бизнес код объекта: 001.2018.10002987)

С даты подписания настоящего договора

30.11.2020г.

Северная железная дорога, Архангельская

область,

ст. Шелекса

В Приложениях №№ 2.1-2.6 стороны определили Календарные графики производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Вохтога»

№ п/п

 

Наименование объекта и видов работ

Цена работ в базисных ценах, тыс. руб.

Цена работ в текущих ценах,

тыс. руб.

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Архитектурные решения ст. Вохтога

78 964,00

457 577,00

-

-

91 515,40

91 515,40

91 515,40

91 515,40

91 515,40

2

Водоснабжение и

канализация

ст.Вохтога

51 935,00

300 955,00

-

-

60 191,00

60 191,00

60 191,00

60 191,00

60 191,00

3

Отопление и

вентиляция

ст.Вохтога

9 741,00

56 448,00

-

-

11 289,60

11 289,60

11 289,60

11 289,60

11 289,60

4

Электромонтажные работы ст.Вохтога

13 834,00

80 165,00

-

-

16 033,00

16 033,00

16 033,00

16 033,00

16 033,00

5

Технологические решения ст.Вохтога

10 036,00

58 158,00

-

-

11 631,60

11 631,60

11 631,60

11 631,60

11 631,60

6

Наружная канализация

20555

111 884,00

-

-

22 376,80

22 376,80

22 376,80

22 376,80

22 376,80

7

Благоустройство

9400

59 150,00

-

-

-

-

-

-

59 150,00

8

Временные здания и сооружения

4892,74

28 288,50

-

-

28 288,50

-

-

-

-

9

Непредвиденные

17 288,10

-

-

3 457,62

3 457,62

3 457,62

3 457,62

3 457,62

 

Итого:

199357,74

1169913,60

 

244 783,52

216 495,02

216 495,02

216 495,02

275 645,02

Календарный график производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Приволжье»

№ п/п

Наименование объекта и видов работ

 

Цена работ в

базисных ценах,

тыс. руб.

Цена работ в текущих

ценах, тыс. руб.

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Отопление и вентиляция ст. Приволжье

8 662,00

50 000,00

-

-

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2

Электромонтажные работы ст. Приволжье

21 357,00

123 279,00

-

-

24 655,80

24 655,80

24 655,80

24 655,80

24 655,80

3

Архитектурные решения ст. Приволжье

191 484,00

1 105 288,00

-

-

221 057,60

221 057,60

221 057,60

221 057,60

221 057,60

4

Водоснабжение и канализация ст. Приволжье

47 248,00

272 724,00

-

-

54 544,80

54 544,80

54 544,80

54 544,80

54 544,80

5

Технологическ ие решения ст. Приволжье

10 972,00

63 330,00

-

-

12 666,60

12 666,60

12 666,60

12 666,60

12 666,60

6

Временные здания и сооружения

7037,83

40 624,80

-

-

40 624,80

-

-

-

-

7

Непредвиденные

24 829,20

-

-

4 965,84

4 965,84

4 965,84

4 965,84

4 965,84

 

Итого:

286760,83

1680075,00

 

368 514,84

327 890,04

327 890,04

327 890,04

327 890,04

Календарный график производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзал ст. Шексна»

№ п/п

 

Наименование объекта и видов работ

Цена работ в

базисных ценах,

тыс. руб.

Цена работ в текущих

ценах, тыс. руб.

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Электромонтажные работы

10 999,00

63 708,00

-

-

12 741,60

12 741,60

12 741,60

12 741,60

12 741,60

2

Отопление и вентиляция

4 142,00

23 993,00

-

-

4 798,60

4 798,60

4 798,60

4 798,60

4 798,60

3

Водоснабжение и канализация ст.Шексна

42 673,00

247 159,00

-

-

49 431,80

49 431,80

49 431,80

49 431,80

49 431,80

4

Технологические решения

8 670,00

50 215,00

-

-

10 043,00

10 043,00

10 043,00

10 043,00

10 043,00

5

Архитектурные решения ст.Шексна

88 216,00

510 932,00

-

-

102 186,40

102 186,40

102 186,40

102 186,40

102 186,40

6

Наружная канализация

14 368,00

90 745,00

-

-

18 149,00

18 149,00

18 149,00

18 149,00

18 149,00

7

Благоустройство

1 782,00

11 574,00

-

-

-

-

-

-

11 574,00

8

Временные здания и сооружения

4 298,59

25 117,55

-

-

25 117,55

-

-

-

-

9

Непредвиденные

15 355,80

-

-

3 071,16

3 071,16

3 071,16

3 071,16

3 071,16

 

Итого:

175 148,59

1 023 443,55

 

222 467,95

199 665,20

197 350,40

197 350,40

208 924,40

Календарный график производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Бурачиха»

№ п/п

 

Наименование объекта и видов работ

Цена работ в

базисных ценах,

тыс. руб.

Цена работ в

текущих ценах,

тыс. руб.

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Отопление и вентиляция

5 400,00

33 136,00

-

-

6 627,20

6 627,20

6 627,20

6 627,20

6 627,20

2

Архитектурные решения

58 528,00

359 132,00

-

-

71 826,40

71 826,40

71 826,40

71 826,40

71 826,40

3

Электромонтажные работы

11 436,00

70 169,00

-

-

14 033,80

14 033,80

14 033,80

14 033,80

14 033,80

4

Технологические решения

8 233,00

50 518,00

-

-

10 103,60

10 103,60

10 103,60

10 103,60

10 103,60

5

Водоснабжение и канализация

48 604,00

298 241,00

-

-

59 648,20

59 648,20

59 648,20

59 648,20

59 648,20

6

Наружная канализация

12 882,00

68 792,00

-

-

13 758,40

13 758,40

13 758,40

13 758,40

13 758,40

7

Временные здания и сооружения

3650,29

22 139,60

-

-

22 139,60

-

-

-

-

8

Непредвиденные

13 526,10

-

-

2 705,22

2 705,22

2 705,22

2 705,22

2 705,22

 

Итого:

148733,29

915653,70

-

-

200 842,42

178 702,82

178 702,82

178 702,82

178 702,82

Календарный график производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Кадниковский»

№

п/п

 

Наименование объекта и видов работ

 

Цена работ в

базисных ценах,

тыс. руб.

 

Цена работ в

текущих ценах,

тыс. руб.

 

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Водоснабжение и

канализация

ст.Кадниковский

52 541,00

304 384,00

-

-

60 876,80

60 876,80

60 876,80

60 876,80

60 876,80

2

Технологические решения

8 709,00

50 452,00

-

-

10 090,40

10 090,40

10 090,40

10 090,40

10 090,40

3

Отопление и вентиляция

10 063,00

58 296,00

-

-

11 659,20

11 659,20

11 659,20

11 659,20

11 659,20

4

Электромонтажные работы

14 895,00

86 293,00

-

-

17 258,60

17 258,60

17 258,60

17 258,60

17 258,60

5

Архитектурные

решения

ст.Кадниковский

94 771,00

549 027,00

-

-

109 805,40

109 805,40

109 805,40

109 805,40

109 805,40

6

Наружная канализация

10567

57 095,00

-

-

11 419,00

11 419,00

11 419,00

11 419,00

11 419,00

7

Временные здания и сооружения

4819,3

27 815,35

-

-

27 815,35

-

-

-

-

8

Непредвиденные

17 005,95

-

-

3 401,19

3 401,19

3 401,19

3 401,19

3 401,19

 

Итого:

196365,30

1150368,30

 

252 325,94

224 510,59

224 510,59

224 510,59

224 510,59

Календарный график производства работ по объекту: «Модернизация санитарной комнаты вокзала ст. Шелекса»

№ п/п

 

Наименование объекта и видов работ

 

Цена работ в базисных ценах, тыс. руб.

Цена работ в текущих ценах,

тыс. руб.

Сроки выполнения работ в 2020 году (тыс. руб. без НДС)

 

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

Электромонтажные работы

12 184,00

74 743,00

-

-

14 948,60

14 948,60

14 948,60

14 948,60

14 948,60

2

Водоснабжение и

канализация

ст.Шелекса

50 843,00

311 926,00

-

-

62 385,20

62 385,20

62 385,20

62 385,20

62 385,20

3

Технологические решения

9 694,00

59 474,00

-

-

11 894,80

11 894,80

11 894,80

11 894,80

11 894,80

4

Отопление и вентиляция

4 832,00

29 641,00

-

-

5 928,20

5 928,20

5 928,20

5 928,20

5 928,20

5

Архитектурные решения ст.Шелекса

60 200,00

369 323,00

-

-

73 864,60

73 864,60

73 864,60

73 864,60

73 864,60

6

Наружная канализация

11 780,00

64 935,00

-

-

12 987,00

12 987,00

12 987,00

12 987,00

12 987,00

7

Благоустройство

3 488,00

18 568,00

-

-

3 713,60

3 713,60

3 713,60

3 713,60

3 713,60

8

Временные здания и сооружения

3 850,01

23 364,10

-

-

23 364,10

-

-

-

-

9

Непредвиденные

14 287,05

-

-

2 857,41

2 857,41

2 857,41

2 857,41

2 857,41

 

Итого:

156 871,01

966 261,15

 

211 943,51

188 579,41

188 579,41

188 579,41

188 579,41

Согласно пункту 15.2.1 договора за нарушение сроков выполнения работ, установленных календарным графиком, подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1 % от цены невыполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 15.2.2 договора за окончание строительства объекта после установленного срока подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1 % от цены комплекса работ по настоящему договору за каждый день просрочки до фактического завершения комплекса работ; при задержке сроков окончания выполнения работ на объекте свыше 30 дней - штраф в размере 0,2% цены настоящего договора за каждый последующий календарный день до фактического исполнения обязательства.

За нарушение промежуточных сроков выполнения работ по ст. Кадниковский предъявлена претензия от 09.10.2020 № 1933 на сумму 33 286 руб.

Поступил ответ от 14.10.2020 № 155/10, претензионные требования не признаны. Причиной отставания от календарного графика указано на отсутствие на рынке требуемых материалов и длительный срок изготовления заказных позиций, наличие ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

За нарушение промежуточных сроков выполнения работ по ст. Шексна предъявлена претензия от 09.10.2020 № 1944 на сумму 14 276 руб.

Поступил ответ от 14.10.2020 № 154/10, претензионные требования не признаны. Причиной отставания от календарного графика указано на внесение изменений в проектно-сметную документацию (далее - ПСД) и на распространение новой коронавирусной инфекции.

За нарушение срока окончания работ выставлена претензия от 18.02.2021 № 405 на сумму 111 114 руб. Поступил ответ от 11.10.2021 № 144, претензионные требования не признаны со ссылкой на корректировку ПСД и COVID- 19.

Истец ссылается, что подрядчик нарушил как промежуточные сроки работ (по ст. Кадниковский и ст. Шексна), так и сроки окончания строительства (по всем станциям).

Расчет исковых требований:

По промежуточным срокам по ст. Кадниковский

июль

август

сентябрь

Итого

(руб.)

Цена   работ   по календарному плану (руб.)

302791,13

269412,71

269412,71

 

Цена

предъявленных работ (куб.)

0

0

0

Цена

непредъявленных работ (руб.)

302791,13

269412,71+302791,13= 572203,84

269412,71+572203,84= 841616,55

 

Количество   дней просрочки

31

30

8

Расчет пени

3.02791,13*0Л°/о*31=9386,53

572203,84*0,1%*30=

17166,12

841616,55*0,1%*8=

6732,93

33285,58

По промежуточным срокам по ст. Шексна

Месяц

июль

август

сентябрь

Итого

(руб.)

Цена   работ   по календарному плану (руб.)

266 961,54

239 598,24

236 820, 48

 

Цена

предъявленных работ (куб.)

174 619,20

0

366 964, 8

 

Цена

непредъявленных работ (руб.)

266 961,54-

174 619, 20=92 342,34

239 598, 24+ 92 342, 34 = 331 940, 58

331 940, 58+236 820,48-366 964,8 =201 796,26

 

Количество дней просрочки

31

30

8

Расчет пени

92 342, 34*0,1%*31 = 2 862, 6

331 940, 58*0,1%*30= 9958,2

201 796,26*0,1%*8= 1614,4

14 435,2

Расчет неустойки за нарушение сроков окончания работ

Стоимость работ по ст. Вохтога согласно актам по форме КС-2 составила 1 382 749 руб., из них за пределами срока выполнены работы на 33 523 руб. - акты по форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: 33 523*0,1%*30=1006 руб.

Стоимость работ по ст. Приволжье согласно актам по форме КС-2 составила 1914 679 руб., из них за пределами срока выполнены работы на 1 530 596 руб. - акты по форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: 1 530 596 *0,1%*30=45918 руб.

Стоимость работ по ст. Шексна согласно актам по форме КС-2 составила 1 216 939 руб., из них за пределами срока выполнены работы на 141 732 руб. - акты по форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: 141 732*0,1%*30=4252 руб.

Стоимость работ по ст. Бурачиха согласно актам по форме КС-2 составила 1 061 250 руб., из них за пределами срока выполнены работы на 301 398 руб. - акты по форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: (301 398-8624,4) * 0,1 % *30 = 8 783, 21 руб.

Стоимость работ по ст. Кадниковский согласно актам по форме КС-2 составила 1 380 437 руб., все эти работы выполнены пределами срока - акты но форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: 1 380 437 *0,1%*30=41413 руб.

Стоимость работ по ст. Шелекса согласно актам по форме КС-2 составила 1 133 311 руб., из них за пределами срока выполнены работы на 316 084 руб. - акты по форме КС-2 за декабрь на указанную сумму подписаны 31.12.2020, просрочка составила 30 дней.

Расчет пени: (316 084 – 9038,4)  *0,1%*30 = 9 211, 36 руб.

Итого: 110 583 руб. 57 коп.

Истцом в иске указано на уменьшение суммы санкций на сумму 158, 97 руб. на сумму законной неустойки по ст. 395 ГК РФ.

Уменьшение пени на сумму законной неустойки (по ст. 395 ГК РФ) за просрочку в оплате работ

Дата

поступления первичных документов за июль

Дата оплаты

Количество дней

просрочки

Уплаченная сумма

Ключевая ставка

Расчет неустойки, руб.

07.08.2020

31.08.2020

8

171 126,82

4,25

171 126, 82*4,25%*8/366=158,97

Всего по нарушению промежуточных сроков и итогового срока – 110 583, 57 руб. + 27 720, 78 руб. =158 304 руб. 35 коп. – 158,97= 158 145, 38 руб.

Неисполнение претензионных требований в добровольном порядке послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные документы в порядке ст. 71 АПК РФ, суд полагает, что требования истца подлежат удовлетворению  по следующим основаниям.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно положениям статьи 720 ГК РФ доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (п. 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики рассмотрения споров по договору строительного подряда").

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В рассматриваемом случае суд приходит к выводу об исполнении работ с нарушением сроков окончания работ, обоснованности требования по расчету истца (110 583 руб. 57 коп. – 158,97) в размере 110 424 руб. 60 коп. 

Данную неустойку суд находит соразмерной последствиям нарушенного ответчиком обязательства и не усматривает оснований для ее снижения по правилам статьи 333 ГК РФ, т.к. приведенные ответчиком доводы не указывают на явную её несоразмерность возможным последствиям нарушения обязательства.

Условие, касающееся юридической ответственности, его содержание должно определенно указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования. В противном случае спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том числе потому, что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной сфере и подготавливает проект договора (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах").

Таким образом, в договоре (контракте) должно содержаться условие, прямо предусматривающее изменение порядка определения момента, с которого исполнитель (подрядчик) считается просрочившим, и применение к нему мер ответственности за просрочку выполнения работ.

Пункт 10.1 договора предусматривает, что для обеспечения контроля за фактически выполненными объемами Работ и финансированием строительства Объекта Подрядчик ежемесячно предъявляет Заказчику выполненный объем Работ. Подрядчик в четырех экземплярах оформляет: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, накопительную ведомость, а также счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц. При этом Акты КС-2 не являются актами предварительной приемки Работ, не влекут переход к Заказчику права собственности на результаты Работ и риска случайной гибели результатов Работ, а подтверждают выполнение промежуточных работ за отчетный месяц для проведения расчетов с Подрядчиком.

Исходя из буквального толкования условий договора в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 431 ГК РФ, в том числе раздела 10 договора, Приложений №№ 2.1-2.6, суд приходит к выводу, что календарные графики производства работ на объектах в приложениях №№ 2.1- 2.6 направлены на подтверждение промежуточных работ для проведения расчетов с подрядчиком, а не на применение мер ответственности за просрочку выполнения работ. Суд также отмечает отражение в приложениях №№ 2.1- 2.6 равномерного ежемесячного стоимостного размера по видам выполнения работ.

Иные доводы ответчика судом отклоняются как необоснованные.

Расходы по уплате государственной пошлины судом распределены в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПКФ "Профтехнологии" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в лице филиала Северная дирекция по капитальному строительству (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 110 424 руб. 60 коп. неустойки, 4 010 руб. 74 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

В остальной части исковое заявление оставить без удовлетворения.

Возвратить открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" в лице филиала Северная дирекция по капитальному строительству (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета 16 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.11.2021 № 104705. Исполнение судебного акта в части возврата государственной пошлины производится по ходатайству плательщика государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Л.А. Шадринова