Арбитражный суд Республики Адыгея

385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Краснооктябрьская, 15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А01-5821/2024

г. Майкоп

24 марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 20.03.2025 года.

Полный текст решения изготовлен 24.03.2025 года.

  Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Мусифулиной Н.Г.,                        при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мачуковым М.О., рассмотрев материалы дела № А01-5821/2024 по исковому заявлению министерства здравоохранения Республики Адыгея (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Еврокомфорт" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, 

<

...>, этаж подвал помещ. 1 ком. 5) о взыскании задолженности в размере 33 371 руб. 78 коп. и расторжении контракта                       №  03/03-2020 от 18.03.2020 на выполнение строительно-монтажных работ,                               в отсутствие лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом,

установил:

в Арбитражный суд Республики Адыгея обратилось Министерство здравоохранения Республики Адыгея (далее - Министерство) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Еврокомфорт» (далее -                              ООО «Еврокомфорт») о взыскании задолженности в размере 33 371 руб. 78 коп. и расторжении контракта №  03/03-2020 от 18.03.2020 на выполнение строительно-монтажных работ.

Определением суда от 25.12.2024 иск был принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 19.02.2025.                                                                                             Определением суда от 19.02.2025 судебное заседание назначено на 20.03.2025. 

В судебное заседание лица, уведомленные надлежащим образом не явились.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. 

Суд рассмотрел дело в отсутствие лиц, уведомленных надлежащим образом.

Изучив представленные материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОКОМФОРТ» был заключен контракт № 03/03-2020 от 18.03.2020 на выполнение строительно- монтажных работ на сумму 3 724 759,20 руб.                  Дополнительным соглашением от 17.06.2020 №б/н (далее дополнительное соглашение) к контракту № 03/03-2020 от 18.03.2020 о перемене заказчика (передача прав и обязанностей по договору другому лицу) права и обязанности Заказчика переданы Министерству здравоохранения Республики Адыгея.                                                                      Согласно условиям контракта № 03/03-2020 от 18.03.2020 на выполнение строительно-монтажных работ (п.5.1.) Подрядчик должен начать, производить и завершить в соответствии с согласованным графиком выполнения строительно-монтажных работ и графиком производства работ.                                                                 Распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11.09.2020г №293 срок исполнения обязательств был продлен до 18 октября 2020 года.                                                  В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 01.10.2020г увеличена стоимость контракта, и составила  4 072 225,12 руб.                                                Пунктами 3.1.11., 3.1.3. Контракта установлена обязанность подрядчика выполнять работы в установленные с заказчиком сроки.                                                                                Местом исполнения контракта определена Республика Адыгея, Теучежский район, ауле Тауйхабль, ул. Пролетарская, 24 (пункт 1.7.).                                                              В связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту истец направил в  ООО «ЕВРОКОМФОРТ» досудебную претензию о необходимости расторжения контракта в соответствии с законодательством и оплаты дебиторской задолженности    Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением.                                                                             Удовлетворяя исковые требования, суд руководствуется следующим.              Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменений его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (статья 314 ГК РФ).               В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.                                                                                                                                   Статья 781 ГК РФ обязывает заказчика оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. По смыслу указанной нормы исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении указанных в договоре действий (деятельности) и оплате подлежат фактически оказанные услуги.                                                                                                                           Пунктом 1 статьи 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.                                                                                                                         Пунктом 1 статьи 314 ГК РФ установлено, что обязательство, предусматривающее период времени исполнения, должно исполняться в любой момент в пределах такого периода.                                                                                                                                     Согласно Актам о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (КС-3) представленных Министерству здравоохранения Республики Адыгея и принятых  Министерством здравоохранения Республики Адыгея общий выполненный объем работ по строительству объекта капитального строительства принятый Заказчиком составил 3 766 473,92 руб., с учетом авансирования.                                                При этом, по условиям контракта первый платеж был авансирован в размере 20 процентов от первоначальной стоимости контракта (в сумме 744 951,84 руб.), который был своевременно перечислен платежным поручением №730160 от 19.06.2020.Оплата последующих 6 платежей (кроме авансирования) осуществлялись Министерством на основании счетов фактур выставленных Министерству здравоохранения Республики Адыгея на общую сумму 3 054 893,86 руб., при этом                        4 платежей произведенных на основании счетов фактур выставленных                                       ООО «Еврокомфорт» на общую сумму 2 979 807,35 руб. были скорректированы на сумму авансирования, т.е. уменьшались на 20 процентов от стоимости принятого объема работ по формам КС – 2 и КС -3 принятых по этапам строительства и выполненных строительно-монтажных работ, и 2 платежа на общую сумму 75 086,51 руб., выставлены и оплачены в полном объеме.                                                                                                      Таким образом, Министерством в 2020 году произведена оплата подрядчику по данному контракту в сумме 3 799 845,70 руб. на основании счетов фактур предоставленных Подрядчиком на оплату в Министерство здравоохранения Республики Адыгея.                                                                                                                                             В связи с чем, по состоянию на 01.01.2021 по спорному контракту образовалась дебиторская задолженность в сумме 33 371 рубль 70 копеек, признанная подрядчиком, что подтверждено актом сверки взаимных расчетов между Министерством и                                 ООО «Еврокомфорт».                                                                                                                 Согласно статьям 8, 9 АПК РФ участники спора пользуются равными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.                                        В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание для своих требований и возражений.                                                                                                                   В нарушение приведенных норм, ответчик не представил суду доказательств, опровергающих доводы истца. Тем самым ответчик принял на себя соответствующий процессуальный риск.                                                                                                                      В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.                                               Таким образом, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, суд считает, что требование истца о взыскании задолженности с ответчика в размере 33 371 рубль 70 копеек подлежит удовлетворению в полном объеме.        Также истцом заявлено требование о расторжении контракта № 03/03-2020 от 18.03.2020 на выполнение строительно-монтажных работ.                                                     Согласно положениям статьи 1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора                                                                                                      Как следует из части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.                                                                                                                     В случае нарушения либо оспаривания права лица, возникшего из указанных оснований, это лицо в силу статьи 11 ГК РФ вправе обратиться в суд за защитой права с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 ГК РФ либо иными нормами Закона.                                                                                                                                 Согласно статье 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.                                                                                                                                            Отношения, связанные с размещением заказов на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, регулируются Законом № 44-ФЗ и главой 37 ГК РФ.                                                                                                                                                       При этом суд обращает внимание, что подчиняясь специальному регулированию Закона о контрактной системе, выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд остается при этом гражданско-правовым договором, на который распространяется принцип равенства субъектов правоотношения.                                              В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.                                                                                                        Согласно статье 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (части 8, 9 статьи 95 Закона №44-ФЗ).                 По условиям Контракта №03/03-2020 от 18.03.2020 (далее - Контракт) подрядчик обязан представить к принятию заказчиком акты выполнения отдельных этапов работ по форме КС-2 не позднее 7 дней до истечения срока выполнения отдельного этапа работы, с актами формы КС-3, подтверждающими выполнение отдельного этапа для проведения расчетов и предоставить счет на оплату.                                                                                      В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.                                                                                                           Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.                                                                      В соответствии с п. 12.2. Заказчик вправе инициировать расторжение контракта в случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств, определенных контрактом.            Согласно п. 15.5. Контракта окончание срока действия Контракта не прекращает обязательства сторон, в части гарантийных обязательств, в том числе их обеспечение и взаиморасчетов, которые действуют до их полного выполнения сторонами, а также не освобождает стороны от ответственности за нарушение Контракта.                                                 В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими необходимых процессуальных действий.  Ответчик, являясь коммерческой организацией, в силу положений статьи 2 ГК РФ осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск, поэтому должен был и мог предположить и оценить возможность отрицательных для себя последствий такой деятельности, в том числе и связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по контракту.                                                                                       В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств совершения им действий с достаточной степенью разумности и осмотрительности, а также добросовестности при исполнении контрактных обязательств.                                                            Таким образом, требования истца о расторжении государственного контракта, подлежит удовлетворению. Госпошлина в соответствии со статьёй 110 АПК РФ относится на ответчика.                                                                                                                          Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                                                            РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврокомфорт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, 

<

...>, этаж подвал помещ. 1 ком. 5) в пользу министерства здравоохранения Республики Адыгея (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  

<

...>) задолженность в размере                         33 371 рубль 78 копеек.                                                                                                       Расторгнуть государственный контракт от 18.03.2020г. №03/03-2020 на выполнение строительно-монтажных работ, заключенный между министерством здравоохранения Республики Адыгея (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>,  

<

...>) к обществом с ограниченной ответственностью "Еврокомфорт" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, 

<

...>, этаж подвал помещ. 1 ком. 5).                                                Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Еврокомфорт» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, 

<

...>, этаж подвал помещ. 1 ком. 5) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 60 000 рублей.                                                           Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается через суд, вынесший решение.

Судья                                                                                                                Н.Г.Мусифулина