АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025, тел. 

<

***>; факс 

<

***> http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Иркутск Дело № А19-8620/2025 15.08.2025 г. 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 12.08.2025 года. Решение в полном объеме изготовлено 15.08.2025 года. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Дягилевой И.П., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куркутовой Е.М., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 664011,ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г. ИРКУТСК,УЛ. ГОРЬКОГО,Д.31)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 664007,ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г. ИРКУТСК,УЛ. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ,Д.88)  

об обязании выполнить рекультивацию, взыскании неустойки, при участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО1, доверенность, паспорт, диплом; 

от ответчика: представитель ФИО2, доверенность, паспорт, диплом, УСТАНОВИЛ:  

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" о взыскании неустойки по договору аренды лесного участка № 91-501/14 от 15.09.2014 в размере 47 729 руб., 43 коп.; обязании выполнить технический этап рекультивации путем освобождения поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаления слоя грунта в местах его загрязнения, планировки рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживания, террасирования откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов) на  

лесном участке, площадью 3,0 га, в теплый бесснежный период года до 01.10.2025; обязании выполнить биологический этап рекультивации путем нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке, общей площадью 3,0 га, в теплый бесснежный период года до 01.10.2025.  

В обоснование иска истец указал на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по проведению мероприятий по рекультивации лесного участка, предусмотренных договором аренды лесного участка № 91-501/14 от 15.09.2014 и проектом освоения лесов.  

Ответчик в отзыве на иск указал, что для заключения договора аренды на новый срок министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области продлен срок действия лицензии № ИРбр 00006 ТЭ до 01.01.2032 на геологическое изучение, разведку и добычу песчаников на участке недр местного значения «Сосновый», в связи с чем, между ООО «СИБГЕОЛЕС» и АО «ДСИО» заключен договор от 26.03.2024 № 02-02/2024, предметом которого является выполнение землеустроительных работ, в том числе по карьеру «Сосновый», по состоянию на 12.05.2025 утверждена проектная документация лесного участка, совместно с ФГБУ «Рослесинфорг» ведутся работы по подготовке межевого плана и постановке участка на государственный кадастровый учет, соответственно после проведения вышеуказанных работ АО «ДСИО» обратится с заявлением о заключении договора аренды и проект рекультивации будет передан в министерство лесного комплекса Иркутской области на согласование. В связи с указанными обстоятельствами ответчик полагает, что поскольку АО «ДСИО» принимаются меры к возобновлению использования лесного участка и заключению договора аренды лесного участка, требования Министерства о проведении рекультивации являются необоснованными. Кроме того, ответчик ходатайствовал о снижении размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, в виду ее несоразмерности.  

Истец в судебном заседании, в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просил обязать ответчика выполнить технический этап рекультивации путем освобождения поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаления слоя грунта в местах его загрязнения, планировки рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживания, террасирования откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов) на лесном участке, площадью 3,0 га, в теплый бесснежный период года до 01.10.2026 и биологический этап рекультивации путем нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке, общей площадью 3,0 га, в теплый бесснежный период года до 01.10.2026. Истец также заявил об отказе от исковых требований в части взыскания неустойки в размере 47 729 руб. 43 коп., в связи с добровольным погашением задолженности. Уточнения судом приняты.  

Ответчик в судебном заседании поддержал ранее заявленные доводы, полагая требования Министерства о проведении рекультивации необоснованными, в связи с намереньем АО «ДСИО» возобновить договорные отношения.  

Рассмотрев заявленный истцом отказ от иска в части требования о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договору аренды № 91-501/14 от 15.09.2014г. и принимая во внимание, что он не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, арбитражный суд принимает отказ истца от иска в части требований о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договору аренды № 91-501/14 от 15.09.2014г. в размере 47 729 руб. 43 коп. (часть 5 статья 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), в связи с чем, производство по делу в указанной части подлежит прекращению на основании пункта 4 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв с 29.07.2025 до 12.08.2025 до 12 час. 30 мин.  

Судебные акты по рассматриваемому делу опубликованы на официальном портале арбитражных судов «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Исследовав материалы дела, ознакомившись с письменными доказательствами, выслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.  

Как усматривается из материалов дела, между министерством лесного комплекса Иркутской области (арендодатель) и АО «ДСИО» (арендатор) заключен договор аренды лесного участка № 91-501/14 от 15.09.2014, согласно которому арендодатель обязался передать, а арендатор принять во временное пользование лесной участок, расположенный на землях лесного фонда, имеющий местоположение: Иркутская область, муниципальное образование Братский район, Братское лесничество, Тангуйское участковое лесничество, Бадинская дача, квартал № 87 (выдел 9), общей площадью 3,0 га, в границах, указанных в акте натурного технического обследования лесного участка от «10» июля 2014 года, утвержденном агентством лесного хозяйства Иркутской области «21» июля 2014 года и плане лесного участка с номером учетной записи в государственном лесном реестре 000564-2014-07, в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых - добыча инертных строительных материалов (песчаника) на карьере «Сосновый» (лицензия на право пользования недрами от 01.10.2008 № ИРбр 00006 ТЭ с целевым назначением и видами работ: для добычи песчаника в карьере «Сосновый»).  

Лесной участок передан в пользование арендатора по акту приема-передачи. 

В соответствии с пунктом 9.1 договора он вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» № 122-ФЗ от 21.07.1997 и действует на срок до 01 января 2024 года.  

Пунктом 5.4.8 договора установлена обязанность арендатора осуществлять меры санитарной безопасности, лесовосстановление и рекультивацию в объемах, в сроки и на условиях, которые указаны в проекте освоения лесов, а также обеспечить противопожарное обустройство, наличие противопожарного оборудования, средств тушения лесных пожаров согласно норм, утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 22.12.2008 N 549 "Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов".  

Проектом освоения лесов к договору аренды лесного участка № 91-501/14 от 15.09.2014. предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель. Рекультивация осуществляется в два этапа:  

- технический этап включает в себя снятие и складирование почвенно-растительного слоя; освобождение рекультивируемой поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и др. веществами, планировка площадей (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживание, террасирование откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов) на лесном участке площадью 3 га;  

- биологический этап путём нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке площадью 3 га.  

Согласно исковому заявлению в нарушение условий договора АО «ДСИО» не выполнило мероприятия по техническому и биологическому этапу рекультивации на лесном участке, предоставленном в аренду.  

Министерство обратилось к АО «ДСИО» с претензией № 02-91-696/25 от 24.01.2025г. о выполнении рекультивационных мероприятий, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.  

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по выполнению лесовосстановительных мероприятий послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.  

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.  

Согласно статье 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в судебном порядке с использованием способов защиты, предусмотренных статьей 12 ГК РФ, либо иными способами, установленными законом.  

Как следует из заявленных требований, истцом избран способ защиты гражданского права – понуждение к исполнению обязанности в натуре.  

Способ защиты права должен соответствовать характеру его нарушения и обеспечивать возможность восстановления нарушенных прав.  

По смыслу статьи 12 ГК РФ, устанавливающей такой способ защиты права как понуждение в судебном порядке к исполнению обязанности в натуре, в предмет доказывания по данному спору входят следующие обстоятельства: наличие у ответчика обязанности, о понуждении к исполнению которой заявлен иск; реальная возможность исполнения ответчиком этой обязанности; отказ ответчика от исполнения установленной обязанности.  

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.  

В силу части 2 статьи 3 ЛК РФ имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом, если иное не установлено ЛК РФ, другими федеральными законами.  

Право аренды лесного участка возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, Земельным кодексом, если иное не установлено Лесным кодексом, другими федеральными законами  

(часть 1 статьи 9 ЛК РФ). 

По части 2 статьи 60.12 ЛК РФ при использовании лесов, охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные законодательством Российской Федерации требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию.  

Особенности рекультивации земель, указанных в части 2 настоящей статьи, меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 4 статьи 60.12 ЛК РФ).  

Согласно части 2 статьи 43 ЛК РФ для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут в соответствии со статьей 9 настоящего Кодекса.  

Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 6 статьи 43 ЛК РФ).  

Согласно пункту 19 Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, утвержденных Приказом Минприроды России от 07.07.2020 № 417 " (далее – Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых) лица, осуществляющие использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, обеспечивают, в том числе консервацию или ликвидацию объектов, связанных с осуществлением геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт «в»).  

Из пункта 20 Правил использования лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых следует, что земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ в соответствии с проектом рекультивации, а объекты, связанные с геологическим изучением, разведкой и добычей полезных ископаемых, подлежат консервации или ликвидации в соответствии с законодательством о недрах.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 

"О проведении рекультивации и консервации земель" утверждены Правила проведения рекультивации и консервации земель (далее – Правила рекультивации земель).  

Согласно пункту 6 Правил рекультивации земель рекультивации в обязательном порядке подлежат нарушенные земли в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также земли, которые подверглись загрязнению химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, содержание которых не соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушенные земли сельскохозяйственного назначения.  

По пункту 8 Правил рекультивации земель рекультивация осуществляется в соответствии с утвержденным проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий.  

Технические мероприятия могут предусматривать планировку, формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий.  

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.  

При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 ЛК РФ, в целях создания защитных лесных насаждений проводятся работы по искусственному или комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с применением саженцев с закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения, предусмотренными статьями 62 и 63 ЛК РФ соответственно  

(пункт 8(1) Правил рекультивации земель). 

Согласно частям 1, 2 статьи 61 ЛК РФ вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя: 1) лесное  

семеноводство; 2) лесовосстановление; 3) уход за лесами; 4) осуществление отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса.  

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов (пункты 2, 3 Правил лесовосстановления утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 "Об утверждении Правил лесовосстановления" (далее – Правила лесовосстановления).  

В силу части 4 статьи 61 ЛК РФ невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части воспроизводства лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками или права безвозмездного срочного пользования лесными участками.  

Исходя части 4 статьи 61 ЛК РФ, приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 № 69 "Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки", пункта 8 Правила лесовосстановления объем соответствующих лесовосстановительных мероприятий на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, определяется проектом освоения лесов.  

В материалы дела представлен проект освоения лесов (выдержка из проекта освоения лесов) к договору аренды № 91-501/14 от 15.09.2014, согласно которому к выполнению в 2016 и 2023 годах подлежат выполнению обществом мероприятия по рекультивации земель, включающие два последовательных этапа: технический и биологический.  

Работы технического этапа рекультивации проводятся на площади 3 га и включают в себя следующие мероприятия: снятие и складирование почвенно-растительного слоя; освобождение рекультивируемой поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаление слоя грунта в местах его загрязнения нефтепродуктами и др. веществами, планировка площадей (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживание, террасирование откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов).  

Биологический этап включает искусственное лесовосстановление – нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке площадью 3 га.  

Как следует из материалов дела, и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, ответчиком не исполнены обязательства по проведению мероприятий по рекультивации земель на лесном участке, предоставленном на основании  

договора аренды № 91-501/14 от 15.09.2014, предусмотренные проектом освоения лесов к выполнению в 2023 году, что также подтверждается протоколом осмотра Государственного казенного учреждения Иркутской области "Братское лесничество" от 02.07.2024, согласно которому в ходе проведения обследования лесного участка по адресу: кв. № 87 выд. 9, Бадинская дача, Тангуйское участковое лесничество, Братское лесничество (договор аренды лесного участка АО «ДСИО» № 91-501/14 от 15.09.2014) установлено: рекультивация нарушенных земель на площади 3.0 га. не произведена.  

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ документальных доказательств, подтверждающих проведение мероприятий по рекультивации земель на площади 3 га (технический этап) и на площади 3 га (биологический этап), ответчиком не представлено, требование истца в указанной части в добровольном порядке не исполнено, в ходе судебного разбирательства по существу не оспорено.  

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 ГК РФ). 

Поскольку материалы дела не содержат доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств по проведению мероприятий по рекультивации земель, факт неисполнения обязательств в указанной части ответчиком не оспорен, следовательно, требования истца об обязании АО «ДСИО» выполнить по договору аренды лесного участка № 91-501/14 от 15.09.2014 технический этан рекультивации путём освобождения поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаления слоя грунта в местах его загрязнения, планировки рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживания, террасирования откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов) на лесном участке, площадью 3,0 га, а также биологический этап рекультивации путём нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке, общей площадью 3,0 га, являются правомерными, обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в частности, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав заключается в понуждении должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства (договора).  

С учетом удовлетворения требования истца об обязании ответчика осуществить искусственное лесовосстановление, суд считает возможным установить ответчику срок исполнения настоящего решения в указанной части в теплый бесснежный период до 01.10.2026г.  

Довод ответчика о необоснованности требований истца об обязании выполнить рекультивацию лесного участка по договору аренды № 91-501/14 от 15.09.2014, поскольку АО «ДСИО» намерено возобновить договорные отношения, в связи с чем продлен срок действия лицензии № ИРбр 00006 ТЭ до 01.01.2032 на геологическое изучение, разведку и добычу песчаников на участке недр местного значения «Сосновый», а в случае возобновления договорных отношений ответчику придется повторно проводить рекультивацию лесного участка, поскольку срок действия договора аренды № 91-501/14 от 15.09.2014 истек суд находит необоснованным, поскольку обязанность арендатора выполнить рекультивацию лесного участка в 2023 году предусмотрена проектом освоения лесов, однако в нарушение статьи 65 АПК РФ до настоящего времени доказательства возобновления сторонами договорных отношений в отношении спорного лесного участка в материалы дела не представлены, тогда как в силу положений части 6 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, Правил проведения рекультивации и консервации земель, лица, использующие леса в целях, предусмотренных статьями 43 -46 Лесного кодекса Российской Федерации, обязаны проводить лесовосстановительные мероприятия.  

В соответствии с требованиями ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков.  

Согласно абзацу 3 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при  

добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству.  

Пунктом 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" разъяснено, что при отказе истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований после обращения в арбитражный суд производство по делу прекращается, и решение не в пользу ответчика не принимается, в силу чего в этом случае государственная пошлина в бюджет с ответчика не взыскивается.  

Учитывая изложенное, государственная пошлина по заявленным неимущественным требованиям составляет 50 000 руб. и в силу статьи 110 АПК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

производство по делу в части взыскания неустойки прекратить. Исковые требования удовлетворить. 

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в теплый бесснежный период до 01.10.2026г. выполнить технический этап рекультивации путем освобождения поверхности от производственных конструкций и строительного мусора, удаления слоя грунта в местах его загрязнения; планировки рекультивируемой площади (засыпка и выравнивание ям, рытвин), выполаживания, террасирования откосов отвалов и бортов карьера (не более 23 градусов) на лесном участке, площадью 3,0 га.  

Обязать АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в теплый бесснежный период до 01.10.2026г. выполнить биологический этап рекультивации путем нанесения почвенно-растительного слоя на лесном участке, общей площадью 3,0 га.  

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 50 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья И.П. Дягилева