71/2023-120248(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-10332/2023

город Вологда

18 октября 2023 года

 

 Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской  области   

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» в срок  до 31 июля 2024 года устранить недостатки работ, выполненных в рамках  контракта от 23.04.2019 «Капитальный ремонт МБОУ «Средняя школа № 2 г.  Грязовца», идентификационный код закупки193350900264835090100100120054329000, а именно:  

 1) Крыльцо № 1: заменить поврежденные и отслаивающие плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на крыльце в объеме  100%),  

2) Крыльцо № 2: заменить поврежденные и отслаивающиеся плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на крыльце в объеме  1 плитки и 2 подступенков). Произвести отбивку (демонтаж) отслоившихся и  нанесение новых штукатурных слоев с последующей окраской (перед покраской  поверхность подготовить в соответствии с требованиями по подготовке  основания под покраску),  

3) Крыльцо № 3: заменить поврежденные и отслаивающиеся плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на крыльце в объеме  100% и замены поврежденных монолитных ступеней в объеме 3 шт). Произвести  обивку (демонтаж) отслоившихся и нанесение новых штукатурных слоев с  последующей окраской (перед окраской поверхность подготовить в соответствии  с требованиями по подготовке основания под окраску),  

4) Крыльцо № 4: заменить поврежденные и отслаивающиеся плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на крыльце в объеме  100%),  

5) Крыльцо № 7: заменить поврежденные и отслаивающиеся плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на крыльце 55%).  Произвести отбивку (демонтаж) отслоившихся и нанести новые штукатурные  слои с последующей окраской, перед окраской поверхность подготовить в  соответствии с требованиями по подготовке основания под окраску),  

6) Крыльцо № 8: заменить поврежденные и отслаивающиеся плитки с  подготовкой основания перед укладкой в соответствии с действующими  нормативными требованиями (замена керамической плитки на площадке крыльца  в объеме 55%). Произвести отбивку (демонтаж) отслоившихся и нанести новые  штукатурные слои с последующей окраской, перед окраской поверхность  подготовить в соответствии с требованиями по подготовке основания под  окраску).  

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» в  пользу муниципального бюджетного образовательного учреждения Грязовецкого  муниципального округа Вологодской области «Средняя школа № 2 г. Грязовца»  1800 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины и 18 000  руб. в возмещение расходов за проведение досудебной экспертизы.  

Возвратить муниципальному бюджетному образовательному учреждению  Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Средняя школа № 2  г. Грязовца» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 200  руб.  

 Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

 Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа,  подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи (часть 5  статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Судья Гуляева Ю.В.