ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ульяновск                                                                                Дело №А72-6842/2019

«25» ноября 2019 года

 

Резолютивная часть решения объявлена «18» ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен «25» ноября 2019 года.

 

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи В.В.Тимофеева, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Профресурс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 2 446 164 руб. 00 коп.,

 

по встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании неустойки  в размере 1 522 317 руб. 00 коп. 

 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

- открытое акционерное общество  «Трансаммиак»,Самарская область, г. Тольятти

- общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна – 402», г. Самара

- общество с ограниченной самостоятельных ответственностью «Триалинк груп»

 

при участии в заседании:

от ООО «ЭНЭКО СТРОЙ» – ФИО2, доверенность;

от ООО «Профресурс» – ФИО3, доверенность;

от третьих лиц – не явились, уведомлены; 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Профресурс» о взыскании 2 446 164 руб. 00 коп.

Определением от 20.06.2019 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора: открытое акционерное общество  «Трансаммиак».

Определением от 25.09.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна – 402».

Указанным определением  принято к производству встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» о взыскании неустойки в размере                             1 522 317 руб. 00 коп. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.10.2019 судебное разбирательство отложено по ходатайству ООО «Профресурс».

Указанным определением суд по ходатайству ООО «Профресурс» привлек к участию в деле в качестве третьего лиц не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Триалинк груп».

В судебном заседании 19.11.2019 представитель ООО «ЭНЭКО СТРОЙ» на исковых требованиях настаивал, возражал против встречных исковых требований, представил в материалы дела протокол осмотра доказательств, доказательства направления искового заявления в адрес третьего лица. 

Представитель ООО «Профресурс» возражал против исковых требований, на встречном иске настаивал в полном объеме, представил в материалы дела копии почтовых квитанций и копию письма от 24.10.2019.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

При данных обстоятельствах спор в судебном заседании рассматривается в отсутствие третьих лиц в порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся материалам.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» к Обществу с ограниченной ответственностью «Профресурс» следует оставить без удовлетворения, встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» следует удовлетворить частично.

При этом суд руководствовался следующим. 

Как усматривается из материалов дела, 26.06.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» (Подрядчик) заключен договор  подряда №2606-С, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству скрытых переходов методом ГНБ на объекте капитального ремонта «Магистральный кабель 35 1-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак». (п.1.1 договора)

Конкретный объем работ, срок выполнения работ, стоимость работ, порядок оплаты определяются Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. (п.1.2 договора)

Согласно п.1.3 договора, при производстве работ Подрядчик должен выполнить прокладку ЗПТ 063мм. 

В соответствии с п.2.2 договора стоимость поручаемых Подрядчику работ по договору и определяется из стоимости работ по всем дополнительным соглашениям к договору и определяется в соответствии с расценками, указанными в Приложении №1 к настоящему договору.

Согласно п.2.5 договора, оплата за выполненные работы по договору производится в следующем порядке:

- 2.5.1 До начала производства работ Заказчик оплачивает авансовый платеж в размере 30 % в течение 10 календарных дней после заключения сторонами дополнительного соглашения на конкретный объём работ.

- 2.5.2 Заказчик оплачивает 70% в течение 60  рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику счета - фактуры и подписанных с двух сторон без замечаний документов, согласно пунктам 7.2. и 7.3. настоящего Договора.

- 2.5.3. За нарушение оплаты Заказчик оплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы остатка за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости не оплаченных работ.

В соответствии с п.7.1 договора приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями нормативных документов (СНиП. ВСН, РД, СП и т.д.).

Согласно п.7.2 договора, при выполнении работ Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

В соответствии с п.7.3 договора, по завершению строительства после подготовки к сдаче и сдачи Объектов Подрядчик передает Заказчику:

- Акт сдачи - приемки выполненных работ;

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- Акт об устранении замечаний;

- Акт сверки взаимных расчетов;

- Акт на скрытые работы;

- Профиль бурения по форме (образцу) Заказчика;

- Протокол бурения по форме (образцу) Заказчика.

Согласно п.7.4 договора, по акту сдачи - приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующие документы: Один экземпляр и 2 (Две) копии исполнительной документации согласно перечню (Приложение №3), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10.07.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №1 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 422 метра на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1) Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 1 899 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 289 677 руб. 97 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3). (п.4)

10.07.2018 Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №1 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 400 метров на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1)  Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 1 800 000 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 274 576 руб. 27 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3). 

16.07.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №2 к договору  подряда №2606-С, согласно которому в связи с изменением объема работ Стороны пришли к соглашению изменить Дополнительное соглашение №1 от 26 июня 2018г. и читать в следующей редакции: 

- п.1 «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 394 метра на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. 

- п. 4 Стоимость работ по настоящему Соглашению является твердой и составляет 1 268 220 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 193 457 руб. 29 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

16.07.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №3 к договору  подряда №2606-С, согласно которомув  связи с изменением объема работ Стороны пришли к соглашению изменить Дополнительное соглашение №2 от 10 июля 2018г. и читать в следующей редакции:

- п.1. «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 144 метра на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

- п. 4 Стоимость работ по настоящему Соглашению является твердой и составляет 648 000 руб. руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 90 847 руб. 45 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

16.07.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №4 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 1319 метров на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1) Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 1 970 067 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 300 518 руб. 70 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3). (п.4)

16.07.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №5 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 1319 метров на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1) Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 1 970 067 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 300 518 руб. 70 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3).

15.08.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №6 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 1636 метров на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1) Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 2 309 250 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 352 258 руб. 47 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3).

19.09.2018 между Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Профресурс» подписано дополнительное соглашение №7 к договору  подряда №2606-С, согласно которому «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию «Заказчика» работы по устройству перехода методом горизонтально-направленного бурения на участке «Магистральный кабель 351-903 км филиал «Саратовское управление» ОАО «Трансаммиак» протяженностью 1083 метра на свой риск собственными силами и средствами с использованием трубы «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные Работы. (п.1) Предварительная стоимость работ по настоящему Соглашению является ориентировочной и составляет 1416 050 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 216 007 руб. 63 коп., согласно перечню работ и общего объёма, указанным в приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ и указывается в закрывающих работы документах (актах, справках формы КС-2 и КС-3).

Заключенный между сторонами по делу контракт по своей правовой природе является договором подряда, правоотношения сторон по которому регулируется как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в главе 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик в соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу ст.ст. 711, 746 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В подтверждение выполнения работ по договору подряда №2606-С от 26.06.2018 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» представило  акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подписанные сторонами без разногласий, в том числе: 

-акт выполненных работ №1 от 03.08.2018 и справка о стоимости выполненных paбот и затрат от 03.08.2018г. на общую сумму 648 000 руб. 00 коп.; 

-акт выполненных paбот №1 от 03.08.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 03.08.2018г. на общую сумму 1 247 160 руб. 00 коп.;

- акт выполненных работ №1 от 28.09.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат oт 28.09.2018г. на общую сумму 1 811 550 руб. 00 коп.;

- акт выполненных paбот №1 от 28.09.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат oт 28.09.2018г. на общую сумму 1 792 150 руб. 00 коп.;

- акт выполненных работ №1 от 28.09.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.09.2018г. на общую  сумму 715 030 руб. 00 коп.;

- акт выполненных paбот №1 от 26.11.2018  и справка о стоимости выполненных paбот и затрат oт 26.11.2018г. на общую сумму 463 320 руб. 00 коп.;

- акт выполненных paбот №1 от 28.12.2018 и справка о стоимости выполненных работ и затрат от 28.12.2018г. на общую сумму 659 070 руб. 00 коп.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» задолженность по договору подряда №2606-С от 26.06.2018 в размере 2 446 164 руб. 00 коп.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Возражая против исковых требований, Общество с ограниченной ответственностью «Профресурс» в отзыве на исковое заявление указывает, что до настоящего момента Подрядчик не представил Заказчику, как того требуют пункты 4.1, 7.3, 7.4 договора исполнительную документацию по выполненным работам (Приложение №2), а следовательно срок оплаты 70% (после выполнения работ) не наступил. Ввиду этого, заказчик лишается по вине подрядчика, проверить качество выполненных работ, поскольку они являются скрытыми (подземными).

Ответчик указывает, что поскольку указанные условия договора Подрядчиком не выполнены, исполнительская документация не передана, работы не могут считаться выполненными, а следовательно срок оплаты 70%  не наступил. 

Приложением №2 к договору подряда №2606-С от 26.06.2018 стороны согласовали перечень исполнительной документации:

-акт на скрытые работы по устройству переходов методом ГНБ;

-протокол бурения по форме (образцу) Заказчика;

-профиль перехода по форме (образцу) Заказчика;

Исполнительная документация представляется в следующем виде:

- 3 экземпляра в печатном виде (заверенные представителем технического надзора) 

- 1 экземпляр на электронном носителе.

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается.

В силу норм ст.71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив и исследовав по правилам, предусмотренным в статье 71 АПК РФ, представленные сторонами документы и доказательства, суд приходит к выводу, стороны предусмотрели в договоре обязанность, порядок и сроки предоставления исполнительной документации Подрядчиком, определили ее состав. Указанные условия являются обязательными и не противоречат  ст. 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В обоснование своих доводов о надлежащем исполнении обязательств по передаче исполнительной документации истец представил доказательства. Суд оценил представленные истцом доказательства в их совокупности и считает, что они они не подтверждают факт надлежащего исполнения. Представлены доказательства направления документов в электронном виде иному лицу ООО «ПМК-402». Судом критически оценены пояснения истца о том, что представителями ответчика и третьего лица являются одни и теже  лица, что обмен информацией осуществлялся по одним и тем же адресам.

Любые факты должны подтверждаться надлежащими и относимыми доказательствами. Между истцом и третьим лицом ООО «ПМК-402» имелся договор но на иные работы и в иные сроки. ООО «ПМК-402» в спорных отношениях не участвует. Исполнительная документация с реквизитами ООО «ПМК-402» не может являться надлежащим доказательством.

В течении рассмотрения данного дела судом предлагалось истцу передать исполнительную документацию ответчику. Истец не предоставил доказательств передачи надлежащим образом оформленной исполнительной документации ответчику. 

Генподрядчик в своих пояснениях сообщает, что работы по объекту в полном объеме не выполнены, оплата не производилась ввиду отсутствия представленной в адрес ООО «Триалинк Групп» от ООО «Профресурс» исполнительной документации.

ООО «Триалинк Групп» утверждает, что отсутствие исполнительной документации по объекту строительства, является основанием для неоплаты работ подрядчику, ввиду невозможности в полном объеме использовать результат труда (невозможности установления места реконструкции переходов, глубину залегания кабеля).

Суд соглашается с доводами ответчика и третьего лица о том, что исходя из особенностей произведенных работ подземное прокладывание кабеля, имеет значение передача надлежащей исполнительной документации. 

В нарушение условий договора Подрядчик не передал исполнительную документацию Заказчику. Те экземпляры, которые передавались были оформлены ненадлежащим образом, не подписаны ни одной из сторон, отсутствует подпись представителя строительного контроля. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что Заказчик действовал недобросовестно, злоупотребил правами, суд не установил.

Учитывая указанные обстоятельства, исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» к Обществу с ограниченной ответственностью «Профресурс» следует оставить без удовлетворения.

Общество с ограниченной ответственностью «Профресурс» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области со встречным исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору подряда №2606-С от 26.06.2018 в сумме 1 522 317 руб. 00 коп.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными договором.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п. 10.1 договора, за нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 20% от стоимости работ.

Согласно расчету Общества с ограниченной ответственностью «Профресурс», неустойка за просрочку исполнения обязательств по договору подряда №2606-С от 26.06.2018 составила 1 522 317 руб. 00 коп.

Представленный расчет суд находит арифметически верным. 

Однако суд учитывает, что цена в дополнительных соглашениях была ориентировочной, судом произведен самостоятельный расчет, исходя из фактической цены согласованной сторонами.

Таким образом, встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» следует удовлетворить частично в сумме 1 387 194  рубля 00 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь ст.ст. 66, 110, 156, 167-171, 176, 177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО СТРОЙ» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Профресурс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 1 387 194 (один миллион триста восемьдесят семь тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 коп. – пени по договору, 26 717 (двадцать шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей 00 коп. – в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья                                                                                   В.В. Тимофеев