АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-9035/2024

г. Новосибирск

02 сентября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Кудренко Р.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  государственного автономного учреждения Новосибирской Области  "Спортивная Школа по Волейболу" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск,  

к 1) государственному казенному учреждению Новосибирской области  «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>), 

<

...>) обществу с ограниченной ответственностью  Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» (ИНН 

<

***>) г.  Новосибирск  

 при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, 1) Департамента  имущества и земельных отношений Новосибирской области, 2) Министерства  физической культуры и спора Новосибирской области, 3) Министерства  строительства Новосибирской области, 4) Правительства Новосибирской  области,  

при участии прокуратура Новосибирской области, 

об обязании устранить недостатки переданного объекта, обнаруженные в  течение гарантийного срока,  

при участии: представителей: 

истца – ФИО1, доверенность № 27 от 18.05.2023, диплом от  11.06.2003, паспорт;  

от ответчиков – 1) ФИО2, доверенность № 1 от 09.01.2024,  диплом от 28.06.2000, служебное удостоверение; 2) ФИО3,  доверенность от 29.01.2024, паспорт, диплом;  

от третьих лиц – 1) не явился, извещен, 2) не явился, извещен, 3) не  явился, извещен, 4) не явился, извещен,  

от прокурора - Парыгина И.В., доверенность № 846 от 29.12.2023,  служебное удостоверение,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять частичный отказ от исковых требований в части обязания  ответчиков устранить дефект в виде искривления алюмокомпозитной верхней  панели (в средней части панели) наружной отделки откоса окна,  установленного в помещении № 136 на поэтажном плане «обеденный зал  спортсменов на 24 места» на 1 этаже; установить влагостойкие дверные  коробки с дверьми согласно ТУ 5271-001-17843719-2013 «Двери влагостойкие  Кредо» или аналог в помещениях №№ 51, 55, 105, 107, 122, 129, 171, 172, 178,  184, 191 на поэтажном плане на 1 этаже в количестве 11 шт.; устранить  отслоения эпоксидной эмали от поверхности в помещении № на поэтажном  плане 13 на 4 этаже в районе 8 ряда сектора 7, в верхней части сектора 12 и  верхней части сектора ВИП и локальные сколы цельнолитого покрытия на  вертикальных поверхностях ступеней трибун между всеми секторами, в  помещениях № 13 на поэтажном плане на 4 этаже и № 71 на поэтажном плане  на 2 этаже. Производство по делу в указанной части прекратить.  

Исковые требования государственного автономного учреждения  Новосибирской Области "Спортивная Школа по Волейболу" удовлетворить  частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» (ИНН 

<

***>) в срок до 31.12.2024  устранить следующие недостатки:  

- устранить просадку тротуара (тип IV), выполненного по проектной  документации шифр 09.18-ГП лист 5 (изм 9) вдоль цокольной части стен  здания в осях Е-В/15-20 и Т-Ф/3 (блок 1), в осях 7-8/А-В (блок 2);  

- устранить провал водоотводного бетонного лотка № 1 между пикетами  ПК 0+25 и ПК 1 (чертеж 09-18-1-КР3. Подпорные стенки. Лист 2 стр. 9);  

- установить влагостойкие дверные коробки с дверьми согласно ТУ 5271001-17843719-2013 «Двери влагостойкие Кредо» или аналог в помещениях   №№ 17, 128, 133 на поэтажном плане на 1 этаже в количестве 3 шт.  

- устранить трещины и отслоения штукатурки в местах сопряжения  железобетонных и каменных конструкций по поверхностям стен лестничных  клеток №№ на поэтажном плане 5, 83, 111, 157 на 1 этаже; 1, 14, 33, 51 на 2  этаже; 27 на 3 этаже; 1, 10, 14, 23 на 4 этаже.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» (ИНН 

<

***>) в  пользу государственного автономного учреждения Новосибирской Области  "Спортивная Школа по Волейболу" (ИНН 

<

***>) государственную  пошлину в размере 6 000 рублей.  

В удовлетворении исковых требований к государственному казенному  учреждению Новосибирской области «Управление капитального  строительства» отказать.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья О.В. Суворова