28/2022-335387(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-29202/2022

г. Новосибирск

20 декабря 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Герасимовой Д.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Федерального казенного учреждения «Федеральное управление  автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

к акционерному обществу по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  

о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по  государственному контракту № 57-17,  

при участии: 

от истца: ФИО1 (доверенность № 09 от 10.01.2022, паспорт,  диплом);  

от ответчика: ФИО2 (доверенность № 527 от 28.09.2022, паспорт,  диплом),  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Федерального казенного учреждения «Федеральное  управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного  агентства удовлетворить.  

Обязать акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»  (ОГРН 

<

***>) в течение месяца после окончания зимнего периода  дорожных работ, но не позднее 01 июня 2023 года, исполнить гарантийные  обязательства по государственному контракту № 57-17 на выполнение  дорожных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254  "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск км 1018+000 - км  1031+000, провести работы по устранению следующих дефектов,  установленных актом № 254-1КР-1/22 от 12.05.2022 о выявленных дефектах  по введенному в эксплуатацию участку автомобильной дороги Р-254 «Иртыш»  Челябинск - Курган - Омск-Новосибирск км 1018+000- км 1031+000,  Новосибирская область:  

1) разрушение покрытия на участках: км 1022+100 право -(15*3,75)56,25 м2, км 1022+600, право - (25*3,75) - 93,75 м2, км 1027+200 лево(11*3,75) - 41,25 м2, км 1027+250 право - (45*3,75) - 135 м2, км 1027+300 лево,  право - (7*7,5) - 52,5 м2, км 1027+320 право - (7*3,75)-26,25 м2;  

2) коррозия элементов пешеходного ограждения км 1018+460 - км  1019+000 лево, право;  

3) коррозия креплений щитков дорожных знаков 6.13 км 1018+000 -  км 1031+000- 13 знаков.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

 Дата 29.12.2021 6:04:02

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна