307/2020-106267(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А13-16098/2019

город Вологда

15 октября 2020 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «АЯКС-СТРОЙ» в  срок до 01 июля 2021 года выполнить следующие работы по устранению  недостатков в выполненных работах по муниципальному контракту от  14 сентября 2018 года № 0130200002418002141-0280921-01 при выполнении  капитального ремонта здания МБУ «Дворец спорта»:  

1. Восстановить лакокрасочное покрытие фасада здания: очистка  локальных участков лакокрасочного покрытия фасада здания и шпатлевки (440  кв.м), шпатлевка и грунтовка восстановительных локальных участков фасада  здания (440 кв.м), покраска фасадной краской наружных стен здания по всему  периметру здания (1480 кв.м).  

2. Произвести работ по ремонту отмостки здания: демонтаж отмостки  здания изготовленной из бетона толщиной 100 мм (52 кв.м), устройство  основания отмостки из песчаной смеси с уплотнением (52 кв.м), устройство  бетонной отмостки толщиной 100 мм (52 кв.м), монтаж отмостки по бетонному  основанию железобетонной плиты толщиной 100 мм, шириной 800 мм (8,5  п.м.).  

3. Восстановить лакокрасочное покрытие поврежденных участков цоколя  и входной группы здания: оштукатуривание (6 кв.м), шпатлевка и грунтовка (6  кв.м), окраска фасадной краской (98 кв.м).  

4. Восстановить лакокрасочное покрытие на металлических конструкциях  входной группы, вентиляционных решетках, пандусе эвакуационном выходе:  удаление лакокрасочного покрытия, грунтовка, покраска краской для наружных  работ.  

5. Восстановить кирпичную кладку крыльца. 

6. Восстановить примыкание двухскатной кровли входной группы к  капитальной стене здания: демонтаж доборного элемента примыкания кровли  входной группы к стене капитального здания изготовленного из листовой  оцинкованной стали (8,5 п.м.), устройство технологического паза в  капитальной кирпичной стене в районе примыкания доборного элемента  входной группы к капитальной стене здания (размерами – шириной 4 мм,  глубиной 20 мм, длинной 8,5 п.м.), монтаж доборного элемента примыкания  кровли входной группы к стене капитального здания изготовленного из  листовой оцинкованной стали (8,5 п.м.).  

7. Провести ремонт металлической двери эвакуационного выхода с  устранением имеющихся люфтов, резиновых уплотнителей и внутренних  теплоизоляционных материалов, размерами 1,8х2 м.  

8. Провести ремонт дверей внутреннего тамбура: демонтаж конструкций  внутреннего тамбура, изготовленного из ПВХ профиля (высота 3 м, длина 6,95  м), монтаж с установкой относительно вертикальной плоскости конструкции  внутреннего тамбура изготовленного из ПВХ профиля (высота 3 м, длина  6,95м).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЯКС-СТРОЙ»  в пользу муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта» 155 452  руб. 14 коп. штрафа, 58 000 руб. в возмещение расходов по оплате судебной  экспертизы, 11 664 руб. в возмещение судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «АЯКС-СТРОЙ»  с депозитного счета Арбитражного суда Вологодской области денежные  средства в размере 50 000 руб. перечисленные по платежному поручению от  01.06.2020 № 221.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Курпанова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:20

Кому выдана Курпанова Наталья Юрьевна