Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-44460/2021

30 марта 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"  (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) 

третье лицо конкурсный управляющий ООО "ИНТЕРСТРОЙ"  ФИО2

при участии

- от истца: ФИО3 

- от ответчика: не яв., изв.

- от третьего лица: не яв., изв. 

установил:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" (далее - Общество) о взыскании неотработанного аванса, штрафа, неустойки, об обязании в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки по договору от 07.10.2019 № 109 (далее - Договор).

Общество заявило встречный иск об обязании принять работы на сумму 17 339 595,66 руб. и взыскании 2 654 396,77 руб. задолженности по Договору.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен конкурсный управляющий Обществом ФИО2.

После проведения по делу экспертизы Учреждение в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнило исковые требования и просило:

– взыскать:

1) 13881445,20 руб. неотработанного аванса; 

2) 4216000 руб. штрафа: 

а)   за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 1.1, разделом «Требования к результатам работ» технического задания, являющегося приложением 1 к Договору: ненадлежащее представление и оформление исполнительной документации, общего журнала работ, непредставление сертификатов на материалы, журнала входного контроля применённых в строительстве материалов, накладных, счётов- фактур на сетку сварную из арматурной проволоки и плиты из минеральной ваты;

б)   за нарушение пункта 2.1 раздела 2, раздела «Требования к результатам работ» технического задания, являющегося приложением 1 к Договору, выразившееся в некачественном выполнении работ, а именно:

-за ненадлежащее выполнение работ по устройству пола;

- за ненадлежащее выполнение работ по устройству кровли;

-   за нарушение технологии прокладки труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей;

-   за нарушение технологического процесса нанесения и эксплуатации штукатурного покрытия, в связи с чем произошла деформация штукатурного слоя;

-     за ненадлежащее выполнение работ по прокладке трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации и водоотведения;

-   за ненадлежащее выполнение работ по установке ответвительных коробок на стене - использованы ответвительные коробки другого завода-изготовителя;

- за ненадлежащее выполнение работ по устройству кладки перегородок;

3) 1822636,15 руб. неустойки за невыполнение всего объема работ в срок, установленный договором (20.11.2020); 

4) 2412903,60 руб. стоимость демонтажа некачественно выполненных работ, а именно:

а) стоимость демонтажа некачественно выполненных работ по устройству стяжек пола в размере 1501618,80 руб.;

б) стоимость демонтажа некачественно выполненных работ по устройствуштукатурных слоев стен в размере 289107,60 руб.;

в)           стоимость демонтажа некачественно выполненных работ по устройству кровли в размере 622177,20 руб.

– обязать Общество в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу представить:

1) исполнительную документацию, устранив замечания, установленные актами (исправить нумерацию, в предоставленных актах освидетельствования скрытых работ указать номера документов о качестве бетонной смеси заданного качества партии и соотнести временные отрезки начала и окончания работ с записями в общем журнале работ, предоставить акты освидетельствования скрытых работ, согласованные с представителями ООО «Промстройконтроль», на устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или плит пенополистирольных; армирование подстилающих слоев и набетонок; устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм; устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм; устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой; устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (кровля), утепление покрытий: керамзитом по уклону; устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 60 мм (кровля); армирование подстилающих слоев и набетонок (кровля); прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм; кладку перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; оклейку стеклохолстом стен и откосов по монолитной штукатурке и бетону.

2) общий журнал работ прошить, пронумеровать, проставить печать, заполнить графы наименований заказчика, подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации и т.д., заполнить разделы 1, 2, 6; заполнить раздел 3 без исправлений дат выполнения работ, пропусков строк в графе наименования работ; 

3) сертификаты на кирпич; цемент; бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250); горячекатаную арматурную сталь класса A-I, А-11, А-Ш; штукатурку; швеллер (усиление стены стальными стяжами); сетку сварную из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм, арматуру, шпильки, гайки (усиление стены стальными стяжами); сталь (усиление стены стальными стяжами); цементно-песчаный раствор; пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт; техноэласт Барьер ЭПС; мастику Битуминоль; праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04; плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96); унифлекс ВЕНТ ЭПВ; техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый; плёнку пароизоляционную, марки "Ондутис R70"; трубу стальную водогазопроводную неоцинкованную O20.; трубу полипропиленовую PPRS O32; трубу полиэтиленовую O20, O32, O40; изоляционные трубки из вспененного каучука; трубы канализационные O110, O50 (ревизии, заглушки, муфты, тройники); хомуты стальные оцинкованные с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм и 100 мм.; муфты противопожарные РТМК O32, O40, O50, O110; кровельные воронки с листоуловителем, с корпусом из ПП с теплоизоляцией для приклеивания гидроизоляционных FPO- мембран с вертикальным выпуском, с электропрогревом. Саморегулирующий кабель электропрогрева мощностью 10-30 Вт, 230В; керамзит; трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм.; кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5, 2,5 и 6 мм2.; кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2; доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм; коробки ответвительные (паспорт качества партии, письмо-обоснование замены позиции, письмо о согласовании замены позиции на равноценную по качеству и функционалу); коробки установочные (паспорт качества партии); сетку стеклотканевая, размер 2x2 мм, плотность 60 г/м2; краску водоэмульсионную.

4) акты промежуточной приёмки отдельных ответственных конструкций(переложенных и возведённых стен, перегородок); 

5) журнал входного контроля применённых в строительстве материалов, накладные, счёт-фактуры на сетку сварную из арматурной проволоки и плиты из минеральной ваты.

Суд принял уточнение иска.

В судебном заседании представитель Учреждения поддержал исковые требования.

Общество и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Учреждением (заказчиком) и Обществом (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту здания по адресу: 

<

...>, в соответствии с техническим заданием (приложение 1) и проектной документацией (приложение 2).

По п. 2.2. Договора срок выполнения работ: с даты подписания договора в течение 12 месяцев.

Дополнительным соглашением от 26.10.2020 № 1 срок выполнения работ продлен с 08.10.2020 по 20.11.2020. 

Стоимость работ 84320000 руб. (п. 4.1 договора).

Согласно п. 4.5. Договора авансирование в размере 30% от общей суммы договора перечисляется на расчетный счет подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств на расчетный счет заказчика на основании счета, выставленного подрядчиком. Оставшаяся часть стоимости работ оплачивается поэтапно в течение 10 рабочих дней со дня подписания актов выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, с возможностью отсрочки платежа до 31.12.2020. 

В соответствии с п. 6.2. Договора в случае если подрядчик нарушил сроки выполнения работ, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,5% цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечение срока исполнения обязательства.

По п. 6.5. Договора за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа для подрядчика устанавливается 2,5% цены договора за выявленное нарушение и составляет 2108000 руб. 

Учреждение перечислило Обществу 25296000 руб. аванса платежным поручением от 22.12.2019 № 1409. 

Уведомлением от 26.10.2020 № 1144 Учреждение, ссылаясь на то, что работа по Договору выполняется настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, с января по октябрь 2020 года акты выполненных работ не предоставлены, в одностороннем порядке отказалось от исполнения Договора.

Названное Уведомление получено подрядчиком 27.10.2020. 

Учреждение обратилось к Обществу с требованиями возвратить неотработанный аванс, оплатить неустойку.  

Отказ Общества удовлетворить требования послужил основанием для обращения Учреждения в суд с настоящим иском.

Во встречном иске Общество заявляет, что фактически Договор в установленном законом порядке не расторгнут, у Общества отсутствует обязанность по возврату аванса, поскольку  выполнило работы на общую сумму 17339595,66 руб., однако Заказчик их не принял, а предъявил претензии по объемам и качеству работ, только 25.12.2020 направил акты о недостатках (дефектах) № 1-8 от 24.12.2020 сопроводительным письмом от 25.12.2020№ 1421, сообщив о необходимости устранить дефекты в срок до 21.12.2020 и до 15.01.2021 соответственно. Подрядчик считает, что Учреждение неправомерно уклоняется от приемки и оплаты результата выполненных работ по договору, замечания по выполненным работам являются несущественными и устранимыми, оснований для отказа от приемки и оплаты результата работ отсутствуют.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Перечисление 25296000 руб. аванса подтверждается платежным поручением от 22.12.2019 № 1409. 

Факт отказа от исполнения договора подтверждается уведомлением от 26.10.2020 № 1144. 

Пункт 7.2. Договора предусматривает право стороны на односторонний отказ от исполнения Договора, обязывает ее в течение 20 рабочих дней до запланированной даты расторжения уведомить другую сторону Договора.

В уведомлении от 26.10.2020 № 1144 Учреждение указало на односторонний отказ через 20 рабочих дней с момента его получения.

Согласно подписи, уведомление получено 27.10.2020. 

В силу п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Учреждение в иске не заявляет требования о расторжении Договора. 

Таким образом, п. 2 ст. 452 ГК РФ к рассматриваемому случаю не применим. 

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

При указанных обстоятельствах, суд признает спорный договор расторгнутым заказчиком в одностороннем порядке.

В обоснование требований по встречному иску Общество представило односторонне подписанные подрядчиком акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, письмо от 20.11.2020 № 216 о передаче актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, исполнительной документации, общего журнала работ. Указанное письмо получено Учреждением 20.11.2020. 

В связи с наличие спора между сторонами по стоимости и качеству выполненных работ суд определением от 26.04.2022 по делу назначил экспертизу, производство которой поручил экспертам общества с ограниченной ответственностью «Институт строительства экспертизы, оценки и промышленной безопасности» ФИО4 и ФИО5, экспертам заданы вопросы:

1) определить стоимость качественно выполненных Обществом работ по Договору;

2) имеются ли в результатах выполненных Обществом работ по Договору недостатки? Определить стоимость демонтажа некачественно выполненных работ.

В заключении от 23.11.2022 № 350/22 эксперты указывают следующие выводы:

1) стоимость качественно выполненных Обществом работ по Договору составляет 11 414 554,80 руб.

2) в результатах выполненных Обществом работ по Договору имеются недостатки согласно перечню из 33 пункта;

3) стоимость демонтажа некачественно выполненных работ составляет 2412903,60 руб.

Определением от 16.02.2022 по делу А56-104985/2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества.

Решением от 13.12.2022 по делу А56-104985/2021 Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только с соблюдением установленного Законом порядка предъявления требований.

Кредиторы не вправе обращаться к должнику с исками по имущественным требованиям, последние должны быть заявлены в рамках дела о банкротстве с тем, чтобы требования кредитора были включены в реестр требований кредиторов и удовлетворены в порядке очередности.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

Согласно абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В соответствии с п. 1 ст. 134 Закона о банкротстве вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.

Согласно пункту 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление № 35) в силу абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 статьи 81, абзаца восьмого пункта 1 статьи 94 и абзаца седьмого пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты введения наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона.

В пункте 34 Постановления N 35 разъяснено, что согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, перечисленных в пункте 1 статьи 134 данного Закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

В связи с этим в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.

В связи с этим исковые заявления о взыскании с должника долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью кредитора обязательств должника-гражданина, поданные в день введения наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат оставлению без рассмотрения на основании пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ.

С иском по настоящему делу Учреждения обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12.05.2021.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.02.2022 по делу А56-104985/2021 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества. Решением от 13.12.2022 Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Заявленные истцом требования к ответчику о взыскании денежных средств за неисполнение обязательств по спорному договору, возникли до даты возбуждения дела о банкротстве ответчика, в настоящем споре рассмотрению не подлежат, поскольку согласно положениям Закона о банкротстве не являются текущими платежами.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве.

В то же время требования Учреждения об обязании представить документацию не могут быть трансформированы в денежное требование, исходя из чего подлежит удовлетворению в рамках настоящего дела.

Возражений по данным требованиям ответчик не заявил. Суд признает их подлежащими удовлетворению. 

В свою очередь, требования по встречному иску Общества суд отклоняет, поскольку полученная сумма аванса в размере 25296000 руб. не превышает стоимость выполненных работ в сумме 11 414 554,80 руб., установленную экспертами в заключении от 23.11.2022 № 350/22. Суд отказывает во встречном иске.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

по первоначальному иску обязать общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу по договору от 07.10.2019 № 109 представить:

1) исполнительную документацию, устранив замечания, установленные актами (исправить нумерацию, в предоставленных актах освидетельствования скрытых работ указать номера документов о качестве бетонной смеси заданного качества партии и соотнести временные отрезки начала и окончания работ с записями в общем журнале работ, предоставить акты освидетельствования скрытых работ, согласованные с представителями ООО «Промстройконтроль», на устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или плит пенополистирольных; армирование подстилающих слоев и набетонок; устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм; устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм; устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо; устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой; устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм (кровля), утепление покрытий: керамзитом по уклону; устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 60 мм (кровля); армирование подстилающих слоев и набетонок (кровля); прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм; кладку перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; оклейку стеклохолстом стен и откосов по монолитной штукатурке и бетону.

2) общий журнал работ прошить, пронумеровать, проставить печать, заполнить графы наименований заказчика, подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации и т.д., заполнить разделы 1, 2, 6; заполнить раздел 3 без исправлений дат выполнения работ, пропусков строк в графе наименования работ; 

3) сертификаты на кирпич; цемент; бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250); горячекатаную арматурную сталь класса A-I, А-11, А-Ш; штукатурку; швеллер (усиление стены стальными стяжами); сетку сварную из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм, арматуру, шпильки, гайки (усиление стены стальными стяжами); сталь (усиление стены стальными стяжами); цементно-песчаный раствор; пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт; техноэласт Барьер ЭПС; мастику Битуминоль; праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04; плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96); унифлекс ВЕНТ ЭПВ; техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый; плёнку пароизоляционную, марки "Ондутис R70"; трубу стальную водогазопроводную неоцинкованную O20.; трубу полипропиленовую PPRS O32; трубу полиэтиленовую O20, O32, O40; изоляционные трубки из вспененного каучука; трубы канализационные O110, O50 (ревизии, заглушки, муфты, тройники); хомуты стальные оцинкованные с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм и 100 мм.; муфты противопожарные РТМК O32, O40, O50, O110; кровельные воронки с листоуловителем, с корпусом из ПП с теплоизоляцией для приклеивания гидроизоляционных FPO- мембран с вертикальным выпуском, с электропрогревом. Саморегулирующий кабель электропрогрева мощностью 10-30 Вт, 230В; керамзит; трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм.; кабели силовые с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5, 2,5 и 6 мм2.; кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2; доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм; коробки ответвительные (паспорт качества партии, письмо-обоснование замены позиции, письмо о согласовании замены позиции на равноценную по качеству и функционалу); коробки установочные (паспорт качества партии); сетку стеклотканевая, размер 2x2 мм, плотность 60 г/м2; краску водоэмульсионную.

4) акты промежуточной приёмки отдельных ответственных конструкций(переложенных и возведённых стен, перегородок); 

5) журнал входного контроля применённых в строительстве материалов, накладные, счёт-фактуры на сетку сварную из арматурной проволоки и плиты из минеральной ваты.

В остальной части первоначальный иск оставить без рассмотрения 

В удовлетворении встречного иска обществу с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.