АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

М О Т И В И Р О В А Н Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А67- 7355/2019

г. Томск

22 августа 2019 года

Резолютивная часть решения принята 09 августа 2019 года.  

Мотивированное решение изготовлено 15 августа 2019 года.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи С.Г. Аксиньина, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью  "Горсети" (ИНН 

<

***>.  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ТРСК" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)

о взыскании 365 496,30 руб. неустойки за период с 04.12.2014 по 10.10.2015 по договору от 18.06.2013 №2013-06-18-03-Т,

без вызова сторон,

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью  "Горсети"  обратились в Арбитражный суд Томской области с иском, уточнённым в порядке ст. 49 АПК РФ, к  обществу с ограниченной ответственностью "ТРСК" о взыскании 365 496,30 руб. неустойки за период с 04.12.2014 по 10.10.2015 по договору от 18.06.2013 №2013-06-18-03-Т.

Определением от 28.06.2019 исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства. 

Ответчик отзыв на иск не представил.

16 августа 2019 года принята резолютивная часть решения.

20 августа 2019 от ответчика поступило  заявление о составлении мотивированного текста решения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее. 

ООО «Горсети» (сетевой организацией) и ООО «ТРСК» (заявителем) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 2013-06-18-03-Т от 18 июня 2013 года, в соответствии с которым Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель в свою очередь обязуется оплатить согласно условиям договора. (л.д. 14) 

Размер плиты за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Департамента тарифного регулирования и Государственного заказа Томской области 21.06.2013 N 18/330, 10.07.2013 JK23/414 и составляет 1 289 321 (Один миллион двести восемьдесят ДОВИТЬ тысяч триста двадцать один) рубль 02 копейки, в том числе НДС 196676 рублей 09 копеек. Расчет размера платы технологического присоединения указан в Приложении №2 к договору. Размер платы за технологическое присоединение может быть изменен по соглашению Сторон, в случае изменения объемов фактически выполненных Сетевой организацией работ по реализации мероприятий «последней мили», от объемов работ указанных в Приложении №2. Окончательный расчет платы за технологическое присоединение будет производиться после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, путем заключения дополнительного соглашения к договору.(п. 10 договора в редакции дополнительного соглашения от 20.11.2013)

В соответствии с п. 8 договора, а также Правилами технологического присоединения №861 утв. Постановлением Правительства от 27 декабря 2004 года (далее Правил №861), Заявитель обязан:

-надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на которых расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, перечень которых, изложен в п. 11 технических условий;

-после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального

-после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств подписать акт разграничения балансовой принадлежности и   эксплуатационной   ответственности,   акт   об   осуществлении   технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; !       - исполнить надлежащим образом  обязательства по  оплате расходов на технологическое присоединение, указанные в разделе III заключенного договора.

Пунктом 5 договора (в редакции дополнительного соглашения от 20.11.2013г.), предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, который истек 03 декабря 2014 года.

По состоянию на 01 июня 2019 г. заявителем нарушен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Истец произвел начисление неустойки в сумме 367 469,30 руб. за период с 04.12.2014 по 10.10.2015. 

В претензии от 09.08.2018г. истец потребовал от ответчика оплаты начисленной неустойки.(л.д. 8)

Ответчик оплату неустойки не произвел, что послужил основанием обращения Департамента в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассмотрев спор, оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам по существу заявленных требований.

В соответствии с п 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

Согласно статье 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 ГК РФ).

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Факт неисполнения обязательств по договору в установленный срок является основанием для взыскания неустойки (ст. ст. 331, 431 ГК РФ).

Спорные правоотношения регулируются нормами Федерального закона N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 861 от 27.12.2004 (далее - Правила N 861).

В ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике установлено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению и соблюдать его технические условия.

Порядок технологического присоединения определен в Правилах N 861.

Исходя из п. 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Пунктом 7 Правил N 861 предусмотрено, что настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.

На основании п. 16.3 Правил технологического присоединения заявитель исполняет обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Выполнив свои мероприятия в соответствии с техническими условиями, заявитель должен уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, которая в свою очередь осуществляет проверку выполнения технических условий заявителем и в определенный срок со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.

В п. 85 Правил N 861 предусмотрено, что для проведения проверки выполнения технологических условий заявитель предоставляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технологических условий с приложением документов, обозначенных в данном пункте.

На основании п. 19 Правил N 861 стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

По правилам пункта 16 (6) Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств, в т.ч. если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий, а также если заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Согласно п/п. "в" п. 16 Правил N 861 к существенным условиям договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств отнесены положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств.

Положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств предусмотрено п. 17 Договора, согласно которому в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Факт нарушения сроков выполнения мероприятий ответчиком не опровергнут, в материалах дела не имеется документов, свидетельствующих о выполнении заявителей своих обязанностей в рамках договора.

Принимая во внимание, что факт допущенного ответчиком нарушения по исполнению обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям в установленный договором срок подтвержден, в отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие непреодолимой силы, обусловившей невозможность надлежащего исполнения обязательств, а также доказательств, подтверждающих принятие всех возможных мер, направленных на исполнение ответчиком возложенных на него обязательств, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного ООО "Горсети" требования.

Расчет проверен судом, является верным, ответчиком арифметически не оспорен.

Доказательства оплаты неустойки не представлены.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

При таких обстоятельствах требование истца является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на уплату государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТРСК" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Горсети" (ИНН 

<

***>.  ОГРН 

<

***>) 365 496,30 руб. неустойки, 2 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, всего 367 496,30 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТРСК" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8 310 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                        С.Г. Аксиньин