Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113120/2018

16 января 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  16 января 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" 

ответчик: Акционерное общество "Асталди" 

о взыскании 48 073 058,59 руб. 

при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 07.02.2018

- от ответчика: ФИО2 представитель по доверенности №01-01/19-01 от 01.01.2019

установил:

Истец - Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" обратился в суд с иском к  ответчику - Акционерному обществу "Асталди" о взыскании 47 743 832,84 руб. задолженности, 329 225,75 руб. пени, всего 48 073 058,59 руб.

Ответчик заявил ходатайство об отложении слушания дела, поскольку не знаком с исковыми требованиями. Ходатайство отклонено, поскольку причина неявки ответчика в судебное заседание не может быть признана уважительной, поскольку истец получил и претензию, и копию иска, и имел возможность с 08.10 2018 г. обратиться к истцу для урегулирования спорных вопросов. Суд рассматривает заявленное ходатайство как необоснованное, направленное на затягивание судебного процесса.

Ответчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера неустойки.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что 01.02.2016 между Акционерным обществом «Асталди» (Ответчик, Подрядчик) и СОГБУ «Смоленскавтодор» (Истец, Субподрядчик) заключен договор подряда № AST-MI 1-CM-WO-SMA-001 (Договор), согласно которому Субподрядчик обязался на свой риск, в соответствии с действующим законодательством РФ, Стандартами, Требованиями Заказчика, настоящим Договором и Приложениями к нему произвести земляные работы между 553 км. и 556+500км. Проекта, которые необходимы Подрядчику в целях реализации Проекта, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с процедурой и условиями, установленными Договором.

Согласно п. 5.1 Договора расчетная максимальная стоимость выполняемых по Договору Работ составляет 418 881 435,00 руб. (Расчетная сумма Договора).

Окончательная общая стоимость Работ по Договору, причитающаяся Субподрядчику (Цена Договора) рассчитывается на основании (фактически выполненных Субподрядчиком объёмов Работ, определенных на основании Исполнительной документации, а также на основании фиксированных (твердых) единичных расценок, согласованных Сторонами в Смете (Приложение №3 к Договору). Стороны особо установили, что Субподрядчик не имеет права требовать приемки и оплаты в отношении объёмов выполненных Работ, которые превышают указанные в Рабочей Документации, если только такое превышение специальным образом не согласовано Подрядчиком в письменной форме.

В соответствии с п. 6.2.1 Договора Подрядчик производит Авансовый платеж по настоящему Договору в следующем порядке:

-первый платеж в размере 5 000 000,00 руб. в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня письменного уведомления о мобилизации технических ресурсов (подлежит согласованию с Подрядчиком) Субподрядчиком.

Последующее авансирование производится еженедельно, начиная со следующей недели после поступления первого авансового платежа в следующем порядке:

-шесть авансовых платежей, каждый в размере 12 500 000,00 руб. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня письменного уведомления об окончании поставки Субподрядчиком песка в объёме 225 000 куб.м. на Площадку за соответствующую неделю (Субподрядчик в письменном виде уведомляет Подрядчика о сроке поставки, и поставка подлежит согласованию с Подрядчиком).

Авансирование производится на основании счета, приемлемого для Подрядчика. Сумма Авансового платежа зачитывается в счет ежемесячных платежей (начиная с первого ежемесячного платежа) путем уменьшения по 20 000 000,00 руб. от каждой очередной суммы, подлежащей оплате Субподрядчику, вплоть до полного зачета перечисленной суммы Авансового платежа, в общей сложности четыре раза.

Пунктом 6.2.3 Договора предусмотрено, что все расчеты по Договору должны быть произведены Подрядчиком не позднее тридцати пяти рабочих дней после завершения Работ, выполнения Субподрядчиком указанных в Договоре требований и подписания Сторонами Акта о Приемке.

В соответствии с п.6.3.2. Договора при осуществлении ежемесячных платежей за частично выполненные Работы Подрядчик удерживает 8% процентов из каждой причитающейся Субподрядчику суммы, указанной в расчетных документах, в качестве Гарантийного удержания для обеспечения выполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору. В случае если Подрядчик на основаниях, предусмотренных настоящим Договором и/либо законодательством, имеет право требовать какой-либо оплаты (компенсации, возмещения) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Подрядчик имеет право использовать сумму Гарантийного удержания для удовлетворения своего требования. Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику:

В случае не предоставления Субподрядчиком Банковской Гарантии выполнения Гарантийных Обязательств согласно п. 7.1 и 7.2. Договора;

- 50% от Суммы Гарантийного Удержания, в момент подписания Акта о Приемке Сторонами и предоставления Субподрядчиком Подрядчику всех счетов-фактур в связи с ежемесячными платежами по настоящему Договору,

- 50% от Суммы Гарантийного Удержания, в течение 10 (десяти) дней после подписания Итогового Свидетельства об Исполнении Сторонами.

Согласно п. 11.3 Договора приемка завершенных Работ подтверждается документами путем подписания Сторонами Акта о приемке и Справке о стоимости выполненных работ и затрат и осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с наступления всех из нижеуказанных событий (считая с последней даты их наступления):

1. выполнения Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных Договором;

2. работа выполнена в полном соответствии со всеми Нормами законодательства, законодательством Российской Федерации и условиями Договора;

3.предоставления Субподрядчиком Подрядчику гарантийного письма, подтверждающего, что не существуют Права на Удержание Залога или иные обеспечительные меры, затрагивающие Работы;

4. получения уведомления о готовности Работ к приемке Подрядчиком от Субподрядчика;

5. приемки Заказчиком Работ, предусмотренных Договором Генподряда, в соответствии с п. 10.1 Договора Генподряда, и получения Подрядчиком соответствующей оплаты от Заказчика по Договору Генподряда.

Ответчик в качестве аванса перечислил на расчетный счет Истца денежные средства в общем размере 91 359 407,86 руб., что подтверждается платежными поручениями.

Согласно Актов о приемке выполненных работ и затрат №1 от 29.07.2016, №2 от 02.12.2016, № 3 от 26.04.2017, № 4 от 02.04.2018 и справок о стоимости выполненных работ № 1 от 29.07.2016, №2 от 02.12.2016, № 3 от 26.04.2017, № 4 от 02.04.2018 Истец исполнил обязательство по договору на общую сумму 227 212 038,84 руб.

В счет оплаты выполненных работ Ответчик перечислил 79 020 316,59 руб., что подтверждается платежными поручениями.

В соответствии с п. 2 Акта о Приемке от 02.04.2018 Субподрядчик выполнил и сдал, а Подрядчик принял работы (Работы) в полном объеме. Окончательная общая стоимость Работ составляет 227 212 038,84 руб.

Пунктом 8 Акта о приемке от 02.04.2018 Стороны подтвердили, что Гарантийное удержание составляет 18 176 963,11 руб.

Сумма Гарантийного удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в следующем порядке:

-сумма в размере 9 088 481,56 руб., что составляет 4% от Цены Договора в срок до 30.06.2018;

-сумма в размере 9 088 481,56 руб., что составляет 4% от Цены Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней после выдачи Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Таким образом Ответчик имеет перед Истцом задолженность в размере 48 073 058,59 руб.

В связи с просрочкой оплаты в адрес Ответчика 20.07.2018 была направлена претензия (исх.№3257 от 16.07.2018), ответ на которую не поступил. Обязательства по оплате Ответчиком не исполнены.

В соответствии с п. 14.1 Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты выполненных Работ, к нему применяются финансовые санкции, а именно, Субподрядчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком понесенных Субподрядчиком убытков и неустойки, оцененных Сторонами заранее (Пени). Субподрядчик оценил и Стороны согласовали, что общий размер неустойки и убытков, которые Субподрядчик может понести в случае нарушения Подрядчиком его обязательств, равен 0,01 % от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки. Пени могут быть взысканы с Подрядчика только по решению суда при условии соблюдения Субподрядчиком претензионного порядка разрешения споров. Настоящим Стороны согласовали, что Пени включают в себя все возможные убытки Субподрядчика, включая расходы, которые Субподрядчик произведет или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, включая судебные расходы (госпошлины, судебные издержки), утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Субподрядчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), а также неустойку. Не допускается также получение с Подрядчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (в том числе законных процентов).

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 31. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв на иск не представил, возражений не заявил. Оснований для применения статьи 333 ГК РФ суд не усматривает. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества «Асталди» в пользу Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Управление областных автомобильных дорог» (ОГРН 

<

***>) 47 743 832,84 руб. задолженности, 329 225,75 руб. пени, всего 48 073 058,59 руб., а также 200 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.