20/2022-7628(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-8151/2021

г. Благовещенск

03 февраля 2022 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Швец О.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  акционерного общества  

«Строительная компания № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 к  

 Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Школа № 16 города Благовещенска (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об изменении пункта 1.2 муниципального контракта на выполнение работ по строительству  объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область» № 0037/2020  от 10.03.2020, приложения № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»,  

третьи лица: - администрация города Благовещенска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); 

- министерство образования и науки Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>);  

- министерство строительства и архитектуры Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>);  

- союз «Торгово-промышленная палата Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

- Прокуратура Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

- муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Требования удовлетворить частично. 

Внести изменения в пункт 1.2 муниципального контракта на выполнение работ по  строительству объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская  область» № 0037/2020 от 10.03.2020, изложив его в следующей редакции:  

«Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения  контракта;  

- окончание выполнения работ – не позднее 31.05.2023. 

Этапы выполнения работ не устанавливаются. Работы по контракту выполняются  подрядчиком в соответствии с проектом, графиком выполнения строительно-монтажных  работ (Приложение № 2). Подрядчик может выполнить работы досрочно».  

- изменить Приложение № 2 «График выполнения строительно-монтажных работ»,  подлежащих выполнению по муниципальному контракту № 0037/2020 на выполнение  работ по строительству объекта «Школа на 1500 мест в 406 квартале г. Благовещенск,  Амурская область» от 10.03.2020, окончательный срок выполнения работ май 2023 года.  

В остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья О.В. Швец 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.11.2021 1:11:47

Кому выдана Швец Ольга Витальевна