Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-92335/2019

25 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.  -  400,

рассмотрев дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИЛА" (адрес:  Россия 192019, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, наб ОБВОДНОГО КАНАЛА 24/Д/3.97; Россия 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д.63, лит.Б, оф.307, ОГРН:  1167847249789; 1167847249789);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  "ТЕХНОИНЖ" (адрес:  Россия 196233, Санкт-Петербург, пр Витебский д.51 к1 кв16, ОГРН:  1147847204053);

о взыскании 93825.50

установил:

ООО "СТРОЙСИЛА" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "ТЕХНОИНЖ" о взыскании 93 825 руб. 50 коп. неосновательного обогащения.

Исковое заявление принято к производству в порядке упрощенного производства на основании главы 29 АПК РФ.

Ответчик отклонил исковые требования по мотивам, изложенным в отзыве.

Судом установлено:

Между ООО «СтройСила» (далее - подрядчик) и ООО «ТехноИнж» (далее - субподрядчик) был заключен договор субподряда №12-СС/2019 от 13.02.2019г.  (далее - договор) на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ по объекту строительства: «Электроснабжение семи многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, в/г Агалатово, южнее дома №208, в части ПНР, монтажа вторичных цепей 2БКТП и переоборудования яч. №4, №6 РТП-18» (пункт 1.1 договора).

Общая стоимость работ - 281 250 руб. 00 коп.

Срок выполнения работ до 18.03.2019 г.

Истец в соответствии с условиями договора авансировал работы в размере 30% от цены, что составляет 93 825 руб. 00 коп.

В свою очередь субподрядчик существенно нарушил условия исполнения договора, а именно в сроки установленные договором не передал результаты работ по договору до 18 марта 2019 года.

В связи с существенным нарушением условий договора со стороны ответчика, истец отказался от исполнения договора, направив в адрес ответчика уведомления об отказе от исполнения договора с требованием возвратить неотработанный аванс по договору. Ответчик на уведомление не ответил, не отработанный аванс не возвратил.

В настоящее время задолженность ответчика составляет 93 825 руб. 00 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОИНЖ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙСИЛА" 93 825 руб. 50 коп. неосновательного обогащения и 3 753 руб. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.  -  400