Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-48435/2024

13 сентября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  30 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  13 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аслановой А.Т.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ИГЛС" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: ФИО1 

- от ответчика: ФИО2 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ИГЛС" (далее – ООО "ИГЛС") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ" (далее – ООО "ПРОФИТ") о взыскании 20 000 000 неосновательного обогащения по договору от 16.10.2023 № 0155/10/2023М (далее – Договор) и 751 912,57 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2024 по 14.05.2024, с их начислением за период с 14.05.2024 по день возврата неосновательного обогащения. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ИГЛС" (подрядчиком) и ООО "ПРОФИТ" (субподрядчиком) заключен Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций в соответствии с чертежами 1-РД-КМ.ХС (листы 4.1-4.19), а также монтажу трубопроводов и оборудования в соответствии с чертежами 1-РД-ХС, объекте «Складской комплекс» по адресу: 

<

...> Участок с кадастровым номером 47:07:0713003:15889 (далее - Объект).

Стоимость работ 85 000 000 руб. (п. 2.1 договора).

Пунктом 5.3.1. Договора предусмотрено, что для целей осуществления расчетов между сторонами и текущего выявления недостатков стороны ежемесячно подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно п. 5.3.4. ответчик оформляет акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости работ и затрат по форме КС-3, которые должны быть датированы последним днем отчетного месяца, и передает их истцу не позднее последнего числа каждого отчетного месяца.

Подрядчик обязан подписать представленные субподрядчиком акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3) в течение 20 рабочих дней с момента их предоставления подрядчику или представить мотивированные возражения на подписание актов в тот же срок при условии предоставления документов в соответствии с п. 5.3.5 Договора.

В силу п. 10.3. Договора о расторжении Договора по основаниям, указанным в пункте 10.1 (10.2) Договора Сторона, желающая расторгнуть договор, письменно извещает другую сторону с указанием даты расторжения. Датой расторжения считается дата, указанная в уведомлении.

ООО "ИГЛС" перечислило ООО "ПРОФИТ" 20 000 000 руб. платежными поручениями. 

Уведомлением от 12.02.2024 № 1133 подрядчик, ссылаясь на нарушение субподрядчиком сроков выполнения работ и иных условий Договора, расторг Договор, потребовал возвратить неотработанный аванс.

Отказ ООО "ПРОФИТ" удовлетворить требование послужил основанием для обращения ООО "ИГЛС" в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Пунктами 1 и 2 статьи 720 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику, притом что заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

В соответствии со статьей 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (пункт 1).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4).

В соответствии с пунктом 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - Информационное письмо N 51) основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ (пункт 12 Информационного письма N 51).

Согласно п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

В силу пунктов 1 и 2 статьи 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Факт направления уведомления от 12.02.2024 № 1133 об отказе истца от спорного договора подтверждается почтовой квитанцией, описью – РПО № 19623390010541 (вручено адресату 27.02.2024).

С учетом пункта 10.3 договора подрядчик указал дату расторжения договора – 09.02.2024.

Ответчик возражал против удовлетворения иска в полном объеме, указал, что 19.01.2024 направил истцу через электронный документооборот СБИС на подписание акт выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2023 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 31.12.2023, Счет-фактуру № 22 от 31.12.2023 о выполнении части работ по Договору на общую сумму 18 102 704,80 руб. 

Оператор электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» представил сведения о получении ООО "ИГЛС" 19.01.2024 указанных документов.

Между тем ООО "ИГЛС" отрицало сдачу работ по договору. 

В силу пункта 4.26 договора субподрядчик обязан вести (оформлять) на Объекте всю исполнительную документацию и обеспечить свободный доступ к ней уполномоченных представителей Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика, строительного контроля и представителей государственных органов. Субподрядчик обязан подготовить и передать Подрядчику 5 (пять) экземпляров полного комплекта исполнительной документации на бумажном носителе 2 (два) из которых передается Подрядчику в соответствии с пунктами 5.3.2, 5.3.5 настоящего Договора, а 3 (три) экземпляра – в соответствии с 5.4.2 настоящего Договора), а также три экземпляра исполнительной документации на электронном носителе (USB-флэш накопитель) в формате PDF и DWG (один из которых передается Подрядчику в соответствии с пунктами 5.3.2, 5.3.5 настоящего Договора, а два – в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего Договора). При подготовке и передаче исполнительной документации Подрядчику, Субподрядчик обязан руководствоваться требованиями, указанными в Приложении № 16 к настоящему Договору.

Согласно пункту 5.3.2 договора Субподрядчик не позднее 20 числа текущего месяца направляет Подрядчику ведомость выполненных работ (с расшифровкой по видам работ) для согласования объемов работ и включения их в акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) текущего месяца. Вместе с ведомостью выполненных работ Субподрядчик передает Подрядчику по акту приема-передачи исполнительную документацию в соответствии с пунктом 4.26 Договора (два экземпляра на бумажном носителе, один – на электронном носителе) на работы, включенные в ведомость выполненных работ.

По пункту 5.3.5. договора вместе с актами выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц Субподрядчик передает Подрядчику по акту приема-передачи: 

- Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, 

- счет, 

- счёт-фактуру, оформленную в строгом соответствии с п. 5 и 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ, 

-отчет об использовании давальческого материала (в случае использования давальческого материала), 

- полный комплект исполнительной документации в соответствии с пунктом 4.26 Договора на выполненные в отчетном месяце работы в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF и DWG (если исполнительная документация не была в полном объеме и надлежащим образом предоставлена вместе с ведомостью выполненных работ в соответствии с пунктом 5.3.2 Договора). 

Непредоставление указанных в настоящем пункте документов или предоставление документов, не соответствующих требованиями Договора, является основанием для отказа Подрядчика в рассмотрении и подписании актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и влечет применение к Субподрядчику штрафных санкций в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора.

В соответствии с пунктом 5.4.1 договора приемка работ по Договору производится после завершения Подрядчиком всех работ по настоящему Договору, подписания Подрядчиком ежемесячных актов КС-2 на полный объем работ по Договору, устранения всех недостатков, предоставления Субподрядчиком счетов-фактур на полную стоимость работ, выполненных по Договору, предоставления полного комплекта исполнительной документации в соответствии с пунктом 4.26 Договора, предоставления отчета об использовании давальческих материалов, передачи Подрядчику остатков давальческих материалов и подтверждается подписанием Сторонами Акта передачи результата работ (Приложение № 6 к Договору). 

По пункту 5.4.2 договора не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала предполагаемой приемки работ по настоящему Договору Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика о завершении работ и предполагаемой дате сдачи работ. Вместе с уведомлением Субподрядчик передает Подрядчику: - 3 (три) экземпляра исполнительной документации на бумажном и 2 (два) экземпляра на 2 (двух) электронных носителях (USB флэш накопитель) в отношении всех выполненных работ в соответствии с пунктом 4.26 Договора с подтверждением Субподрядчика соответствия переданной документации фактически выполненным работам; - Акт передачи результата работ по Договору в двух экземплярах, подписанный Субподрядчиком (по форме Приложения № 6 к Договору).

В силу пункта 5.2.1 договора скрытые работы подлежат освидетельствованию Подрядчиком, Генподрядчиком, Заказчиком перед производством последующих (закрывающих) работ с обязательным составлением акта об освидетельствовании скрытых работ. По ответственным конструкциям и отдельным системам (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства, водоснабжение, отопление, канализация, напорный трубопровод и др.) составляются акты приемки ответственных конструкций, акты испытаний и приемки систем по каждой системе в отдельности с участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Подрядчика. 

В соответствии с пунктом 5.2.2 договора об освидетельствовании скрытых работ, приемке ответственных конструкций, проведении испытаний конструкций, систем и приемке отдельных систем Субподрядчик извещает Подрядчика письменно не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих до даты освидетельствования/приемки/испытания с отметкой Подрядчика о получении уведомления.

ООО "ПРОФИТ" неоднократно направляло письма о не предоставлении материалов для выполнения работ, документации, отсутствие на объекте выполнения работ условий для их проведения: 047-001/24 от 30.01.2024, № 045-001/24 от 29.01.2024, № 392-012/23 от 15.12.2023, № 367-011/23 от 30.11.2023. № 361-011/23 от 25.11.2023.

Согласно п. 5.1. Договора в редакции, изложенной в Протоколе разногласий от 16.10.2023 к Договору, ответчик имеет право не приступать к выполнению работ в случае, если подрядчиком не выполнены обязанности по оплате аванса.

Как указывает ответчик, 01.02.2024 ООО "ПРОФИТ" направило уведомление № 053-002/24 от 01.02.2024 о приостановке работ по Договору. 

По пункту 1.4. договора Подрядчик на момент подписания Договора передал Субподрядчику всю необходимую для выполнения работ исходную документацию, в формате PDF, а именно чертежи 1-РД-ХС.ЭМ, 1-РД-ХС, 1-РД-КМ.ХС(листы 4.1-4.19) согласно перечню, указанному в Приложении № 1. Подрядчик обязуется передать Субподрядчику в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора всю необходимую для выполнения работ исходную документацию в формате DWG, а именно чертежи 1-РД-ХС.ЭМ, 1-РД-ХС, 1-РД-КМ.ХС(листы 4.1-4.19) Стороны осознают, что исходная документация подлежит корректировке, исключая корректировку объёмов работ. 2 Субподрядчик подтверждает, что ознакомился с исходной документацией, и сообщил Подрядчику о необходимости корректировки исходной документации.

Согласно Протоколу разногласий от 16.10.2023 к договору по пункту 3.4 договора ООО "ИГЛС" поставляет для производства работ и передает Субподрядчику в качестве давальческих все материалы и оборудование, необходимые для производства работ. Материалы передаются Субподрядчику с учётом норм расхода материалов, или по согласованному Сторонами количеству, обоснованному расчётом с учётом реального расхода и отходов. Материалы и оборудование, включая расходные материалы, используемые при выполнении работ по настоящему договору, принадлежат Генподрядчику на праве собственности или являются давальческими материалами Заказчика. 

Согласно графику, передаёт Субподрядчику строительную готовность и фронт работ на Объекте.

За свой счёт и своими силами подрядчик: 

- обеспечивает в зоне производства работ по Договору температурно-влажностный режим в соответствии с требованиями технологических процессов монтажа металлоконструкций и оборудования, сварочных работ металлоконструкций и трубопроводов, окраски металлоконструкций.

-предоставляет Субподрядчику электроэнергию (при этом электроснабжение строительной площадки происходит за счет Подрядчика, электроснабжение строительного городка - за счет Субподрядчика) и воду, включая точки подключения в зоне производства работ.

Между тем субподрядчик, ссылаясь на непредставление подрядчиком давальческих материалов для выполнения работ, строительной площадки, документации на оборудование и конструкции, исходной документации, не обеспечение в зоне монтажа температурно-влажностного режима, не подключение в зоне производства работ электроэнергии, а также на необходимость корректировки исходной документации согласно пункту 1.4 договора, т.е. при отсутствии на объекте выполнения работ условий для их проведения, заявил о выполнении работ на сумму 18 102 704,80 руб.

В силу пункта 1.2 договора Субподрядчик выполняет работы собственными силами и средствами. Стороны договорились, что работы будут выполняться из давальческих материалов/с использованием давальческого оборудования (далее вместе именуемые давальческие материалы), в этом случае Сторонами подписывается Приложение № 11 к Договору, которым стороны определят перечень и количество предоставляемых Подрядчиком Субподрядчику давальческих материалов, их стоимость, количество, нормативы расходования. Порядок предоставления давальческих материалов, использования, возврата давальческих материалов, ответственность за нарушением такого порядка, а также иные вопросы, связанные с предоставлением и использованием давальческих материалов стороны, урегулировали в Приложении № 14 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В материалы дела не представлены предусмотренные пунктами 5.3.5. и 5.4.1 договора документы, подтверждающие выполнение работ, в том числе, о передаче субподрядчику давальческих материалов.

Судом установлено, что ответчиком не представлено доказательств уведомления подрядчика о готовности согласованных в договоре работ к сдаче-приемке, как это установлено пунктом 5.4.2 договора. 

На основании изложенного, суд признает требования ООО "ИГЛС" о возврате неотработанного аванса правомерными в связи с недоказанностью ООО "ПРОФИТ" факта выполнения работ в заявленных объемах на испрашиваемую сумму. 

При этом суд исходит из того, что само по себе направление акта формы КС-2 не является самостоятельным доказательством выполнения спорных работ; 

На основании изложенного, требование о взыскании с ООО "ПРОФИТ" 20 000 000 неосновательного обогащения подлежит удовлетворению. 

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

По пункту 6.5. договора по окончании выполнения работ по Договору (в том числе в случае расторжения, приостановки работ по Договору), в иных случаях, установленных Договором, при которых предусматривается возврат незачтенного аванса, Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику незачтенный аванс в пятидневный срок.

Истец заявил требования о взыскании 751 912,57 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.02.2024 по 14.05.2024, с их начислением по день возврата неосновательного обогащения. 

Принимая во внимание, что о расторжении подрядчиком спорного договора с 09.02.2024 субподрядчик узнал после получения 27.02.2024 соответствующего уведомления, суд приходит к выводу о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами за просрочку возврата неосновательного обогащения с 04.03.2024. 

По состоянию на 14.05.2024 по расчету суда размер процентов составил 629 508,20 руб. 

При таких обстоятельствах, требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению на сумму 629 508,20 руб., с их начислением за период с 14.05.2024 по день возврата неосновательного обогащения, в удовлетворении остальной части суд отказывает. 

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПРОФИТ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИГЛС" (ИНН: 

<

***>) 20000000 руб. неосновательного обогащения, 629508,20 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.05.2024 по день возврата неосновательного обогащения, 126012 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

 

Судья                                                                                                    Косенко Т.А.