АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Воровского ул., дом 2, Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-28568/2024

24 октября 2024 г.

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булатова П.П., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Василовской М.Г.,  рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме Веб-конференции, по исковому  заявлению Специализированной некоммерческой организация-фонд «Региональный  оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Челябинской области», г. Челябинск, ОГРН: 1137400002585, ИНН: 7451990794, г.  Челябинск, ул. Образцова, 7 к обществу с ограниченной ответственностью «Вест»,  Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Шоферов, СООР, 5, помещ. 302, ОГРН:  1076670011660, ИНН: 6670170224,  

об обязании заключить дополнительное соглашение, 

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Вест», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

<

...> соор.  5, пом. 302 к СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области». ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, 

<

...>,  

об урегулировании разногласий при определении сроков выполнения  строительно-монтажных работ по договору подряда,  

при участии в судебном заседании 

представителя истца ФИО1, действующего на основании доверенности от  07.12.21, паспорт,  

представителей ответчика ФИО2, паспорт, действующего на основании  доверенности от 02.10.24, ФИО3, паспорт, действующего на основании  доверенности от 05.04.2024, представители ответчика ФИО4, паспорт,  действующей на основании доверенности от 12.03.2024,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования, встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Разрешить разногласия, возникшие при определении новых сроков выполнения  строительно-монтажных работ по договору подряда № 2300245/2-ПД/СРМ/ЛО-2023 от  16.06.2023, определив общий предельный срок (включающий этапы выполнения работ  (услуг) выполнения работ до 04.04.2025: «90 календарных дней с даты отключения  лифта, но не позднее 04.04.2025», изложив соответствующие пункты договора и  дополнительного соглашения в соответствующей редакции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем  подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья П.П. Булатова  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно  получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.arbitr.ru.