Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-111566/2019

30 декабря 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  12 декабря 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  30 декабря 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Дашковской С.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: закрытое акционерное общество "Северо-Западная инвестиционно-жилищная компания" (адрес:  Россия 187555, г Тихвин, Ленинградская обл, а/я 135; Россия 187555, г Тихвин, Ленинградская обл, тер Промплощадка, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго" (адрес:  Россия 196247, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

о взыскании денежных средств, 

при участии от истца ФИО2 (доверенность от 02.10.2019), от ответчика              ФИО3 (доверенность от 15.01.2019), 

установил:

Закрытое акционерное общество "Северо-Западная инвестиционно-жилищная компания" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к  публичному акционерному обществу энергетики и электрификации "Ленэнерго" о взыскании 12 011 826 руб. 56 коп. задолженности.

Ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования; представитель ответчика не высказал мотивированных возражений относительно их обоснованности.

Ходатайство ответчика об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора во внесудебном порядке с учетом мнения истца отклонено судом, поскольку стороны не лишены возможности заключить мировое соглашение на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Судом установлено, что истцом (заявитель) и ответчиком (сетевая организация)  заключен договор от 02.03.2009 № ОД-3796-08/18574-Э-08 (далее – Договор), по условиям которого сетевая организация в соответствии с действующим законодательством обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя к электрическим сетям по техническим условиям (далее - услуга), а заявитель - оплатить услугу в порядке и на условиях, предусмотренных договором (пункт 1.1 Договора).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора в редакции соглашения от 22.01.2018 сетевая организация обязалась выполнить следующие мероприятия по технологическому присоединению: 

I очередь:  

а)«подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование                     с системным оператором, а в случае выдачи технических условий электростанцией -согласование их с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

b)разработка сетевой организацией проектной документации согласнообязательствам, предусмотренным техническими условиями.

IIочередь:  

c) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

d) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети;

e) участие организации в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления;

IIIочередь:

f)  фактические   действия    но    присоединению   и    обеспечению   работы энергопринимающих устройств в электрической сети».

В соглашении от 22.01.2018 (далее – Соглашение) стороны подтвердили, что на момент обращения заявителя о неактуальности выполнения подпунктов Б и В II этапа по Договору заявитель произвел оплату услуг по Договору в размере 50 554 032 руб. 

В данном соглашении также установлено, что стоимость I этапа набора нагрузки в рамках выполнения I этапа по Договору  в размере 18 957 762 руб. закрыта Актом об оказании услуги по присоединению к электрической сети № 7635 от 30.05.2011.

Стоимость подпункта (Л) II этапа набора нагрузки в рамках выполнения II этапа по Договору в размере 7 161 821 руб. 20 коп. закрыта Актом об оказании услуги по присоединению к электрической сети №49091 от 29.12.2012.

Для подпунктов (Ь) и (В) II этапа выполнения технических условий стоимость оказания услуги сетевой организацией по I очереди составляет 410 795 руб. 70 руб. 

Сетевой организацией исполнены обязательства по  1 очереди пункта 3.1.6 для II этапа выполнения технических условий. 

Остальные обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.6. Договора по II и III очередям оказания услуги для II этапа выполнения технических условий, не исполненные на дату заключения соглашения, исполнению сетевой организацией не подлежат.

В связи с обращением заявителя о неактуальности выполнения подпунктов (Б) и (В) II этапа по Договору стороны пришли к согласию о выполнении обязательств по Договору с даты подписания Соглашения.

Оплата стоимости по I очереди, указанная в пункте 5 Соглашения, подлежит удержанию из суммы, уплаченной заявителем и указанной в пункте 2 Соглашения.

Как указано в пункте 10 Соглашения, денежные средства в размере 24 023 653 руб. 10 коп. сетевая организация возвращает заявителю в течение 6 (шести) месяцев с начала даты действия настоящего Соглашения равными долями.

В связи с исполнением ответчиком не в полном объеме обязательства по возврату денежных средств истцу в соответствии с пунктом 10 Соглашения, заявителем в адрес сетевой организации направлена претензия от 28.08.2019, оставление которой без удовлетворения послужило основанием для предъявления настоящего иска.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии              с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных  законом.

Доказательства надлежащего исполнения сетевой организацией обязательства, установленного пунктом 10 Соглашения, суду не представлены.

При таких обстоятельствах требования истца, обоснованные по праву и по размеру, подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с публичного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнерго" в пользу закрытого акционерного общества "Северо-Западная инвестиционно-жилищная компания" 12 011 826 руб. 56 коп. долга и 83 059 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Дашковская С.А.