Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

http://kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-8982/2023

«30»

октября

2023 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«23» 

октября

2023 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«30»

  октября

2023 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску предпринимателя ФИО2 к ООО «Строительная компания «ЗАПАД-СТРОЙ» о взыскании 2 547 568,54 рублей

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 лично 

от ответчика: н/я 

установил. 

Предприниматель ФИО2 обратилась в суд с иском к  обществу с ограниченной ответственностью ООО «Строительная компания «ЗАПАД-СТРОЙ» о взыскании по договору от 02.06.2022 года № 02/06-22 основного долга в сумме 2 315 971,4 рублей, неустойки в сумме 231 597,14 рублей.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании представитель истца уточнила требовании в части долга в связи с частичной оплатой. Просила взыскать долг в сумме 2 165 971,4 рублей. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению. 

Установлено. 

Требования истца обусловлены нарушением ответчиком обязательств по оплате работ, выполненных истцом по договору от 02.06.2022 года № 02/06-22 по оштукатуриванию известково-цементным раствором внутри задания объекта: «Строительство корпуса общеобразовательной школы № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде». 

Факт выполнения работ подтвержден подписанным сторонами актами от 27.06.2022 года № 1 на сумму 951 018 рублей, от 11.07.2022 года № 2 на сумму 941 997 рублей, от 14.07.2022 года № 3 на сумму 837 911,4 рублей, от 26.07.2022 года № 4 на сумму 728 562 рублей, от 05.08.2022 года № 5 на сумму 795 770 рублей, от 16.08.2022 года № 6 на сумму 977 616 рублей, от 03.10.2022 года № 7 на сумму 2 433 097 рублей, всего на сумму 7 665 971,4 рублей.

Ответчик оплатил работы в период с 03.06.2022 года по 12.04.2023 года на сумму 5 350 000 рублей и 08.08.2023 года еще 150 000 рублей.   

Доказательств оплаты долга в остальной сумме  ответчиком не представлено.

Согласно расчету истца за период с 12.07.2022 года по 08.04.2022 года по положениям пунктов 2.2.2, 7.1 договора от 02.06.2022 года № 02/06-22 подлежит уплате неустойка в сумме 231 597,14 рублей (10% от неоплаченной стоимости работ на 19.07.2023 года).

Расчет неустойки проверен судом, признан обоснованным.

Требования истца в заявленных суммах подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора. 

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ЗАПАД-СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) в пользу предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 320392600019354) основной долг в сумме 2 165 971,4 рублей, неустойку в сумме 231 597,14 рублей, расходы по госпошлине в сумме 34 988 рублей.

Возвратить  предпринимателю ФИО2 из Федерального бюджета госпошлину в сумме 750 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                          О.Н.Шкутко