АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-26575/22

29 мая 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "АИК" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "Фрихауз" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  взыскании 500 350 653 рублей,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  временного управляющего ООО «АиК» ФИО2, ООО «Строительная  компания «Анкер», акционерный коммерческий банк "Пересвет" (публичное акционерное  общество) (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

встречный иск общества с ограниченной ответственностью "Фрихауз" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "АИК"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) об обязании,  

 Руководствуясь статьями пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "АИК" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) оставить без рассмотрения.  

По встречному иску: 

Обязать ООО «АиК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 10  рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу передать по акту ООО  «Фрихауз» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) в отношении объекта  незавершенного строительства «Административное здание с подземной автостоянкой по  ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону (III очередь ГФК «Сиверса») по адресу: 

<

...>, 12, 14, пер. Доломановский, 45в, 45г:  

Проектную документацию стадии П и РД (проект и рабочая документация со  сметой) с подписями лиц, ответственных за разработку, согласование и утверждение,  оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской  Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к  проектной и рабочей документации"  

Общий журнал работ КС-6; 

Специальные журналы работ; Журнал авторского надзора; 

Приказ ООО «АиК» № 17 от 11.03.2020 о назначении производителем работ  ФИО3  

Приказ ООО «АиК» № К2/1 от 01.07.2019 о назначении производителем работ  ФИО4  

Приказ ООО «АиК» № 20190809 от 09.08.2019 о назначении ответственным за  выполнение авторского надзора Матвей ко Р. Б.  

Приказ ООО «АиК» № 20191101-3 от 01.11.2019 о назначении ответственным за  выполнение авторского надзора ФИО5,  

Приказ ООО «АиК» № 20191011 -2 от 11.10.2019 о назначении начальника участка  ФИО6 представителем ООО «АиК» по вопросам строительного контроля,  являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный  реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре)  

Приказ ООО «АиК» № 20190701 от 01.07.2019 о назначении начальника участка  ФИО6 представителем ООО «АиК» по вопросам строительного контроля,  являющегося специалистом по организации строительства, включенным в национальный  реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в реестре)  

Приказ ООО «АиК» № 20190701 /01 от 01.07.2019 о назначении главным  инженером проекта ООО "АиК" ФИО4, являющегося специалистом по  организации строительства, включенным в национальный реестр специалистов (с  указанием идентификационного номера в реестре)  

Приказ ООО «АиК» № 2 от 01.07.2019 о назначении главным инженером проекта  ФИО7, являющегося специалистом по организации строительства, включенным  в национальный реестр специалистов (с указанием идентификационного номера в  

реестре).  

Приказ ООО "СК Анкер" № 04/19 от 12.11.2019 о назначении техническим  директором ФИО8  

Подписанную со стороны ООО «АИК»: представителем лица, осуществляющего  строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам  строительного контроля, представителем лица, осуществившего подготовку проектной  документации, представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего  

Дополнительная документация по акту № 1 КС-2 «Подготовительные работы» 

Номер акта дата акта  Работы, предъявленные к освидетельствованию  освидетельствования освидетельствования  

КЖ-31 15.04.2020 вырезание проемов в ж.б. конструкциях в -1, -2, -3 этаже 18  

проемов размеров 1300x2250. Длина реза 255.6м, бурение 

круглых отверстий -288 шт. 

КЖ-32 02.05.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (1 этаж)  КЖ-33 17.05.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (2 этаж)  КЖ-34 31.05.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (3 этаж)  

КЖ-35 14.06.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (4 этаж)  КЖ-36 28.06.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (5 этаж)  КЖ-37 17.07.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (6 этаж)  

КЖ-38 27.07.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (7 этаж) 

КЖ-39 11.08.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (8 этаж)  КЖ-40 26.08.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (9 этаж)  КЖ-41 10.09.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (10 этаж)  

КЖ-42 25.09.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (10 этаж) 

КЖ-43 11.10.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (11 этаж)  КЖ-44 26.10.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (12 этаж)  

КЖ-45 11.11.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (14 этаж)  КЖ-46 26.11.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (15 этаж)  

КЖ-47 12.12.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (16 этаж)  КЖ-48 26.12.2020 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (17 этаж)  КЖ-49 21.01.2021 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (18 этаж)  КЖ-50 30.01.2021 вырезание отверстий в ж.б. конструкциях (19 этаж)  

КЖ-51 16.02.2021 очистка лифтовых шахт с погрузкой и вывозом боя бетона  

 

работы, подлежащие освидетельствованию, исполнительную документацию к актам № 1-12  КС-2, в следующем составе:  

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

Исполнительная схема расположения отверстий (1 этаж) 

12 

Исполнительная схема расположения отверстий (2 этаж) 

13 

Исполнительная схема расположения отверстий (3 этаж) 

14 

Исполнительная схема расположения отверстий (4 этаж) 

15 

Исполнительная схема расположения отверстий (5-8 этаж) 

16 

Исполнительная схема расположения отверстий (9-19 этаж) 

17 

Исполнительная документация к акту № 2 КС-2 «Общестроительные работы.  Подземная часть (ниже отм. 0.000)» ______________________________________________________  

Номер, дата акта освидетельствования 

 

Работы, предъявленные к освидетельствованию 

 

АР-15 

20.02.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б плиты перекрытия с потолочной стороны на 

отм. -7.660 (-3 этаж) в осях 2-8 

 

АР-16 

28.01.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б плиты перекрытия с потолочной стороны на 

отм. -4.360 (-2 этаж) в осях 2-11 

 

АР-17 

28.01.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. -4.360 (-2 этаж) в осях 2-11  

 

АР-18 

21.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б плиты перекрытия с потолочной стороны на 

отм. -0.850 (-1 этаж) в осях 1-8 

 

АР-19 

30.04.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б плиты перекрытия с потолочной стороны на 

отм. -0.850 (-1 этаж) в осях 2-10/Б-И 

 

АР-40 

03.11.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. - 10.230 (-3 этаж)  

 

АР-41 

05.11.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. - 7.260 (-2 этаж)  

 

АР-42 

11.11.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. - 3.960 (-1 этаж)  

 

АР-62 

15.11.2019  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. - 10.230, - 3 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

 

АР-63 

17.11.2019  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. - 7.260, - 2 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

 

АР-64 

21.11.2019  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. - 3.960, - 1 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

 

АР-84 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. - 10.230  (-3 этаж) в осях 7-8  

 

АР-85 

06.05.2020  

оштукатуривание стен на отм. - 10.230 (-3 этаж) в осях 7-8 

 

АР-86 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. - 7.260 (- 2 этаж) в осях 7-8  

 

АР-87 

06.05.2020  

оштукатуривание стен на отм. - 7.260 (-2 этаж) в осях 7-8 

 

АР-88 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. - 7.260 (- 2 этаж) в осях 7-8  

 

АР-89 

06.05.2020  

оштукатуривание стен на отм. - 3.960 (-1 этаж) в осях 1-9 

 

КЖ-1 

02.10.2019  

устройство опалубка для заделки отверстий в плитах перекрытий от отм. -0.500, - 4.060,  - 7.350 (S=27M2)  

 

КЖ-2 

04.10.2019  

армирование заделываемых отверстий в плитах перекрытий на отм. - 0.500, -4.060, -  7.350  

 

КЖ-3 

09.11.2019  

бетонирование заделываемых отверстий в плитах перекрытий на отм. - 0.500, -4.060, - 7.  350  

 

КЖ-4 

12.10.2019  

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности  

 

КЖ-5 

12.09.2019  

армирование цокольного пояса под витражные конструкции на отм. -0.500  

 

КЖ-6 

09.10.2019  

устройство инвентарной опалубки цокольного пояса под витражные  конструкции на отм. -0,500  

 

КЖ-7 

09.11.2019  

бетонирование цокольного пояса под витражные конструкции на отм. -0,500  

 

КЖ-8 

11.11.2019  

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности  

 

КЖ-9 

13.12.2019  

армирование парапета по плите стилобата на отм. -0.500 

 

КЖ-10  

12.02.2020  

устройство инвентарной опалубки парапета на плите стилобата на отм. -.0.500 

 

КЖ-11  

31.03.2020  

бетонирование парапета по плите стилобата на отм. -0.500 

 

КЖ-12  

08.05.2020  

демонтаж участков плат перекрытий на отм. +33.550, +43.350 

 

#Проект 

КЖ-19 

22.04.2020  

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности  

КЖ-20 

11.05.2020  

песчаное основание пандусов и въездной площадки 

КЖ-21 

23.05.2020  

устройство инвентарной опалубки пандусов и въездной площадки  

КЖ-22 

01.06.2020  

армирование пандусов и съездной площадки 

КЖ-23 

03.06.2020  

бетонирование пандусов и въездной площадки 

КЖ-24 

22.04.2020  

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности  

КЖ-25 

10.05.2020  

устройство монолитных и монтаж сборных конструкций вентиляционной камеры  

КЖ-26 

27.05.2020  

гидроизоляция конструкций вентиляционной камеры 

КЖ-27 

22.04.2020  

акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности  

КЖ-28 

23.05.2020  

устройство инвентарной опалубки на отм. -3, 185 в осях 5-7 по оси К  

КЖ-29 

01.06.2020  

армирование площадки на отм. -3, 185 в осях 5-7 по оси К 

КЖ-30 

03.06.2020  

бетонирование площадки на отм. 3, 185 на осях 5.7 по оси К  

Наименование исполнительной схемы  

Лист № 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм. - 7.660 (-3 этаж)  

15 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм. - 4.360 (-2 этаж)  

16 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм. - 0.850 (-1 этаж)  

17 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков и кирпичных перегородок на отм. -10.230 (-3 

этаж) 

37 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков и кирпичных перегородок на отм. -7.260 (-2 

этаж.) 

38 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков и кирпичных перегородок на отм. -3.390 (-1 

этаж) 

39 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. - 10.230 (-3 этаж) 

59 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. - 7.260 (-2 этаж) 

60 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. - 3.960 (-1 этаж) 

61 

Исполнительная схема закрытия существующих монтажных крановых проемов в плитах перекрытий  на отм. - 0.500: - 4.060: - 7.350  

1 

Исполнительная схема монтажа цокольного пояса под витражные контракции на отм. -0.500  

2 

Исполнительная схема устройства парапета по плите стилобата на отм. 0.500  

3 

Исполнительная схема демонтажа участков плит на отметках +33.550, +43.350  

4 

Исполнительная схема устройства пандусов въездной площадки 

9 

Исполнительная схема устройства наружной вентиляционной камеры у осей 11/А  

10 

Исполнительная схема устройства площадки на отм. - 3.185 в осях 5-7 по оси К  

11 

Наименование исполнительной схемы  

Лист № 

Исполнительная схема расположения отверстий (1 этаж) 

12 

Исполнительная схема расположения отверстий (2 этаж) 

13 

Исполнительная схема расположения отверстий (3 этаж) 

14 

Исполнительная схема расположения отверстий (4 этаж) 

15 

Исполнительная схема расположения отверстий (5-8 этаж) 

16 

Исполнительная схема расположения отверстий (9-19 этаж) 

17 

Исполнительная документация к акту № 3 КС-2 «Общестроительные работы.  

Надземная часть (выше отм. 0.000)»  

 Номер/дата акта Работы, предъявленные к освидетельствованию 

освидетельствования 

АР-1 23.08.2019 установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +8.400, 3 этаж в осях 39/В/1-Е/1  

АР-2 23.08.2019 установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +12.300, 4 этаж в осях 39/В/1-Е/1  

АР-3 26.08.2019 установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +16.200, 5 этаж в осяхЗ- 

9/B/l-E/l 

АР-4 03.09.2019 установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +20.100, 6 этаж в осях 39/В/1-Е/1  

АР-5 12.09.2019 установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +24.000, 7 этаж в осях 39/В/1-Е/1  

 

АР-6 

16.08.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +27.900, 8 этаж в осях 39/В/1-Е/1 

АР-7 

11.10.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +31.800, 9 этаж в осяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-8 

11.10.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +35.700, 10 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-9 

10.10.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +39.600, 11 этаж в осях 39/В/1-Е/1 

АР-10 

18.10.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +43.500, 12 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-11 

29.10.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +47.400, 13 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-12 

01.11.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +51.300, 14 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-13 

13.11.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +55.200, 15 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-14 

22.11.2019  

установка каркаса для гипсокартонных перегородок на отм. +59.100, 16 этаж восяхЗ-

9/B/l-E/l 

АР-20 

10.04.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 0.000 (1 этаж) в осях 2-10/В-Ж 

АР-21 

14.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 4.500 (2 этаж) в осях 2-10/В-Ж 

АР-22 

14.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 8.400 (3 этаж) в осях 1-11/В-Ж 

АР-23 

14.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 12.300 (4 этаж) в осях 111/В-Ж 

АР-24 

23.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 16.200 (5 этаж) в осях 111/В-Ж 

АР-25 

28.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 20.100 (6 этаж) в осях 111/В-Ж 

АР-26 

02.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 24.000 (7 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-27 

05.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 27.900 (8 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-28 

10.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 31.800 (9 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-29 

15.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 35.700 (10 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-30 

15.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 35.700 (10 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-31 

17.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 39.600 (11 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-32 

19.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 43.500 (12 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-33 

23.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 47.400 (13 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-34 

23.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 51.300 (14 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-35 

23.05.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 55.200 (15 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-36 

02.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 59.100 (16 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-37 

09.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 63.000 (17 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-38 

16.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 66.900 (18 этаж) в осях 111/В-Ж  

АР-39 

23.06.2020  

устройство огнезащитного покрытия ж/б колонн на отм. + 70.800 (19 этаж) в осях 111/В-Ж  

 

АР-43  

06.03.2020  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +0.000, 1 этаж  

АР-44  

14.09.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм.+ 4.500, 2 этаж  

АР-45  

24.08.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм.+ 8.400, 3 этаж  

АР-46 

09.08.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +12.300, 4 этаж  

АР-47 

04.09.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +16.200, 5 этаж  

АР-48 

13.08.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +20.100, 6 этаж  

АР-49 

24.09.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +24.000, 7 этаж  

АР-50 

03.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +27.900, 8 этаж  

АР-51 

11.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +31.800, 9 этаж  

АР-52 

16.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +35.700, 10 этаж  

АР-53 

23.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +39.600, 11 этаж  

АР-54 

26.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +43.500, 12 этаж  

АР-55 

28.10.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +47.400, 13 этаж  

АР-56 

05.12.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +51.300, 14 этаж  

АР-57 

12.12.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +55.200, 15 этаж  

АР-58 

14.12.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +59.100, 16 этаж  

АР-59 

18.12.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +63.000, 17 этаж  

АР-60 

24.12.2019  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +66.900, 18 этаж  

АР-61 

12.02.2020  

монтаж стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +70.800, 19 этаж  

АР-65 

02.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. 0.000, 1 этаж, в осях 48/Г-Е 

АР-66 

03.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +4.500, 2 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-67 

06.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +8.400, 3 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-68 

07.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +12.300, 4 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-69 

08.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/ кирпича на отм. +16.200, 5 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-70 

08.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +20.100, 6 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-71 

10.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +24.000, 7 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-72 

13.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм.+ 27.900, 8 этаж, в осях 

4-8/Г-Е 

АР-73 

15.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +31.800, 9 этаж, в осях  4-8/Г-Е  

АР-74 

16.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +35.700, 10 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-75 

21.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +39.600, 11 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-76 

23.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +43.500, 12 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-77 

27.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +47.400, 13 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-78 

29.04.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +51.300, 14 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-79 

21.02.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +55.200, 15 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-80 

22.02.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +59.100, 16 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-81 

27.02.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +63.000, 17 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-82 

28.02.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +66.9000, 18 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-83 

26.02.2020  

кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича на отм. +70.8000, 19 этаж, в  осях 4-8/Г-Е  

АР-90  

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. 0.000  (1 этаж) в осях 4-8  

АР-91 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. 0.000 (1 этаж) в осях 4-8 

 

АР-92 

06.05.2020  

монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. 0.000(1  этаж), в осях 4-8  

АР-93 

06.05.2020  

оштукатуривание стен ц/п штукатуркой на отм. 0.000 (1 этаж) в осях 4-8 

АР-94 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +4.500

(2 этаж) в осях 4-8 

АР-95 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +4.500 (2 этаж) в осях 4-8  

АР-96 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +4.500 (2

этаж), в осях 4-8 

АР-97 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +8.400

(3 этаж) в осях 4-8 

АР-98 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +8.400 (3 этаж) в осях 4-8  

АР-99 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +8.400 (3

этаж), в осях 4-8 

АР-100 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +12.400

(4 этаж) в осях 4-8 

АР-101 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +12.300 (4 этаж) в осях 4-8  

АР-102 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. + 12.300 (4

этаж), в осях 4-8 

АР-ЮЗ 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +16.200

(5 этаж) в осях 4-8 

АР-104 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +16.200 (5 этаж) в осях 4-8  

АР-105 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. + 16.200 (5

этаж), в осях 4-8 

АР-106 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +20.100

(6 этаж) в осях 4-8 

АР-107 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +20.100 (6 этаж) в осях 4-8  

АР-108 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +20.100 (6

этаж), в осях 4-8 

АР-109 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +24.000

(7 этаж) в осях 4-8 

АР-ПО 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +24.000 (7 этаж) в осях 4-8  

АР-111 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +24.000 (7

этаж), в осях 4-8 

АР-112 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.

+27.900 (8 этаж) в осях 4-8 

АР-113 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +27.9000 (8 этаж) в осях 4-8  

АР-114 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +27.900 (8

этаж), в осях 4-8 

АР-115 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.

+31.800 (9 этаж) в осях 4-8 

АР-116 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +31.800 (9 этаж) в осях 4-8  

АР-117 

06.05.2020 

 монтаж стальной сетки для оштукатуривания стен ц/п штукатуркой на отм. +31.800 (9

этаж), в осях 4-8 

АР-118 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.

+35.700 (10 этаж) в осях 4-8 

АР-119 

06.05.2020 

 оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +35.700 (10 этаж) в осях 4-8  

АР-120 

06.05.2020 

 монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +39.600

(11 этаж) в осях 4-8 

АР-121 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +39.600 (11 этаж) в осях 4-8  

АР-122 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. +43.500 (12 этаж) в осях 4-8  

АР-123 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +43.500 (12 этаж) в осях 4-8  

АР-124 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. 

+47.400 (13 этаж) в осях 4-8 

АР-125 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +47.400 (13 этаж) в осях 4-8  

АР-126 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. 

+51.300 (14 этаж) в осях 4-8 

АР-127 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +51.300 (14 этаж) в осях 4-8  

АР-128 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм. 

+55.200 (15 этаж) в осях 4-8 

 

АР-129 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +55.200 (15 этаж) в осях 4-8  

АР-130 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.  +59.100 (16 этаж) в осях 4-8  

АР-131 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +59.100 (16 этаж) в осях 4-8  

АР-132 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.  +63.000 (17 этаж) в осях 4-8  

АР-133 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +63.000 (17 этаж) в осях 4-8  

АР-134 

06.05.2020  

монтаж маяков и грунтование поверхностей для оштукатуривания стен на отм.  +66.900 (18 этаж) в осях 4-8  

АР-135 

06.05.2020  

оштукатуривание гипсовой штукатуркой стен на отм. +66.900 (18 этаж) в осях 4-8  

Наименование исполнительной схемы 

Лист №  

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +8.400 (3 этаж)  

1 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +12.300 (4 этаж)  

2 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +16.200 (5 этаж)  

3 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +20.100 (6 этаж)  

4 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +24.000 (7 этаж)  

5 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +27.900 (8 этаж)  

6 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +31.800 (9 этаж)  

7 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +35.700 (10 этаж)  

8 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +39.600 (11 этаж)  

9 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +43.500 (12 этаж)  

10 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +47.400 (13 этаж)  

11 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +51.300 (14 этаж)  

12 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +55.200 (15 этаж)  

13 

Исполнительная схема монтажа каркаса гипсокартонных перегородок на отм. +59.100 (16 этаж)  

14 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.0.000 (1 этаж)  

18 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.4.500 (2 этаж)  

19 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.8.400 (3 этаж)  

20 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм. 12.300 (4 этаж)  

21 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм. 16.200 (5 этаж)  

22 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.20.100 (6 этаж)  

23 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.24.000 (7 этаж)  

24 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.27.900 (8 этаж)  

25 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.31.800 (9 этаж)  

26 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.35.700 (10 этаж)  

27 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.39.600 (11 этаж)  

28 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.43.500 (12 этаж)  

29 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.47.400 (13 этаж)  

30 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.51.300 (14 этаж)  

31 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.55.200 (15 этаж)  

32 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.59.100 (16 этаж)  

33 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.63.000 (17 этаж)  

34 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.66.900 (18 этаж)  

35 

Исполнительная схема монтажа огнезащитных плит на отм.70.800 (19 этаж)  

36 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм +0 ООО 1 этаж  

40 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм + 4 500 2 этаж  

41 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм +8 400 3 этаж  

42 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +12.300, 4 этаж  

43 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +16.200, 5 этаж  

44 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +20.100, 6 этаж  

45 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +24.000, 7 этаж  

46 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +27.900, 8 этаж  

47 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +31.800, 9 этаж  

48 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +35.700, 10 этаж  

49 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +39.600, 11 этаж  

50 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +43.500, 12 этаж  

51 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +47.400, 13 этаж  

52 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +51.300, 14 этаж  

53 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +55.200, 15 этаж  

54 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +59.100, 16 этаж  

55 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +63.000, 17 этаж  

56 

 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +66.900, 18 этаж  

57 

Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +70.800, 19 этаж  Исполнительная схема монтажа стеновых фахверков для кирпичной кладки на отм. +74.620, 20 этаж  

58 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +0.000, 1 этаж 

62 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм.+ 4.500, 2 этаж 

63 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +8.400, 3 этаж 

64 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +12.300, 4 этаж 

65 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +16.200, 5 этаж 

66 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +20.100, 6 этаж 

67 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +24.000, 7 этаж 

68 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +27.900, 8 этаж 

69 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +31.800, 9 этаж 

70 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +35.700, 10 этаж 

71 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +39.600, 11 этаж 

72 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +43.500, 12 этаж 

73 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +47.400, 13 этаж 

74 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +51.300, 14 этаж 

75 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +55.200, 15 этаж 

76 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +59.100, 16 этаж 

77 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +63.000, 17 этаж 

78 

Исполнительная схема оштукатуривания на отм. +66.900, 18 этаж 

79 

Исполнительная документация к акту № 4 КС-2 «Силовое оборудование» 

 Акт технической готовности электромонтажных работ Работы, предъявленные к освидетельствованию  

ЭП-1 

31.07.2021 

Установка оборудования: РУ-1 ОкВ/комплект ВКУ  (ячейки в количестве 12 шт.), ГРЩ -1 в количестве 10  

ячеек, силовых сухие трансформаторов ТЛС в  количестве 2 шт.  

 

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

Исполнительная схема № 1 План расположения оборудования 

1 

Исполнительная документация к акту № 5 КС-2 «Наружные сети теплоснабжения» 

Номер, дата акта освидетельствования 

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

 

ТС-1 

16.03.2020  

разработка траншеи (выемка V=67,4 мЗ) и котлована (выемка V=215, 79 мЗ) для 

прокладки наружных тепловых сетей и установка тепловой камеры и дренажного  колодца  

 

ТС-2 

17.03.2020  

подготовка основания под трубопроводы, посылка песка в траншею под трубопроводы 

V=12M3 

 

ТС-2.1 

19.03.2020  

монтаж гибкой гофрированной двустенной трубы dl 10 мм для защиты существующих 

кабелей в зоне прохождения теплотрассы 

 

ТС-3 

18.03.2020  

прокладка трубопроводов 

 

ТС-4 

21.03.2020  

монтаж неподвижных опор 

 

ТС-5 

22.03.2020  

заделка сварных стыков трубопроводов в ППУ изоляции 

 

ТС-6 

24.03.2020  

ревизия и испытание арматуры 

 

ТС-7 

24.03.2020  

акт на герметизацию мест прохода через стенки колодцев и камер  

 

ТС-8 

25.03.2020  

обратная засыпка трубопроводов 

 

ТС-9 

25.03.2020  

Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов 

 

ТС-10 

25.03.2020  

Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность  

 

КЖ-13 

12.03.2020  

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности  

 

КЖ-14 

12.03.2020  

Акт освидетельствования и приемки котлована 

 

КЖ-15 

12.03.2020  

Песчаное основание тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодка ДК-1  

 

КЖ-16 

10.05.2020  

Сборные конструкции тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодца ДК-1 

 

КЖ-17 

27.05.2020  

Металлические конструкции тепловой камеры ТК-1 

 

КЖ-18 

27.05.2020  

Гидроизоляция сборных конструкций тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодца ДК-1  

 

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

Исполнительная схема монтажа теплосети 

1 

Исполнительная схема сварных стыков теплосети. Профиль теплосети  

2 

Исполнительная схема монтажа гофрированной трубы для защиты существующих кабелей в зоне прохождения теплотрассы 

3 

Исполнительная схема котлована тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодца ДК-1  

5 

 

Исполнительная схема песчаного основания тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодца ДК-1  

6 

Исполнительная схема сборных конструкций тепловой камеры ТК-1 и дренажного колодца ДК-1  

7 

Исполнительная схема металлических конструкций тепловой камеры ТК-1  

8 

исполнительная документация к акту № 6 КС-2 «Фасад здания» 

Номер, дата акта 

освидетельствования  

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

 

КМ-1 

20.12.2020  

устройство стоечно-ригельного фасада от отм. 0.000 до отм. +8.020  

 

КМ-2 

18.08.2020  

устройство узла примыкания фасада на отм. + 0.000. 

 

КМ-3 

04.10.2020  

устройство узла примыкания фасада на отм. +4.500 

 

КМ-4 

24.11.2020  

устройство межэтажной противопожарной рассечки на отм. +4.500  

 

КМ-5 

14.11.2020  

установка спейсера 

 

КМ-6 

10.12.2020  

гидроизоляционные работы 

 

КМ-7 

13.12.2020  

окраска отдельных элементов 

 

КМ-8 

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 8.400 (3 этаж) сверление 

отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

КМ-9 

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 12.300 (4 этаж) сверление  отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

КМ-10  

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 16.200 (5 этаж) сверление  отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

КМ-11  

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 20.100 (6 этаж) сверление  отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

КМ-12  

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 24.000 (7 этаж) сверление  отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

КМ-13  

26.02.2021  

установка кронштейнов для элементного фасада на отм. 27.900 (8 этаж) сверление  отверстий в бетоне под анкера, монтаж кронштейнов под остекление  

 

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 8.400 (3 этаж)  

1 

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 12.300 (4 этаж)  

2 

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 16.200 (5 этаж)  

3 

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 20.100 (6 этаж)  

4 

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 24.000 (7 этаж)  

5 

Исполнительная схема установки кронштейнов для элементного фасада на отм. 27.900 (8 этаж)  

6 

Исполнительная схема установки стоечно-ригельного фасада от отм. 0.000 (1 этаж)  

7 

Исполнительная схема установки стоечно-ригельного фасада от отм. 4.500 (2 этаж)  

8 

Исполнительная схема установки стоечно-ригельного фасада В1-В6, R1-R2  

9 

Исполнительная документация к акту № 7 КС-2 «Автоматическая установка  

пожаротушения (АУ  

ПТ)» 

Номер, дата акта  освидетельствования  

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

АУПТ-01  

13.09.2019  

подготовка поверхности металлических труб под покраску (зачистка поверхности, 

обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка) - 2365,3 м2 

АУПТ-02  

24.09.2019  

покраска наружной поверхности металлических огрунтованных труб - 2365,3 м2  

АУПТ-1 

13.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на -3 этаж (отм. -10.230) 

АУПТ-2 

27.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на -2 этаж (отм. -7.260) 

АУПТ-3 

28.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на -1 этаж (отм. -3.960) 

АУПТ-4 

13.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 1 этаже (отм. 0.000) 

АУПТ-5 

17.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 2 этаже (отм. 4.500) 

АУПТ-6 

19.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 3 этаже (отм. 8.400) 

АУПТ-7 

26.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 4 этаже (отм. 12.300) 

АУПТ-8 

26.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 5 этаже (отм. 16.200) 

АУПТ-9 

17.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 6 этаже (отм. 20.100) 

АУПТ-10  

30.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 7 этаже (отм. 24.000) 

АУПТ-11  

31.03.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 8 этаже (отм. 27.900) 

АУПТ-12  

04.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 9 этаже (отм. 31.800) 

АУПТ-13  

07.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 10 этаже (отм. 35.700) 

АУПТ-14  

12.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 11 этаже (отм. 39.600) 

АУПТ-15  

17.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 12 этаже (отм. 43.500) 

АУПТ-16  

20.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 13 этаже (отм. 47.400) 

АУПТ-17  

21.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 14 этаже (отм. 51.300) 

 

АУПТ-18  

24.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 15 этаже (отм. 55.200) 

АУПТ-19  

11.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 16 этаже (отм. 59.100) 

АУПТ-20  

27.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 17 этаже (отм. 63.000) 

АУПТ-21  

16.04.2020  

монтаж трубопроводов АУПТ на 18 этаже (отм. 66.900) 

АУПТ-22  

27.03.2020  

монтаж стояков системы АУПТ в осях 4-5/Г-Д 

Наименование исполнительной схемы  

Лист № 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на -3 этаж (отм. -10.230)  

1 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на -2 этаж (отм. -7.260)  

2 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на -1 этаж (отм. -3.960)  

3 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 1 этаже (отм. 0.000)  

4 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 2 этаже (отм. 4.500)  

5 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 3 этаже (отм. 8.400)  

6 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 4 этаже (отм. 12.300)  

7 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 5 этаже (отм. 16.200)  

8 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 6 этаже (отм. 20.100)  

9 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 7 этаже (отм. 24.000)  

10 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 8 этаже (отм. 27.900)  

11 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 9 этаже (отм. 31.800)  

12 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 10 этаже (отм. 35.700)  

13 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 11 этаже (отм. 39.600)  

14 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 12 этаже (отм. 43.500)  

15 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 13 этаже (отм. 47.400)  

16 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 14 этаже (отм. 51.300)  

17 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 15 этаже (отм. 55.200)  

18 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 16 этаже (отм. 59.100)  

19 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 17 этаже (отм. 63.000)  

20 

Исполнительная схема прокладки трубопроводов АУПТ на 18 этаже (отм. 66.900)  

21 

Исполнительная изометрическая схема стояков системы АУПТ 22  

 

Исполнительная документация к акту № 8 КС-2 «Внутренние сети водоснабжения» 

Номер акта  освидетельствования  

дата акта  освидетельствования  

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

 

ВК-1 

16.09.2020  

монтаж стояков внутреннего водопровода 

 

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

План этажей (1эт. - 19 эт.) с прокладкой стояков водоснабжения 

1 

Схема стояков В1-4, В 1.1-4 

2 

Исполнительная документация к акту № 9 КС-2 «Внутренние внутренняя ливневая канализация» 

Номер акта  освидетельствования  

дата акта  освидетельствования  

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

 

ВК-6 

06.03.2020  

монтаж трубопроводов внутренней ливневой канализации  на отм. -3.960 (-1 этаж)  

 

ВК-7 

04.03.2020  

монтаж трубопроводов внутренней канализации на отм.  0.000 (1 этаж)  

 

ВК-8 

20.02.2020  

монтаж трубопроводов внутренней канализации со 2 по 16  этаж  

 

ВК-9 

28.02.2020  

монтаж трубопроводов внутренней канализации на 17,18,19  этажах  

 

Наименование исполнительной схемы  

Лист №  

Внутренний водосток. План на отм. 3,960 (-1 этаж) с системой К2  

1 

Внутренний водосток. План на отм. 0,000 (1 этаж) с системой К2  

2 

Исполнительная документация к акту № 10 КС-2 «Внутренний противопожарный 

водопровод» _________________________________________________________________________________________  

Номер акта  освидетельствования  

дата акта  освидетельствования  

Работы, предъявленные к освидетельствованию  

вк-з 

09.06.2020  

монтаж трубопровода внутреннего противопожарного 

водопровода на отм. 0.000 (1 этаж) 

ВК-4 

19.06.2020  

монтаж вертикальных стояков внутреннего  

 

противопожарного водопровода с 2 по 19 этаж  

ВК-5 

09.06.2020 

монтаж трубопровода внутреннего противопожарного водопровода на отм. - 3.900 (-1-й этаж) 

Наименование исполнительной схемы 

 

Водопровод противопожарный. План 1 эт. на отм. 0.000 с системой противопожарного водопровода  

 

Водопровод противопожарный. План на отм. +4.500 (2 эт.) - +35.700 (10 эт.) с системой противопожарного  

водопровода 

 

Водопровод противопожарный. План на отм. +39.600 (11 эт.) - +63.000 (17 эт.) с системой противопожарного  

водопровода 

 

Водопровод противопожарный. План на отм. +66.900 (18 эт.) - +70.800 (19 эт.) с системой 

противопожарного водопровода 

 

Водопровод противопожарный. План на отм. -3.900 (-1 эт.) с системой противопожарного водопровода  

 

Исполнительная документация к акту № 11 КС-2 «Наружные сети электроснабжения» 

Номер акта дата акта  Работы, предъявленные к освидетельствованию  

освидетельствования освидетельствования 

 Реестр исполнительной документации  Журнал прокладки кабелей 

ЭС-1 20.03.2020 монтаж подвески (прогонов, траверс, тяжей, опорных  частей) коробов для зашиты существующих кабелей  

ЭС-2 30.03.2020 разработка грунта (траншея ТК1-Т9) под прокладку кабеля  сети наружного электроснабжения в объеме 70.2 ммЗ  

ЭС-3 31.03.2020 устройство песчанового основания (песчаной "подушки" -  слой из песка 150 мм) дня траншеи ТК1 с послойной  утрамбовкой под прокладку кабеля сети наружного  электроснабжения  

ЭС-4 30.03.2020 Траншея ТК1 для прокладки кабелей наружного  электроснабжения  

ЭС-5 08.04.2020 Укладка в траншею жесткой двустенной гофрированной  трубы ПНД D-200мм, прокладка (протяжка) кабеля кабеля  АПвПУ2г-1x630/70 в траншее ТК1 в жёсткой  гофрированной двустенной трубе ПНД D=200 мм  

 

ЭС-6 

08.04.2020 

Осмотр кабельной канализации в траншеях и каналах 

перед закрытием 

ЭС-7 

13.04.2020 

Демонтаж подвески коробов для защиты существующих 

кабелей, трубопроводов 

ЭС-8 

13.04.2020 

обратная засыпка траншеи ТК1 с трубами и кабелями 

песком с послойным трамбованием 

ЭС-9 

15.04.2020 

Обратная засыпка траншеи ТК1 с проложенными с ней  трубами и кабелями грунтом из траншеи с послойным  трамбованием, защита на поворотах кабелей плитами ПЗК  

ЭС-10 

16.04.2020 

Герметизация (заделка) кабельных проходок через стены  

КЖ-52 

16.04.2020 

Очистка изолируемой поверхности фундамента после  прокладки сетей электроснабжения, 1,4м.кв.  

КЖ-53 

17.04.2020 

Гидроизоляция поверхности фундамента после прокладки  сетей электроснабжения  

ЭС-11 

20.04.2020 

Акт технической готовности электромонтажных работ  

Наименование исполнительной схемы  

Лист № 

Исполнительная схема № 1. Траншея ТК1 

1 

Исполнительная схема № 2. Подвешивание существующих кабелей при прокладке проектируемых 

силовых кабелей 

2 

Исполнительная схема № 3. Подвешивание существующего трубопровода безнапорной фекальной  канализации при прокладке силовых кабелей  

3 

Исполнительная схема № 5. План прокладки силового кабеля 

4 

 

Исполнительная документация к акту № 12 КС-2 «Временное электроснабжение объекта» 

Номер акта освидетельствования 

дата акта  

освидетельствования 

Работы, предъявленные к освидетельствованию 

ГЭС 

01.11.2020  

монтаж распределительных шкафов, коммутационной  аппаратуры, силового кабеля, распределительных коробок,  прожекторов освещения, штепсельных розеток  

Наименование исполнительной схемы  

Лист № 

Временные сети энергоснабжения. Главная схема принципиальная однолинейная.  

1 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ГРЩ1 

2 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ЩР1 

3 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ЩР (-3)  

4 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ЩР (-2)  

5 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ЩР (-1)  

6 

Временные сети энергоснабжения. Схема принципиальная однолинейная ЩР (+6)  

7 

В случае неисполнения требования об исполнении обязательства в натуре взыскать  

с ООО «АиК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО «Фрихауз»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебную неустойку, начиная с одиннадцатого  календарного дня с даты вступления решения суда в законную силу, в размере 500 руб. за  каждый день просрочки исполнения до момента фактического исполнения судебного акта.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АИК" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Фрихауз" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 01.03.2023 9:08:00

Кому выдана Танова Диана Григорьевна