АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

01 сентября 2020 года

Дело № А33-10250/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 августа 2020 года.

В полном объёме решение изготовлено 01 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Сталь Партнер" (ИНН 2465260090, ОГРН 1112468057460, дата регистрации – 29.09.2011, адрес: 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.27, офис № 22)

к обществу с ограниченной ответственностью "ПСМ-Иркутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации – 09.11.2006, адрес: 664003, 

<

...>)

о расторжении договора, взыскании задолженности и неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 10.01.2020, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сталь Партнер" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПСМ-Иркутск" (далее – ответчик) о расторжении договора субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019, о взыскании задолженности в размере 2 056 266,89 руб. по договору субподряда от 08.05.2019 № 08-05/19, неустойки в размере 205 626,68 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 24.03.2020 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик отзыв на исковое заявление в материалы дела не представил.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между ООО «ПСМ-Иркутск» (Заказчик) и ООО «Сталь Партнер» (Подрядчик) заключен договор субподряда №08-05/19 от 08.05.2019, в соответствии с пунктом 1.1. договора подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по монтажу металлоконструкций, предоставленных заказчиком, а заказчик, со своей стороны обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном договором.

Пунктом 1.2. договора установлено, что монтаж металлоконструкций производится на объекте: ГОУ-1 (юго-запад), код ИСР 16001 «Трасса газоходов ГОУ 1», на строительной площадке по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, в 2,4 км на север от восточной границы поселка ж/д станции Акульшет, в 400 м на северо-запад от железнодорожной ветки Тайшет-Лена, в 3 км на юго-восток от южной границы с. Старый Акульшет (строительная площадка ООО «РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод»).

Стоимость работ, сроки выполнения работ и порядок оплаты по настоящему договору определяется в Приложении № 1 «Протокол договорной цены» к настоящему договору. Цена работ включает в себя все налоги и сборы, подлежащие уплате, в том числе НДС, а также все расходы подрядчика, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему договору (пункт 2.1. договора).

Оплата по настоящему договору (приложениям к нему) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет подрядчика (пункт 2.4.договора).

В соответствии с пунктом 3.3. договора сроки выполнения работ определены в Приложении № 1 «Протокол договорной цены» к настоящему договору  

Пунктом 3.4. договора предусмотрено, что подрядчик приступает к исполнению принятых обязательств в согласованные сторонами сроки при условии выполнения заказчиком принятых обязательств, предусмотренных настоящим договором, приложениями к нему.

Согласно пункту 3.4.1. договора, до   начала  работ   по   настоящему   договору   заказчик передаёт/предоставляет Подрядчику: Проектно-Сметную документации со штампом Заказчика «В производство работ» в 2-х экземплярах.  

Пунктом 3.6. договора установлено, что сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится ежемесячно по фактически выполненным работам с оформлением сторонами акта приема-передачи выполненных работ (части выполненных работ) формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (далее по тексту - акты, справки). Работа считается выполненной в день подписания актов.

Пунктом 4.1. договора установлена обязанность заказчика:

4.1.1. Обеспечить осуществление оплаты в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

4.1.2. Передать Подрядчику до начала производства работ всю необходимую проектно-сметную документацию, в том числе ППР в 2-х экземплярах с отметкой Заказчика «в производство работ».

4.1.3. Передать Подрядчику до начала производства работ строительную площадку, готовую для производства работ. Передача строительной площадки производится на основании подписанного уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки с согласованием мер по обеспечению техники безопасности и пожарной охраны.

Строительная площадка считается пригодной для производства работ в соответствии с установленными нормативными требованиями, а также, в том числе при соблюдении следующих условий:

- предоставлены точки подключения электроэнергии и воды;

- Заказчиком предоставлены Подрядчику исполнительные схемы, чертежи шифров КЖ и КМ на произведенные на строительной площадке подготовительные работы (в том числе подготовленный фундамент);

- выполнено освещение строительной площадки.

4.1.4. Назначить уполномоченного представителя Заказчика, осуществляющего взаимодействие с Подрядчиком, в том числе при выполнении работ по монтажу металлоконструкций на объекте. Информация о назначении уполномоченного представителя направляется Заказчиком Подрядчику в форме доверенности или в виде уведомления за подписью руководителя/или иного уполномоченного лица Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

В случае непредоставления уполномочивающих документов Заказчиком, любое лицо, осуществляющее взаимодействие с Подрядчиком будет являться надлежащим лицом, а полномочия данного лица считаться явствующими из обстановки, в которой действует представитель в соответствии с п. 1. ст. 182 Гражданского Кодекса РФ.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора Заказчик обязан предоставить Подрядчику данные об адресах электронной почты Заказчика. При отсутствии предоставления указанных данных используется следующий адрес для направления документов, корреспонденции Заказчику: sp.priem@gmail.com.

4.1.5. К моменту начала работ Заказчик обязан предоставить на стройплощадке место для бытовых помещений сотрудников Подрядчика, инструментальных будок, сварочных аппаратов, газовой аппаратуры и других инструментов и материалов.

4.1.6. Предоставить Подрядчику возможность использовать для выполнения работ водо- и энергоресурсы.

4.1.7. В течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от Подрядчика уведомления об обстоятельствах и событиях, которые могут привести к опасным последствиям для персонала; к порче или гибели имущества; оказать негативное влияние на ход работ, их качество и сроки завершения, угрожать годности или прочности результатам выполняемых работ, Заказчик обязан дать указания Подрядчику о дальнейших действиях:

4.1.8. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика уведомления о готовности работ (этапа работ) осуществить приемку соответствующих работ.

4.1.9. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, в том числе с момента начала работ по монтажу металлоконструкций и до их завершения. Заказчик должен вести Журнал производства работ. Оформлять необходимую исполнительскую документацию, промежуточные акты (в необходимых случаях).

Исполнительская документация определяется как комплект документов, состав которых предусмотрен СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и РД-11-02-2006 «Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции...».

4.1.10. Обеспечить на весь период выполнения работ на объекте охрану всей строительной площадки, в том числе, на которой будут выполняться работы, храниться оборудование, техника и другие материальные ценности Заказчика.

4.1.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

В соответствии с пунктом 4.4.1. договора Подрядчик вправе требовать от заказчика выполнения обязательств, принятых по настоящему договору и действующему законодательству.

Согласно пункту 5.1. договора стороны несут ответственность за неисполнение ИЛИ ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5.3. договора предусмотрено, что в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (за исключением оплаты, определенной в приложениях как «предоплата» или «аванс»), предусмотренных настоящим договором Подрядчик вправе предъявить, а Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от неисполненного обязательства.

При возникновении разногласий по настоящему договору, стороны урегулируют их путем переговоров (предъявления претензии), в случае не достижения согласия споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца (пункт 6.1. договора).

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2019года, а в части Принятых обязательств - до их исполнения; в части расчетов - до полного их завершения (пункт 8.1. договора).

08 мая 2019 года сторонами подписано Приложение № 1 к договору субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019.

В соответствии с пунктом 1 спецификации от 08.05.2019 (Приложение №1 договору) и пунктом 1.1. договора истец обязался выполнить Укрупненную сборку и монтаж металлоконструкций ГОУ-1 (юго-запад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1», предоставленных ответчиком,  825 тонн (ориентировочное количество работ), общая ориентировочная стоимость с НДС (20 %) составила 21 285 000 руб.

Пунктом 2 Приложения № 1 к договору установлено, что заказчик для выполнения работ предоставляет за свои счет материалы, грузоподъемные механизмы, чертежи и всю документацию, для выполнения работ, также заказчик обеспечивает за свой счет проживание работников Подрядчика на объекте заказчика. Подрядчик за свой счет предоставляет инструменты и расходные материалы к инструментам (в том числе электроды, сварочная проволока, диски отрезные). Подрядчик за свой счет обеспечивает питание своих рабочих на объекте Заказчика.

Пунктом 4.1. Приложения № 1 к договору установлено, что работы, предусмотренные пунктом 1.1 в объеме 825 тони, должны будут произведены Подрядчиком в течение 230 календарных дней с момента подписания настоящего приложения.

В соответствии с пунктом 4.2. Приложения № 1 к договору установлено, сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится ежемесячно пофактически выполненным работам с оформлением сторонами акта приема-передачи выполненных работ (части выполненных работ) формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (далее по тексту - акты, справки). Работа считается выполненной в день подписания актов.

Пунктом 5.1. Приложения № 1 к договору согласованы следующие условия оплаты: заказчик производит оплату за выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1 ежемесячно по фактически выполненным работам, с подписание актов согласно пункту 4.2. настоящего приложения. Оплата производиться не позднее 10 числа текущего месяца за прошедший месяц, по которому были приняты работы и подписаны акты согласно пункту 4.2. настоящего приложения.

Предусмотренные договором и Приложением к договору № 1 работы выполнены подрядчиком не в полном объеме. Сумма выполненных подрядчиком работ по договору составила 2 461 266,89 руб.

Согласно пояснениям истца причиной неисполнения подрядчиком обязательств по договору в полном объеме послужили виновные действия заказчика, так ООО «ПСМ-Иркутск» затягивало предоставление машин и агрегатов для выполнения работ по договору, предоставляло некачественные материалы и прочее, что способствовало срыву выполнения сроков работ, а в дальнейшем, к невозможности окончания работ.

Так, заказчиком в нарушение пункта 4.1.3. договора нарушен порядок передачи  строительной площадки.

В нарушение пункта 2 Приложения № 1 к договору переданные заказчиком материалы для выполнения работ были бракованные, либо не соответствовали технической документации.

Также заказчиком не была исполнена обязанность по представлению грузоподъемных механизмов для выполнения работ по договору (пункт 2 Приложения № 1 к договору), что подтверждается письмами подрядчика исх. № 358 от 30.05.2019, исх. № 422 от 02.07.2019, исх. № 485 от 06.08.2019, исх. № 523 от 23.08.2019.

Кроме того, письмом с исх. № 524 от 23.08.2019 истец уведомил ответчика о необходимости вызова на объект в целях продолжения работ инженера геодезиста.

Вышеизложенные обстоятельства, по мнению истца, привели к невозможности дальнейшего выполнения работ, предусмотренных договором субподряда №08-05/19 от 08.05.2019. Впоследствии истцу стало известно о том, что с ООО «ПСМ-Иркутск» был расторгнут основной договор подряда, на основе которого ответчиком был заключен спорный договор субподряда с истцом.

В соответствии с актами приема-передачи выполненных работ истцом были выполнены, а ответчиком приняты следующие работы:

1. Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» за период с 08.05.2019 по 25.07.2019 на сумму 521 056,80 руб. согласно акту КС-2 №1 и справке КС-3 №1 от 25.07.2019, счет-фактуре №197 от 25.07.2019;

2. Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 26, 28, 30, 34. 53, 56 за период с 25.07.2019 по 29.08.2019 на сумму 477 300 руб. согласно акту КС-2 №3 и справке КС-3 №3 от 04.10.2019, счет-фактуре № 321 от 04.10.2019;

3. Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 60, 64, 68, 71, 72, 72п, 60-61, 62-63, 66-67, 69-70 за период с 01.10.2019 по 17.10.2019 на сумму 970 570,20 руб. согласно акту КС-2 №2 и справке КС-3 №2 от 17.10.2019, счет-фактуре № 227 от 17.10.2019;

4. Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 26, 28, 30, 34, 53, 56 за период с 01.12.2019 по 12.12.2019 на сумму 492 339,89 руб. согласно акту КС-2 №1 и справке КС-3 №1 от 12.12.2019, счет-фактуре №312 от 12.12.2019.

Общая стоимость выполненных истцом работ составила 2 461 266,89 руб.

Ответчик, частично оплатил выполненные работы в сумме 400 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №1283 от 22.08.2019 (на сумму 200 000 руб.) и № 1479 от 20.09.2019 (на сумму 200 000 руб.). Указанные платежи были произведены за ответчика третьим лицом - ООО ФСК «Промстроймонтаж» с назначением платежа: по счету № 293 от 22.08.2019.

Кроме того, в соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года 5000 руб. были зачтены сторонами взаимозачетом, в связи с тем, что в отношении истца был выставлен штраф в размере 5000 руб. за курение в месте для этого не предусмотренном.

Всего с учетом зачета и частичной оплаты, неисполненная ответчиком сумма обязательств по оплате составила 2 056 266,89 руб., на которую истцом начислена неустойка в соответствии с пунктом 5.3. договора. Согласно расчету истца сумма пени составила 205 626,68 руб.

Письмом исх. № 42 от 04.02.2020 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о расторжении договора, погашения задолженности и пени. Указанное требование получено ответчиком 14.02.2020 (РПО № 66006441094369) и оставлено без удовлетворения.

Неоднократное нарушение ответчиком условий договора, а также неисполнения обязательств по оплате выполненных работ послужили основанием для обращения истца в арбитражный с исковым заявлением о расторжении договора субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019, о взыскании задолженности в размере 2 056 266,89 руб. по договору субподряда от 08.05.2019 № 08-05/19, неустойки в размере 205 626,68 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьями 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор от № 08-05/19 от 08.05.2019, правоотношения по которому регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В подтверждение факта выполнения работ по договору субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019 на сумму 2 461 266,89 руб. истец представил в материалы дела:  

1. Акт КС-2 №1 и справку КС-3 №1 от 25.07.2019, счет-фактуру №197 от 25.07.2019, на выполнение работ: Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1», за период с 08.05.2019 по 25.07.2019, на сумму 521 056,80 руб.;

2. Акт КС-2 №3 и справку КС-3 №3 от 04.10.2019, счет-фактуру № 321 от 04.10.2019, на выполнение работ: Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 26, 28, 30, 34. 53, 56, за период с 25.07.2019 по 29.08.2019, на сумму 477 300 руб.;

3. Акт КС-2 №2 и справка КС-3 №2 от 17.10.2019, счет-фактура № 227 от 17.10.2019, на выполнение работ: Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 60, 64, 68, 71, 72, 72п, 60-61, 62-63, 66-67, 69-70, за период с 01.10.2019 по 17.10.2019 на сумму 970 570,20 руб. согласно;

4. Акт КС-2 №1 и справка КС-3 №1 от 12.12.2019, счет-фактура №312 от 12.12.2019, на выполнение работ:Укрупненная сборка и монтаж м/конструкций ГОУ-1 (югозапад) код ИСР 160101 «Трасса газоходов ГОУ 1» опоры 26, 28, 30, 34, 53, 56, за период с 01.12.2019 по 12.12.2019, на сумму 492 339,89 руб. 

Вышеуказанные акты по форме КС-2 и справки и справки по форме КС-3 подписаны со стороны ответчика без каких-либо претензий по объему и качеству выполненных истцом работ. 

Общая стоимость выполненных истцом и принятых ответчиком работ составила 2 461 266,89 руб.

Ответчик, частично оплатил выполненные работы в сумме 400 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №1283 от 22.08.2019 (на сумму 200 000 руб.) и № 1479 от 20.09.2019 (на сумму 200 000 руб.). Указанные платежи были произведены за ответчика третьим лицом - ООО ФСК «Промстроймонтаж» с назначением платежа: по счету № 293 от 22.08.2019.

Кроме того, в соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года 5000 руб. были зачтены сторонами взаимозачетом, в связи с тем, что в отношении истца был выставлен штраф в размере 5000 руб. за курение в месте для этого не предусмотренном.

Всего с учетом зачета и частичной оплаты, неисполненная ответчиком сумма обязательств по оплате работ составила 2 056 266,89 руб. Доказательства оплаты задолженности на указанную сумму ответчик в материалы дела не представил.

В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования ООО «Сталь Партнер» и взыскания с ООО «ПСМ-Иркутск» задолженности в сумме 2 056 266,89 руб.

Помимо требования о взыскании задолженности по договору субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019 истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки, исчисленной на основании пункта 5.3. договора в размере 205 626,68 руб. за период с 11.08.2019 по 16.03.2020.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Из вышеприведенных положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности, просрочка исполнения обязательства. При этом условие о применение неустойки как меры гражданско-правовой ответственности может быть предусмотрено как договором, так и законом.

Пунктом 5.3. договора предусмотрено, что в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты (за исключением оплаты, определенной в приложениях как «предоплата» или «аванс»), предусмотренных настоящим договором Подрядчик вправе предъявить, а Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от неисполненного обязательства.

Пунктом 5.1. Приложения № 1 к договору согласованы следующие условия оплаты: заказчик производит оплату за выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1 ежемесячно по фактически выполненным работам, с подписание актов согласно пункту 4.2. настоящего приложения. Оплата производиться не позднее 10 числа текущего месяца за прошедший месяц, по которому были приняты работы и подписаны акты согласно пункту 4.2. настоящего приложения.

Материалами настоящего дела факт неисполнения заказчиком обязанности по оплате выполненных работ в установленный пунктом 5.1. Приложения № 1 к договору срок (10 числа текущего месяца за прошедший месяц, по которому были выполнены работы) подтвержден, и ответчиком не опровергнут. Вследствие чего привлечение заказчика по договору субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019 к ответственности в виде неустойки на основании пункта 5.3. договора является правомерным. Истом правомерно снижена сумма неустойки до 205 626,69 руб. с учетом ограничения, установленного пунктом 5.3. договора до 10% от суммы неисполненного обязательства.

Представленный истцом расчет взыскиваемой суммы пени проверен судом и признан верным.

С учетом изложенного, а также того, что материалами дела подтвержден и доказательствами ответчика не опровергнут факт неисполнения им денежного обязательства по оплате стоимости выполненных работ по договору субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019 в установленные сроки, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного ООО «Сталь Партнер» требования о взыскании с ООО «ПСМ-Иркутск»  неустойки в размере 205 626,69 руб. 

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом по заявлено требование о расторжении договора субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019 в связи с существенным нарушением договора другой стороной, а именно нарушением сроков оплаты по договору, нарушением порядка передачи строительной площадки, нарушения порядка представления материалов для выполнения работ (представлялись бракованные, либо не соответствовали технической документации), нарушение обязанности по предоставлению грузоподъемных механизмов для выполнения работ, невыполнения требований подрядчика о предоставлении инженера геодезиста для проведения работ (письмо с исх. № 524 от 23.08.2019), а также последующее расторжение договора ООО «ПСМ-Иркутск» основного договора, в рамках которого  был заключен спорный договор.

Кроме того, истец поясняет, что согласно условиям пункта 4.2. договора ответчик обязался обеспечивать непрерывный режим финансирования (оплата ежемесячно) в течение всего периода выполнения работ, что, по его мнению, также признается существенным нарушением условий договора.

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

По условиям статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Из содержащегося в пункте 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации понятия существенного нарушения договора одной из сторон (существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора) следует, что сторона, предъявляющая в суд требование о расторжении договора по этому основанию, должна представить доказательства, подтверждающие именно такой характер нарушения.

На основании части 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Со стороны ООО «ПСМ-Иркутск» ответа на уведомление (Претензия от 04.02.2020 с исх. № 42) о расторжении договора не последовало.

Истец указывает на существенное нарушение заказчиком условий договора. В силу положений статьи 407 ГК РФ, обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими законами иными правовыми актами или договором.

Пунктами 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Из представленной в материалы дела переписки сторон (письма № 422 от 02.07.2019, от 06.08.2019 с исх. № 485, от 23.08.2018 с  исх. № 523, от 23.08.2018 с исх. № 524) усматривается, что истец в связи с длительным неисполнением сторонами договора, в том числе в части оплаты заказчиком выполненных и принятых работ, предложил ответчику расторгнуть договор субподряда.

Предложение о расторжении спорного договора субподряда оставлено ответчиком удовлетворения.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что, поскольку доказательства оплаты выполненных по договору работ ответчиком в материалы дела не представлены, срок оплаты выполненных работ существенно нарушен, работы, как следует из представленных в материалы дела документов, выполнены в соответствии с заключенным договором, имеет место существенное нарушение условий договора субподряда № 08-05/19 от 08.05.2019.

При указанных обстоятельствах, требование о расторжении договора субподряда заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению. 

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления составляет 40 309 руб.  и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, в свою очередь 60 143 руб. излишне перечисленной государственной пошлины подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110,167 – 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Расторгнуть  договор субподряда от 08.05.2019 № 08-05/19, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Сталь Партнер" и  обществом с ограниченной ответственностью "ПСМ-Иркутск".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПСМ-Иркутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  09.11.2006) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сталь Партнер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  29.09.2011) 2 056 266,89 руб. задолженности, 205 626,68 руб. неустойки (пени), 40 309  руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Сталь Партнер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  29.09.2011) из федерального бюджета 60 143 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №6607 от 12.12.2019. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.А. Куликовская