35/2022-53421(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-36419/2021

г. Новосибирск

4 марта 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А,  при ведении протокола помощником судьи Афанасьевым А.Н., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения города Новосибирска "Управление технического надзора за  ремонтом жилищного фонда" (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к  обществу с ограниченной ответственностью "Союздорстрой" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск, об обязании устранить недостатки работ,  взыскании штрафа в размере 509 766 руб. 55 коп.,,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Союздорстрой"  (ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления решения в  законную силу исполнить гарантийные обязательства по муниципальному  контракту от 08.06.2018 № 0851300000518000005-0393605-01, а именно:  

по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 26, устранить:  

- трещины в асфальтобетонном покрытии на проезжей части со  стороны главного и дворового фасада;  

- трещины в асфальтобетонном покрытии на тротуаре между  подъездами №№ 5,6;  

- разрушение участка асфальтобетонного покрытия на стыке парковки  и проезда между подъездами №№ 5, 6;  

- просадка асфальтобетонного покрытия на стыке парковки и проезда  между подъездами №№ 3, 4, 5;  

- трещины на тротуаре между подъездами №№ 2, 3; 

- разрушение асфальтобетонного покрытия по всему периметру дома у  бортовых камней на проезде главного фасада;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия на тротуаре (в зоне  подъезда № 2);  

- трещина на тротуаре со стороны дворового фасада возле подъездов   №№ 3,5,6;  

- просадка асфальтобетонного покрытия на проезде со стороны  дворового фасада от подъезда № 5 до подъезда № 2.  

по ул. 3-й пер. Крашенинникова, д. 10: - провал асфальтобетонного покрытия проезда у подъездов №№ 1, 2; 

- трещины в асфальтобетонном покрытии проезда.  

Исковые требования о взыскании штрафа размере 509 766 руб.55 коп.  оставить без рассмотрения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Союздорстрой" (ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального  казенного учреждения города Новосибирска "Управление технического  надзора за ремонтом жилищного фонда" (ОГРН 

<

***>) расходы по  оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска  "Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда" выдать  справку на возврат государственной пошлины в размере 13 195 руб.,  уплаченной по платёжному поручению № 661 от 24.12.2021.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 0:36:48

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна