63/2021-33494(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь)

Дело № А13-455/2021

город Вологда

30 марта 2021 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в муниципальный контракт от 21.09.2020 № 31 на выполнение  работ по разработке проектно-сметной документации по объекту  «Реконструкция системы водоснабжения с. им. Бабушкина и п. Юрманга  Вологодской области со строительством водопроводных очистных  сооружений», заключенный между закрытым акционерным обществом  инженерно-консалтинговой фирмой «Вологдакоксконсульт» и Администрацией  Бабушкинского муниципального района, следующие изменения:  

- изложить пункт 3.1 контракта в следующей редакции: «Срок  выполнения работ: начало выполнения работ – 17 мая 2021 года; конечный  срок выполнения и сдачи работ – 27 сентября 2021 года, в том числе  получение положительного заключения государственной экспертизы: не  позднее 27 августа 2021 года.»;  

- дополнить пункт 6.2 контракта подпунктом 6.2.4:  

«6.2.4. Представить исполнителю полный комплект исходных данных в  срок до 17 мая 2021 года включительно».  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дегтярева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2020 5:34:41

 Кому выдана Дегтярева Елена Викторовна