Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А15-2461/2023

02 ноября 2023 года

г. Махачкала

 

 Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2023 года 

 Полный текст решения изготовлен 02 ноября 2023 года  

 Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Еврострой" (ИНН 

<

***>) к ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании задолженности по дополнительным работам по государственному контракту  от 30.10.2020 № 3367 в размере 2772452,40 руб.,  

 при участии в судебном заседании от истца – ФИО2 (доверенность от 03.04.2023), от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

ООО "Еврострой" (далее – истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Республики  Дагестан с исковым заявлением к ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" (далее – ответчик,  учреждение) о взыскании задолженности по дополнительным работам по  государственному контракту от 30.10.2020 № 3367 в размере 2772452,40 руб.  

 К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено Министерство  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий Республики Дагестан (МЧС Дагестана).  

 В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования и  просила их удовлетворить.  

 Выслушав представителя истца, рассмотрев материалы дела и оценив,  руководствуясь статьей 71 АПК РФ, относимость, допустимость, достоверность каждого  доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их  совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,  объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд  установил следующее.  

 Как следует из материалов дела, на основании результатов определения поставщика  (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона (протокол  подведения итогов электронного аукциона от 09.10.2020 № 0103200008420003367-2) между  

ГКУ РД "Центр ГО и ЧС" (учреждение) и ООО "Еврострой" (подрядчик) заключен  государственный контракт от 30.10.2020 № 3367, по условиям которого заказчик передает,  а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному  ремонту склада ГО в г. Избербаш (далее – объект) в соответствии с техническим заданием  (приложение № 1 к контракту), графиком выполнения работ (приложение № 2 к контракту)  требованиями действующих норм и правил, СНиПов, ГОСТов, ВСН, техническими  условиями (при их наличии по предмету контракта).  

 Цена контракта составляет 10205000 руб. Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев,  установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд». Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без  изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных  условий исполнения настоящего контракта (п.2.1., п.2.3.).  

 Срок выполнения работ установлен до 15.12.2020 (п.3.4.), 

Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,  не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она  подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения,  которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего контракта  (п.9.1.).  

Подрядчик выполнил и сдал заказчику работы на общую сумму 10205000 руб., что  подтверждается КС-2 и КС-3 от 26.12.2020 № 1, от 29.04.2021 № 2, от 24.08.2021 № 3, от  27.12.2021 № 4. Заказчик перечислил подрядчику 10205000 руб., что подтверждается  платежными поручениями от 30.04.2021 № 44129, от 30.08.2021 № 537528, от 28.12.2021   № 422339, от 30.12.2020 № 386996. Данные обстоятельства сторонами не оспариваются.  

Кроме того, согласно КС-2 и КС-3 от 24.11.2021 № 5 подрядчик выполнил работы на  сумму 2772452,40 руб., которые заказчиком не приняты и не оплачены.  

Истец, ссылаясь на то, что ответчик не оплатил выполненные дополнительные работы  на сумму 2772452,40 руб., обратился в суд с исковым заявлением.  

 Рассмотрев материалы дела суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740),  проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения  государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного  или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или  муниципальных нужд.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить  строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов  производственного и непроизводственного характера работы и передать их  государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный  заказчик обязуется принять выполненные работ.  

Порядок заключения государственного контракта определен императивными  положениями статьи 48 Закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закона  N44-ФЗ) .  

Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставку  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд,  нужд бюджетных учреждений, в том числе, устанавливая единый порядок размещения  таких заказов (статья 1 Закона N 44-ФЗ).  

 Целями регулирования отношений, направленных на обеспечение государственных и  муниципальных нужд являются: обеспечение государственных и муниципальных нужд в  целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,  

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,  предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (статья 1  Закона N 44-ФЗ).  

Нормы пункта 1 статьи 740, пункта 1 статьи 766 Гражданского кодекса Российской  Федерации, части 2 статьи 34, части 3 статьи 55, пункта 6 части 1 статьи 95 Федерального  закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" относят предмет, срок  исполнения обязательств, в том числе сроки выполнения работ по контракту, а также цену  контракта к существенным условиям государственного (муниципального) контракта,  определяемым по результатам размещения заказа.  

 Согласно статье 767 ГК РФ изменения условий государственного или  муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами уменьшения  государственными органами или органами местного самоуправления в установленном  порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных  работ, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях,  предусмотренных законом.  

 В пункте 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении контракта  указывается, что его цена является твердой и определяется на весь срок исполнения  контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не  допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего  Федерального закона.  

Из материалов дела, следует, что подрядчик выполнил и сдал заказчику работы на  общую сумму 10205000 руб., что подтверждается КС-2 и КС-3 от 26.12.2020 № 1, от  29.04.2021 № 2, от 24.08.2021 № 3, от 27.12.2021 № 4. Заказчик перечислил подрядчику  10205000 руб., что подтверждается платежными поручениями от 30.04.2021 № 44129, от  30.08.2021 № 537528, от 28.12.2021 № 422339, от 30.12.2020 № 386996. Данные  обстоятельства сторонами не оспариваются.  

Кроме того, согласно КС-2 и КС-3 от 24.11.2021 № 5 подрядчик выполнил работы на  сумму 2772452,40 руб., которые заказчиком не приняты и не оплачены.  

 Отказывая в удовлетворении требования истца о взыскании стоимости выполненных  дополнительных работ на сумму 2772452,40 руб., указанных в КС-2 и КС-3 от 24.11.2021   № 5, суд исходил из следующего.  

Цена контракта составляет 10205000 руб. Цена контракта является твердой и  определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев,  установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд». Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без  изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных  условий исполнения настоящего контракта (п.2.1., п.2.3.).  

Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства,  не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она  подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения,  которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего контракта  (п.9.1.).  

Согласно пункту 5 статьи 709 Гражданского кодекса, если возникла необходимость в  проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении  определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно  предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в  договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик  может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик,  своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в  

договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по  цене, определенной в договоре.  

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической  документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и  увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.  

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если  законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок,  подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,  вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих  убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ  (пункт 3 статьи 743 Гражданского кодекса).  

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей  статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных  работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость  немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что  приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства  (пункт 4 статьи 743 Гражданского кодекса).  

В пункте 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по  договору строительного подряда" арбитражным судам рекомендовано исходить из того,  что подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных  работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и  в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем  заказчика.  

Вопреки требованиям ст.65 АПК РФ истец не представил в материалы дела  документальные доказательства исполнения им обязанности по уведомлению заказчика о  необходимости проведения дополнительных работ и совершения им действий,  предусмотренных частью 3 статьи 743 Гражданского кодекса;  

Судом установлено, что дополнительное соглашение об изменении цены контракта от  30.10.2020 № 3367 в соответствии со статье 95 Закона N 44-ФЗ стороны не заключали.  

В силу пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение  договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим  Кодексом, другими законами или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации  соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и  договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.  

С учетом выше приведенных положений Гражданского кодекса Российской  Федерации, Закона N 44-ФЗ, условий контракта, изменение объема работ и стоимости  контракта должны оформляться путем подписания дополнительного соглашения, либо  путем заключения нового контракта в порядке, установленном законодательством.  

Каких-либо дополнительных соглашений, свидетельствующих об изменении цены  контракта или сметы к контракту подрядчик не представил.  

По общему правилу поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в целях  удовлетворения государственных или муниципальных нужд без государственного или  муниципального контракта не порождает у исполнителя права требовать оплаты  соответствующего предоставления (пункт 20 Обзора судебной практики применения  законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, пункт 4 Обзора  судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), утвержденного  Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015, пункт 7  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  

Федерации от 25.02.2014 N 165, определение Верховного Суда Российской Федерации от  26.01.2016 N 303-ЭС-13256).  

Спорные работы на сумму 2772452,40 руб. в нарушение требований Закона N 44-ФЗ  выполнены без проведения аукциона и заключения соответствующего контракта, что  является основанием для отказа в иске. Общество, выполняя работы сверх объемов и  твердой цены, предусмотренных контрактом, должно было знать о том, что выполнение  этих работ не может быть в нарушение Закона N 44-ФЗ обеспечено встречным  обязательством заказчика по оплате этих работ.  

Данные выводы согласуются с позицией Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 по делу N  А40-37822/2012, от 04.06.2013 по делу N А23-584/2011, определениях Верховного Суда  Российской Федерации от 13.03.2015 N 307-ЭС14-4768, от 03.08.2015 по делу N 309-ЭС15- 26, постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.08.2016 N Ф08- 5021/2016 по делу N А20-2271/2015, постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.09.2017 N Ф08-6631/2017 по делу N А20-2181/2016.  

Доводы общества о том, что спорные работы выполнены при наличии согласия  заказчика на производство дополнительных работ, отклоняются, поскольку наличие  согласия не могут подменять собой дополнительное соглашение и не восполняет  отсутствие контракта, заключенного конкурентным способом. В связи с чем, в данном  случае, приступив к выполнению дополнительных объемов работ в отсутствие  подписанного дополнительного соглашения к контракту об изменении его твердой цены и  не заявив об отказе от выполнения дополнительных работ в связи с увеличением объема  работ без увеличения твердой цены контракта, подрядчик выразил согласие на выполнение  измененного объема работ в пределах твердой цены контракта (10205000 руб.), которые  заказчик полностью оплатил.  

Финансирование работ для государственных (муниципальных) нужд осуществляется  из средств бюджета, поэтому заключение государственного (муниципального) контракта в  установленном законом порядке является обязательным условием для сторон.  

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия в обход закона с  противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление  гражданских прав (злоупотребление правом). Согласно пункту 2 названной статьи в случае  несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд  или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления  отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также  применяет иные меры, предусмотренные законом.  

Пунктом 4 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе извлекать  преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.  

В рассматриваемом случае довод общества о наличии на стороне ответчика  необходимости оплаты выполненных истцом, в отсутствие заключенного  государственного контракта, работ, направлен на получение дополнительных  имущественных выгод от совершения действий в обход требований Закона N 44-ФЗ, в  связи с чем, это требование не подлежит судебной защите на основании статьи 10 ГК РФ.  

При таких обстоятельствах, исходя из пункта 4 статьи 1109 ГК РФ не подлежит  взысканию плата за фактически выполненные работы для государственных и  муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного или муниципального  контракта.  

Ссылка общества на то обстоятельство, что данные работы носили обязательный  характер, имеют для ответчика потребительскую ценность, выполнялись при  непосредственном согласии заказчика, подлежит отклонению, поскольку работы  выполнены без заключения контракта или дополнительного соглашения к контракту. Само  обстоятельство, что спорные работы необходимы не освобождает истца, как  

профессионального участника делового оборота, от надлежащего соблюдения норм  действующего законодательства.  

Заключение контракта способом закупки у единственного поставщика по смыслу  части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ может производиться в исключительных случаях, когда  применение иных конкурентных процедур невозможно в силу возникших чрезвычайных  обстоятельств и длительностью сроков проведения таких процедур.  

Доказательств наличия иных условий, определенных статьей 93 Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которые предусматривает возможность осуществление закупки у  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в частности вследствие аварии,  иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой  силы, в материалах дела не имеется, об их наличии не заявлено, судом не установлено.  

В материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о  невозможности заключения контракта в установленном порядке.  

Отсутствие заключенного в указанном порядке контракта не порождает у  исполнителя право требовать оплаты.  

С учетом изложенного в удовлетворении исковых требований о взыскании стоимости  выполненных дополнительных работ на сумму 2772452,40 руб., следует отказать.  

В соответствии со статьями 112 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, разрешаются  вопросы распределения между сторонами судебных расходов.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.  

 На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении искового заявления отказать. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд  Республики Дагестан.  

Судья Х.В. Оруджев