1 2111271_6763165  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-24510/2022

г. Уфа

28 сентября 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Ганеева Р.Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по иску  

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  БАШКИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

 к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛД" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ 

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛД" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение 30 дней со дня вступления в законную  

силу настоящего решения Арбитражного суда Республики Башкортостан исполнить  

гарантийные обязательства в рамках контракта № 0301100048817000018.2017.487424 от  

22.11.2017, а именно безвозмездно устранить недостатки: 1. Попадание грунтовых вод в приямок помещения узла ввода. 2.Нарушение герметичности двух доводчиков (подтекание масла) входной группы. 

3.Отсутствует фурнитура для закрытия и открытия ворот гаражей.  4. Некачественная отмостка.  

5.Отслаивание напольной плитки на первом этаже у входа в туалет в количестве 4  

штук. 

6. Отслаивание напольной плитки в котельной в количестве 4 штук.  

7. Проседание дорожки идущей по периметру здания (самой плитки, бордюр). 

8. При полном открывании двери кабинета № 22 происходит нажатие кнопки  пожарной тревоги находящейся на стене коридора.  

9. Из трёх водяных счётчиков указанных в спецификации «Альбома XI. котельная»  по факту установлен один.  

10. При визуальном осмотре стен и потолка помещений №№ 22, 23, 16, 15, 14, 18, 13,  11, 3, 4, 6, 7 и 5 имеются повреждения шпаклёвочного и покрасочного слоя, местами  происходит отслаивание и осыпание слоёв. Трещины есть на стыках плит перекрытия, в  местах прилегания плит перекрытия и стен, просто на стенах, в некоторых кабинетах в  местах прохождения трещин «порван» кафель на стенах.  

11. Отсутствует электропривод задвижки чугунной в приямке в помещении узла  ввода  

12.Образовалась трещина со стороны гаражей на кладке облицовочного кирпича,  начиная с проёма под ворота в гараж и до чердачного помещения.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛД"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БАШКИРСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6 000 руб. сумму расходов по оплате  государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Р.Ф. Ганеев