143/2019-51495(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-4525/2019

г. Салехард

11 октября 2019 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Воробьёвой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Управления строительства и архитектуры Администрации  муниципального образования Шурышкарский район (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании выполнить  работы по устранению недостатков, выявленных в период гарантийного срока,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3;  ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО10,  ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО14,  ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19,  ФИО20; муниципального образования Лопхаринское в лице  Администрации муниципального образования Лопхаринское (ИНН: 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>)  

при участии в судебном заседании: 

от истца – представитель ФИО21 по доверенности № 13 от 09.10.2019;  от ответчика – представитель не явился;  

от третьих лиц - представители не явились. 

Руководствуясь статьями 9, 16, 49, 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования Управления строительства и архитектуры  Администрации муниципального образования Шурышкарский район (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес (место регистрации): 629320,  Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой; дата и место  государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя –  30.11.2005 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ямало- 

Ненецкому автономному округу) в срок до 30.09.2020 устранить дефекты, выявленные  

в ходе гарантийной эксплуатации объектов, а именно: 

1. По муниципальному контракту № 43-17 от 20.06.2017г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>: 

1) выполнить комплекс работ по усилению свайного основания;  2) устранить трещины на капитальной стене;  

3) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

4) произвести подключение заземляющего контакта в розетках.  

2. По муниципальному контракту № 43-17 от 20.06.2017г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>: 

1) выполнить комплекс работ по усилению свайного основания;  2) устранить трещины на капитальной стене;  

3) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

4) выполнить перестилку дощатого полового покрытия с заменой поврежденных  

досок; 5) установить межкомнатную дверь; 

6) произвести утепление чердачного перекрытия в соответствии с проектной  

документацией; 7) произвести замену термоэлектронагревателей (ТЭНов); 8) произвести замену обоев; 9) произвести обработку очагов плесени противогрибковыми составами; 10) выполнить покраску потолка; 11) произвести замену уплотнителей на окнах; 12) произвести регулировку окон; 

13) определить места проникновения влаги во внутренние помещения через  

чердачное перекрытие и конструкцию кровли; 

14) выполнить ремонт дефектных участков кровли и чердака, в целях  

устранения проникновения воды в квартиру; 

15) заменить проводку и электрический счетчик в соответствии с СП  

256.1325800.2016 . 

3. По муниципальному контракту № 29-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести демонтаж «чистого пола», произвести замену досок, фанеры и  

линолеум «чистого пола», установить плинтуса. 

4. По муниципальному контракту № 49-16 от 16.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести демонтаж «чистого пола», произвести замену досок, фанеры и  

линолеум «чистого пола», установить плинтуса. 

5. По муниципальному контракту № 30-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести демонтаж «чистого пола», произвести замену досок, фанеры и  

линолеум «чистого пола», установить плинтуса; 

2) выполнить очистку трубы дымоотвода, выявить причину обратной тяги  

(погодные условия, конструкция или тип дымохода); 3) произвести замену обоев в комнатах; 4) произвести обработку очагов плесени противогрибковыми средствами; 5) покраску потолка; 

6) выполнить монтаж насоса с исключением протечек, заменить уплотнители.  

6. По муниципальному контракту № 50-16 от 16.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) выполнить очистку трубы дымоотвода, выявить причину обратной тяги  

(погодные условия, конструкция или тип дымохода); 2) произвести замену обоев; 

3) произвести обработку очагов плесени противогрибковыми средствами;  4) произвести покраску потолка;  

5) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 6) выполнить комплекс работ по усилению свайного основания; 7) устранить трещины на капитальной стене. 

7. По муниципальному контракту № 27-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>: 

1) заменить поврежденные гипсокартоновые листы 2) произвести замену обоев 

3) произвести обработку очагов плесени противогрибковыми средствами  4) произвести покраску потолка  

8. По муниципальному контракту № 25-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

2) выполнить утепление и герметизацию откосов, заменить уплотнители  

контура, при значительном повреждении двери от последствий некачественного  

монтажа выполнить ее замену; 

3) произвести очистку поверхности, обработку противогрибковыми средствами  

на деревянной отделке полотна и откосах входной двери 4) установить контур уплотнения на входной двери 

5) произвести очистку поверхности, произвести обработку противогрибковыми  

средствами на оконных откосах, выполнить покраску; 

6) произвести очистку поверхности, произвести обработку противогрибковыми  

средствами в углах и на потолке в квартире; 7) заменить обои в комнатах; 8) произвести покраску потолка в комнате; 9) установить устройство защитного отключения (УЗО); 10) подключить заземляющий контакт в розетках. 

9. По муниципальному контракту № 24-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

2) произвести установку дополнительных секций радиаторов отопления в  

комнатах; 3) подключить заземляющий контакт в розетках. 

10. По муниципальному контракту № 31-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>,:  

1) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 2) выполнить утепление и герметизацию откосов, входной двери; 

3) заменить уплотнители контура входной двери, при значительном  

повреждении двери от последствий некачественного монтажа выполнить ее замену; 

4) произвести очистку поверхности, произвести обработку противогрибковыми  

средствами на деревянной отделке полотна и откосах входной двери; 4) установить дополнительный контур уплотнения на входной двери; 

5) произвести замену проводки и электрического счетчика в соответствии с СП  

256.1325800.2016; 

6) произвести обработку противогрибковыми средствами углы комнат;  

7) заменить обоев в комнатах 

8) произвести обработку противогрибковыми средствами, произвести покраску  

потолка; 

9) произвести утепление чердачного перекрытия в соответствии с проектной  

документацией; 

10) определить места проникновения влаги во внутренние помещения через  

чердачное перекрытие и конструкцию кровли; 

11) выполнить ремонт дефектных участков кровли и чердака, в целях  

устранения проникновения воды в квартиру; 12) произвести установку дополнительных секций радиатора. 

11. По муниципальному контракту № 28-16 от 12.12.2016г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

2) произвести обработку противогрибковыми средствами;  3) произвести обработку противогрибковыми средствами углы комнат;  

4) заменить обои в комнатах; 

5) произвести обработку противогрибковыми средствами, произвести покраску  

потолка в комнатах; 

6) произвести выбор автоматических выключателей в соответствии с  

требованиями правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

12. По муниципальному контракту № 44-17 от 14.08.2017г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести утепление полов (устранить промерзание в виду недостаточного  

или некачественного утепления конструкции перекрытия); 

2) произвести демонтаж «чистого пола», произвести замену досок, фанеры и  

линолеум «чистого пола», установить плинтуса; 

3) произвести утепление чердачного перекрытия в соответствии с проектной  

документацией; 

4) произвести замену термоэлектронагревателей (ТЭНов);  

5) произвести выбор автоматических выключателей в соответствии с  

требованиям правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 6) произвести замену проводки в квартире 7) произвести замену электрического счетчика 8) произвести регулировку окон 9) заменить уплотнительные резинки на окнах 

10) выявить скрытые конструктивные дефекты пола, выполнить  

соответствующие ремонтные работы пола; 

11) произвести утепление чердачного перекрытия в соответствии с проектной  

документацией; 

12) произвести обработку стен комнат противогрибковыми средствами;  13) заменить обои в комнатах;  

14) произвести обработку потолка в комнатах антисептиком от плесени;  15) произвести покраску потолка в комнатах.  

13. По муниципальному контракту № 44-17 от 14.08.2017г. на приобретение  

квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>:  

1) произвести утепление чердачного перекрытия в соответствии с проектной  

документацией; 

2) произвести обработку стен комнат противогрибковыми средствами;  3) заменить обои в комнатах;  

4) произвести обработку потолка в комнатах антисептиком от плесени;  

5) произвести покраску потолка в комнатах. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>; адрес (место  регистрации): 629320, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой; дата  и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя –  30.11.2005 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ямало- Ненецкому автономному округу) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного  суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  http://faszso.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

В.С. Воробьёва

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 23.04.2019 13:58:01

Кому выдана Воробьева Виктория Сергеевна